설계변경자문회의(소위원회)결과(제3차)

【2015. 4. 2(목)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			김 구					요청일자			2015. 3
공 사 명			강남순환도시고속도로(8공구)건설공사										심의안건		④ 가시설(복공판) 미끄럼방지포장 설치
공 사 개 요			공사규모				○ 폭원4-10차도, 연장 7.96KM - 지하차도(4개소) : 2,790M, 교량(2개소) : 540M
			공사기간				2002. 07. 03 ~ 2018. 07. 31
			감 리 사				㈜동명기술공단건축사사무소
			설 계 사				㈜수성엔지니어링
			시 공 사				롯데건설(주)외 1개사
자문요청사유							5,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 449,000천원
설계변경사유(요약) ○ 화물터미널 앞 지하차도 공사구간은 도로경사가 급하고 선형이 불량하여 우천 및 노면 결빙시 대형 교통사고의 위험이 있어 가시설(복공판)에 미끄럼방지포장 시행
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 노임단가 적용시 오류가 있으니 재검토후 조정할 것(p41,p42) ○ 복공판 미끄럼방지포장 수량산출을 캐드상으로 산출하여 면적 확인이 어려우니, 산출근거 자료를 명확하게 재작성하고 이를 반영하도록 할 것 ○ 자재단가는 1개 제품만 조사하여 단가를 결정하기 보다는 예산절감 및 경제적인 측면에서 다른 제품, 견적, 물가정보지, 조달청단가 등을 추가 비교검토하여 반영하고 근거자료를 첨부할 것(p39) ○ 내리막 직선구간(이격식포장, 1-3방식)에 대한 미끄럼방지포장이 필요한 지 관련 규정 등을 다시한번 재검토해볼 것 ○ 신규 단가에 대한 협의율 조정 근거 자료가 누락되어 있으니 보완할 것
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원
	위 원

설계변경자문회의(소위원회)결과(제3차)

【2015. 4. 2(목)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			김 구					요청일자			2015. 3
공 사 명			강남순환도시고속도로(8공구)건설공사										심의안건		⑤ 주암교(수서방향) 가시설 및 구조물 변경
공 사 개 요			공사규모				○ 폭원4-10차도, 연장 7.96KM - 지하차도(4개소) : 2,790M, 교량(2개소) : 540M
			공사기간				2002. 07. 03 ~ 2018. 07. 31
			감 리 사				㈜동명기술공단건축사사무소
			설 계 사				㈜수성엔지니어링
			시 공 사				롯데건설(주)외 1개사
자문요청사유							5,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 75,000천원
설계변경사유(요약) ○ 과천시구간 도시계획 보상지연으로 인해 주암교 공사구간에 저촉되는 미 보상된 지장물(비닐하우스) 최소편입과 공사기간 단축을 위해 주암교 구조물 기초 형식 일체로 변경
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 산출근거상 그라우팅 주입량을 자유장+정착장+여유장까지 길이를 적용하였으나 자유장과 여유장은 인장력이 손실 될 경우를 대비해 jack으로 재인장을 주기 위한 부위이므로 그라우팅 주입은 삭제되어야 할 것으로 판단되니 다시한번 재검토후 반영할 것(p67~p70) ○ 자재단가에서 기 견적단가를 그대로 사용하고 있어 신규단가 대비가 어려우니 확인후 조정할 것(p77) ○ E/S 산출금액에 해당되는 자료가 없어 확인이 어려우니 목록 등 근거자료를 첨부할 것(p55) ○ 신규 단가에 대한 협의율 조정 근거 자료가 누락되어 있으니 보완할 것
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원
	위 원