문서번호	임대주택과-11687
결재일자	2015.9.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	임대계획팀장	임대주택과장		주택건축국장
협 조	주거복지팀장
	택지개발팀장
	장기전세팀장
	임대사업팀장
	공급지원팀장

제35차 임대주택 8만호 공정회의 결과

2015. 9.

주택건축국

(임대주택과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	SH공사
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

제35차 임대주택 8만호 공정회의 결과보고

Ⅰ				개 요

○ 일    시 : 2015.9.18.(금) 10:00 ~ 12:00

○ 장    소 : 3층 공용회의실

○ 참 석 자

- 서 울 시 : 임대주택과장, 담당팀장 외 담당

- SH공사 : 택지사업처장, 서비스혁신처장 외 담당팀장

○ 회의내용 : 민선6기 임대주택 8만호 공급계획

Ⅱ				회의결과

○ 주요 회의결과

유형별	사업명	회의 의견
공공주택 · 도시개발	항동지구	‣ 보상팀과 건설팀간의 일정조율 보고 할 것 - 보상팀 : 필지별 소송 진행현황, 판결예정 일자 - 건설팀 : 착공을 위해 필지별 지장물 등 철거 되어야 하는 일자 ‣ 착공 예정 일정 단축 할 것 - 계약심사결과 반영, 발주준비, 입찰공고 등
임차형	장기안심주택, 전세임대주택	‣ 장기안심주택 신청저조에 따른 원인 검토 및 대책 마련 할 것 ‣ 공급계획에 따른 추진실적 보고 할 것

유형별	사업명	회의 의견
매입형	다가구, 원룸	‣ 공급계획에 따른 추진실적 및 향후전망 계획 보고
세곡6		‣ 연내 착공할 수 있도록 일정 재수립 할 것 (추진 어려울시 대체물량 보고)
마곡9		‣ 소셜믹스정책 관련 보고자료 작성 할 것
거여(장기전세)		‣ 사업부지에 공사개시 등 안내표지판 설치
수서 모듈러		‣ 주민설명회 개최 관련 세부추진사항을 유기적으로 추진할 것
가양 모듈러		‣ 12월에 착공 가능토록 세부추진계획 검토 할 것

Ⅲ				행정사항

○ 차기 8만호 공정회의(제36차 임대주택 8만호 공정회의)

- 일시 : 2015.10.02.(금) 16:00 ~ 18:00

- 장소 : 추후 통보

- 참석자 : (서 울 시) 임대주택과장, 담당팀장 외 담당

(SH공사) 해당 처장 외 담당팀장

- 내용 : 전차 공정회의 결과 검토 및 실무협의 등.  끝.