설계변경자문회의(소위원회)결과(제4차)

【2014. 5. 20(화)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			이한규					요청일자			2014. 5
공 사 명			남부순환로(개봉역앞) 구조개선공사										심의안건		① 경계석(화강석) 형식변경에 따른 공사비 변경
공 사 개 요			공사규모				○ 남부순환로 구조개선 - 지하차도 : 폭4차로, 연장 736m - 남.북측측도 : 폭2~3차로, 연장 2,680m
			공사기간				2007. 9. 10 ~ 2014. 6. 30
			감 리 사				(주)동명기술공단, (주)동일기술공사
			설 계 사				(주)동명기술공단, (주)경화엔지니어링
			시 공 사				(주)케이에스씨건설, 대우조선해양건설(주)
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 73,799천원
설계변경 사유(요약) ○ 『서울시 보도공사 설계시공 매뉴얼 Ver1.0(서울시발행, 2013년3월)』에 의거 경계석(화강석) 형식 변경에 따른 공사비 변경.
원설계자 의견(요약)
자문결과		조건부가결			○ 보차도경계석 상면 전구간 미끄럼방지시설 설치 재검토 → 서울시 보도공사 설계시공 매뉴얼 기준을 준용하여 적용한다고 하지만 횡단보도 등 보행자 통행이 없는 구간은 제외하는 것이 바람직함. → 보차도경계석 상면 전구간 미끄럼방지시설 설치는 해당부서(보도환경개선과)와 재협의후 의견수렴하여 재검토해 볼 것 ○ 보차도경계석 기존자재 60% 유용분 재사용불가에 따른 처리비용 반영여부 재검토 → 폐기물처리 혹은 이관하는지 불확실함
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원