제457차 기술용역타당성 심사결과

□ 건    명 : 내용연수 경과 상수도관 진단 평가 용역(강남지역)

□ 심 사 일 : 2014. 3. 31

□ 요청부서 : 상수도사업본부 시설안전부

□ 사업개요

❍ 용 역 비 : 356,000천원

❍ 용역기간 : 착수일로부터 6개월

❍ 사업규모 : 내용연수 경과 및 경과 도래 상수도관 351㎞

(내용연수 경과 : 68㎞, 내용연수 미경과 : 283㎞)

□ 심사결과 : 적정(조건부)

심사항목	심 사 내 용
1. 용역의 필요성 [자체시행 47개 공종대상여부] □ 대 상 █ 미대상	본 용역은 내용연수가 경과되거나 향후 경과가 도래되는 상수도관에 대하여 정밀조사 등을 실시하고 이를 통해 얻어진 정성·정량적 자료를 이용하여 관로에 대한 직·간접 평가와 정밀평가를 실시함으로써 경과 연수별 상수도관 상태를 진단·평가하고 최적의 상수도 관망조성을 위한 세척 및 교체 기준을 마련하기 위한 사항으로 용역 시행의 필요성 있음.
	알림 : 주요 공종이 자체시행대상 용역인 경우 원칙적으로 발주부서 자체추진
2. 용역비 산정의 적정성 - 개략공사비 산정의 적정성 - 소요 기술인력 산정의 적정성	○ 용역비 조정 : 356,000천원 → 332,301천원 (감 23,699천원, 6.65%) 직접경비 조정 ․ 배수관 보정계수 조정 : 1.00→0.85(감 0.15)
3. 과업의 내용, 범위의 적정성 등 기타 검토의견	용역수행 과정에서 용역비 집행 및 정산관리에 철저를 기하기 바람
4. 리스크 관리항목 적정성 - 용역지연‧중단요인의 관리대책 적정성 - 용역비 증가요인의 관리대책 적정성	용역 발주시 명확한 과업 범위를 제시하여 용역수행 중 과업범위 변경 등으로 인한 용역비 증가를 최소화 할 것

[기술용역 추진시 사전 확인사항]

첨 부

확 인 항 목		세 부 내 용
용 역 시스템	1. 기술용역관리시스템에 추가(첨부) 등록	- 용역발주 전 최종 수정된 설계내역서 및 과업내용서를 기술용역관리 시스템에 추가 등록 ※ 기술심사담당관-600호(‘13.1.14) : 용역관리 시스템 개선
입찰전	2. 사업수행능력평가기준 - 심의절차 이행 - 건설기술심의위원회 심의	- 발주부서는 개별사업에 대한 사업수행능력 평가 세부기준을 입찰 시행전에 반드시 건설기술 심의절차 이행 · 단, 서울시 항목별 세부 평가 기준과 모든사항이 동일한 경우에는 기술심시담당관과 사전 서면 협의로 건설기술심의 대체 ※ 행정2부시장 방침 제97호(‘13.3.25) : 사업수행능력평가 개정시행
심 사 및 심의전 확 인	3. 유관부서 의견수렴 - 사업계획 수립시 T․F팀 구성 등 관련부서 참여여부 확인	- 기술용역타당성심사 및 건설기술심의 요청 전 유지관리부서 및 관련(유관)부서 의견 조회 등 의견수렴 · 사업계획 수립 시 계획부서, 공사부서, 유지관리부서 등 T․F팀 구성․운영하여 계획단계부터 사업참여 유도 · 유지관리부서 선정여부 등 유지관리방안의 적정성 검토 ※ 행정2부시장 방침 제173호(‘13.5.22) : 준공예정시설물 점검관련 매뉴얼 작성
타 당 성 조사용역	4. 타당성조사 용역시 과업내용서 반영사항	- 재원조달방안 및 사업의 타당성 재검증 범위 검토 · 타당성조사 용역 수행시 재원조달방안 및 타당성 재검증 검토 시행
용 역 준공시	5. 기술용역 성과품 공개이행철저 - 성과품공개 및 자료제공 - 정보소통광장 등록 철저이행	- 발주부서 는 ‘13.7.1부터 준공되는 모든 기술용역 성과품에 대해 정보소통광장(http://www.gov20.seoul.go.kr)등록 및 서울도서관에 제출 · 용역보고서 : PDF파일 변환하여 정보소통광장에 등록(준공시) · 전체성과품 : 인쇄본 3부 및 CD 1부 서울도서관 제출(준공시) → 서울도서관 디지털성과품 표준포맷 기준에 따라 작성 제출 ※ 시장방침 제135호(‘13.5.24) : 기술용역 성과품 공개 및 관리방안
설계시	6. 기본설계 및 실시설계 등 건설기술 용역 추진시 - 지장물 확인철저 - 지장물로 인한 설계변경 최소화	- 공사구간내 또는 인접구간의 지하매설물도는 우리시 통합공간정보 서비스(http://98.33.0.64/gis/index)내 지장물 현황과 비교 검토 · 아울러 지반조사, 현황 측량시에도 수치지형도를 최대한 이용
내 진	7. 내진대상 시설물 내진설계 반영 여부	- 모든 공공건축물(규모관계 없이) 및 지진재해대책법에서 정한 국가하천 수문, 교량 ․ 터널 등의 내진설계 대상시설물에 대해서는 기본 및 실시설계 시 내진설계를 반영 ※ 구조안전 및 내진설계확인서 작성확인철저(구조기술사)