제5차 설계변경 자문회의(소위원회) 검토의견 요약

건 명	검 토 의 견
장안교(구교) 성능개선공사 - 교량 하부 수변공간 조성 등 시공방법 변경	일위대가 호표 No.25 인조화강석블럭포장E(P59)의 잔토처리 단가 적용 기준 검토 바람(운반거리, 장비) 목재 가림벽 시설 구조검토 바람(구조분야 기술지원감리원 확인) 일위대가 (P60) 녹지경계석중 화강경계석 T150×W100 산출근거 보완바람(자재조서 P87)) 일위대가 (P62) 43호표 흄관부설 접합공 변경(수도배관관공 적용→일반 배관공 적용)이 필요하므로 검토바람 재료분리석 R의 레미콘 수량산출오류(무근 폭) 확인 후 수정바람 (50+150+50→50+100+50) 6.9 교량하부 시설물의 신규 내역서 재료비, 노무비, 경비 분류를 검토하기 바람(P34) 설계도면 자재 집계표 및 규격 기재하여 보완하기 바람(P162∼168)
천호대로(광나루역) 확장공사 - 동절기 구조물공사 증기양생비 실비정산	8.11 동절기공사 보양비(PS)조정 검토바람 (P23) 천막 수량은 ㎡당 단가 검토, 할증 수량 재검토바람 실비 정산으로 양생관리자 실투입근거 자료 보완바람(근무기록, 노임지급, 근무자 등)
새문안로 중앙버스전용차로 설치공사 - 다기능 교통단속장비 설치 검토	제34호표 잔토처리 적용 기준 검토 바람 야간 기계 경비 할증 검토 바람
서초역~방배로간 도로개설공사 - 터널 암판정(굴착패턴) 결과에 따른 공사비 변경	의견없음
서초역~방배로간 도로개설공사 - 터널굴착공법 변경에 따른 공사비 변경	의견없음
서초역~방배로간 도로개설공사 - 민간위탁공사(꽃마을) 지장상수도 이설	의견없음 (※ 신규단가에 대하여 설계가의 100%적용으로 협의근거서류 첨부)
서초역~방배로간 도로개설공사 - 민간위탁공사(지하철2호선) 안전점검	- 공사 전, 중, 후의 정밀점검비가 모두 같지만 공사중, 후에는 시간이 단축되므로 재검토 바람 신규 단가 협의 내용 보완 바람 초기 안전점검비(정밀점검의 30%) 적용하였으나 정밀점검 대가에 준하여 산출 필요하므로 검토 바람