제5차 설계변경 자문회의(소위원회) 결과

문서번호		요청부서		토목부 박웅교	요청일		2017년 05월
공 사 명	장안교(구교) 성능개선공사
공사개요	공사규모		- 기존교량 철거(B=17m, L=200m) - 교량신설 (B=17m, L=218m : 라멘교 + Pre-Flex Beam교) - 교통우회용 가교 : L=220m(TRIAS 공법)
	공사기간		2014.12.16. ~ 2017.08.31.
	감 리 사		㈜삼안, ㈜유신, ㈜경동엔지니어링
	설 계 사		㈜서영eng, ㈜삼보기술단
	시 공 사		새천년종합건설(주), ㈜서한기술공사
자문 안건명			교량 하부 수변공간 조성 등 시공방법 변경			요청금액		증 694,000천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			사업계획 변경(정책, 계획변경 등)
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 보행친화적 명품교량 건설과 함께 교량하부 중랑천 수변공간 등 주변경관(물놀이장 등)과 조화를 이뤄 시민들이 즐겨 찾을 수 있는 쾌적한 휴식공간 조성
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 해당없음
자문결과 : 조건부 가결 ❑ 자문의견 ○ 일위대가 호표 No.25 인조화강석블럭포장E(P59)의 잔토처리 단가 적용 기준 검토 바람(운반거리, 장비) ○ 목재 가림벽 시설 구조검토 바람(구조분야 기술지원감리원 확인) ○ 일위대가 (P60) 녹지경계석중 화강경계석 T150×W100 산출근거 보완바람(자재조서 P87)) ○ 일위대가 (P62) 43호표 흄관부설 접합공 변경(수도배관관공 적용→일반 배관공 적용)이 필요하므로 검토바람 ○ 재료분리석 R의 레미콘 수량산출오류(무근 폭) 확인 후 수정바람 (50+150+50→50+100+50) ○ 6.9 교량하부 시설물의 신규 내역서 재료비, 노무비, 경비 분류를 검토하기 바람(P34) ○ 설계도면 자재 집계표 및 규격 기재하여 보완하기 바람(P162∼168)

제5차 설계변경 자문회의(소위원회) 결과

문서번호		요청부서		토목부 권순환	요청일			2017년 05월
공 사 명	천호대로(광나루역) 확장공사
공사개요	공사규모		도로확장(6차로→10차로, L=900m), 지하차도 580m
	공사기간		2010. 10. 11 ~ 2017. 12. 31
	감 리 사		㈜수성엔지니어링
	설 계 사		㈜대한콘설탄트
	시 공 사		대보건설(주)외 1개사
자문 안건명			동절기 구조물 증기양생 정산보고			요청금액	61,347 천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			현장여건 상이(지질, 용수 등)
설계변경사항(요약) ○ 파형강판 안정성 평가 및 대안검토결과(대한토목학회)에 따른 주요 후속공정인 파형강판 설치공사 시행 공정지연 만회를 위해 중앙부 벽체 구조물공사 시공을 불가피하게 동절기에 시행(16.12.26 ~ 17.02.17, 54일간) 후 실비정산하고자함.
원설계자 의견(요약) ○해당없음
자문결과 : 조건부 가결 ❑ 자문의견 ○ 8.11 동절기공사 보양비(PS)조정 검토바람 (P23) ○ 천막 수량은 ㎡당 단가 검토, 할증 수량 재검토바람 ○ 실비 정산으로 양생관리자 실투입근거 자료 보완바람(근무기록, 노임지급, 근무자 등)

제5차 설계변경 자문회의(소위원회) 결과

문서번호		요청부서		토목부 담당 김상도	요청일		2017년 05월 일
공 사 명	새문안로 중앙버스전용차로 설치공사
공사개요	공사규모		• 아스콘 포장 일반차로 : 4.975a, 절삭후덧씌우기 : 129a 전용차로 : 93.2a • 교통시설물설치 1식 • 버스정류소 : 4개소
	공사기간		2016. 11. 30 ~ 2017. 06. 30
	감 리 사		㈜제일엔지니어링종합건축사사무소, ㈜삼안
	설 계 사		㈜도화엔지니어링
	시 공 사		국성산업개발(주)
자문 안건명			다기능교통단속장비 설치검토			요청금액		증 189,970천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 민원해결, 보수, 보강 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 공사 착수시 서울지방경찰청에서 요구한 다기능교통단속장비 설치 검토하여 반영.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 없음.
자문결과 : 조건부 가결 ❑ 자문의견 ○ 제34호표 잔토처리 적용 기준 검토 바람 ○ 야간 기계 경비 할증 검토 바람

제5차 설계변경 자문회의(소위원회) 결과

문서번호		요청부서		방재시설부 조 동 협	요청일		2017년 05월 일
공 사 명	서초역~방배로간 도로개설공사
공사개요	공사규모		□ 토공사 : 흙깎기 48,877m3, 흙쌓기 5,712m3, 사토 138,044m3 □ 구조물공사 : U-TYPE 155m, 개착터널 103m, L형옹벽 207m □ 터널공 : NATM 252m(병렬터널) □ 포장공 및 부대공, 조경공 1식 □ 민간위탁공사 1식
	공사기간		2015. 10. 20 ~ 2019. 01. 31
	감 리 사		㈜제일엔지니어링종합건축사사무소 외2개사
	설 계 사		㈜이산 외2개사
	시 공 사		롯데건설㈜
자문 안건명			터널 암판정 결과보고			요청금액		감 352,100천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			현장여건 상이(지질, 용수 등)
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 터널 막장 암질 변화에 따른 암판정 위원회를 구성하여 암판정을 실시하였으며, 암판정결과에 따른 터널 패턴 변경을 계약내역에 반영하고자 설계변경 심의를 요청함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 없음.
자문결과 : 원안 가결

제5차 설계변경 자문회의(소위원회) 결과

문서번호		요청부서		방재시설부 조 동 협	요청일		2017년 05월 일
공 사 명	서초역~방배로간 도로개설공사
공사개요	공사규모		□ 토공사 : 흙깎기 48,877m3, 흙쌓기 5,712m3, 사토 138,044m3 □ 구조물공사 : U-TYPE 155m, 개착터널 103m, L형옹벽 207m □ 터널공 : NATM 252m(병렬터널) □ 포장공 및 부대공, 조경공 1식 □ 민간위탁공사 1식
	공사기간		2015. 10. 20 ~ 2019. 01. 31
	감 리 사		㈜제일엔지니어링종합건축사사무소 외2개사
	설 계 사		㈜이산 외2개사
	시 공 사		롯데건설㈜
자문 안건명			터널 시점부 발파공법 변경			요청금액		증 146,300천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			민원해결, 보수, 보강
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 터널(방배방향)시점부 굴착공법을 지역주민(황실아파트) 민원 및 시험발파 결과에 따라 미진동발파에서 무진동 암파쇄 굴착공법으로 변경하여 계약내역에 반영하고자 설계변경 심의를 요청함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 없음.
자문결과 : 원안 가결

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		방재시설부 조 동 협	요청일		2017년 05월 일
공 사 명	서초역~방배로간 도로개설공사
공사개요	공사규모		□ 토공사 : 흙깎기 48,877m3, 흙쌓기 5,712m3, 사토 138,044m3 □ 구조물공사 : U-TYPE 155m, 개착터널 103m, L형옹벽 207m □ 터널공 : NATM 252m(병렬터널) □ 포장공 및 부대공, 조경공 1식 □ 민간위탁공사 1식
	공사기간		2015. 10. 20 ~ 2019. 01. 31
	감 리 사		㈜제일엔지니어링종합건축사사무소 외2개사
	설 계 사		㈜이산 외2개사
	시 공 사		롯데건설㈜
자문 안건명			민간위탁공사 중 미확정설계공종(상수도이설)반영			요청금액		증 108,900천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			현장여건 상이(지질, 용수 등)
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 민간위탁공사 중 미확정 설계공종인 상수도이설 시행전 시험터파기 결과 지장물이 산재되어 있어 당초 노선으로는 이설이 불가한 상태로 지장물이 간섭되지 않은 노선으로 이설하고 강남수도사업소 승인조건에 따라 부단수 공법을 적용하여 시행하고 계약내역에 반영하고자 설계변경 심의를 요청함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 없음.
자문결과 : 원안 가결 (※ 신규단가에 대하여 설계가의 100%적용으로 협의근거서류 첨부)

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		방재시설부 조 동 협	요청일		2017년 05월 일
공 사 명	서초역~방배로간 도로개설공사
공사개요	공사규모		□ 토공사 : 흙깎기 48,877m3, 흙쌓기 5,712m3, 사토 138,044m3 □ 구조물공사 : U-TYPE 155m, 개착터널 103m, L형옹벽 207m □ 터널공 : NATM 252m(병렬터널) □ 포장공 및 부대공, 조경공 1식 □ 민간위탁공사 1식
	공사기간		2015. 10. 20 ~ 2019. 01. 31
	감 리 사		㈜제일엔지니어링종합건축사사무소 외2개사
	설 계 사		㈜이산 외2개사
	시 공 사		롯데건설㈜
자문 안건명			민간위탁공사(지하철2호선)안전점검			요청금액		증 76,120천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 공사구간 중 종점(서초역) 환기구(NO.184) 이설 구간이 지하철2호선과 인접해 있어 관계법령에 의거 서울메트로와의 사전협의 결과에 따라 지하철 안전점검을 시행하고 계약내역에 반영하고자 설계변경 심의를 요청함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 없음.
자문결과 : 조건부 가결 ❑ 자문의견 ○ 공사 전, 중, 후의 정밀점검비가 모두 같지만 공사중, 후에는 시간이 단축되므로 재검토 바람 ○ 신규 단가 협의 내용 보완 바람 ○ 초기 안전점검비(정밀점검의 30%) 적용하였으나 정밀점검 대가에 준하여 산출 필요하므로 검토 바람