설계변경자문회의(소위원회)결과(제6차)

【2015. 6. 16(화)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			박근우					요청일자			2015. 5
공 사 명			겸재교 건설 및 연결도로 확장공사										심의안건		① 본선구간 방음벽 변경
공 사 개 요			공사규모				○ 교량 3개소(L=395m), 램프 2개소(R-A L=90m / R-B L=62m) 도로확장 1식, 보도육교 1식, 경사로 1식
			공사기간				2008.10.23 ~ 2015.12.31
			감 리 사				(주)동일기술공사, (주)건화
			설 계 사				(주)동일기술공사
			시 공 사				(주)한진중공업, (주)서우건영
자문요청사유							5,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				감 102,100천원
설계변경 사유(요약) ○ 중랑구측 방음시설을 덮개형으로 변경시 지역주민들의 민원요청 사항을 해결할 수 있고 또한 겨울철 강설시 미끄럼 안전사고를 방지할 수 있음으로 덮개형을 추가 설치
원설계자 의견(요약)
자문결과		조건부가결			○ 종점부(중랑구측) 방음벽은 형식만 변경(반터널형→터널형)하는 것으로 되어 있으나 수량이 상이하니 재검토후 조정할 것(p16) - 당초 : 반터널형 111m, 변경 : 터널형 106m ○ 종점부(중랑구측) 터널형 방음벽 단가산출시 수량이 상이하니 재검토후 조정할 것(p29~p31) - 수량산출시 : 당초(반터널형 111m), 변경(터널형 106m) - 단가산출시 : 터널형 113m
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원
	위 원

설계변경자문회의(소위원회)결과(제6차)

【2015. 6. 16(화)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			강철규					요청일자			2015. 6
공 사 명			의주로 지하차도 평면화공사										심의안건		② 교통안전시설(노면표시, 교통안전표지) 변경 설치
공 사 개 요			공사규모				○ BOX구간70ⅿ, U-Type옹벽180ⅿ, 토공되메우기180ⅿ
			공사기간				2015.02.04. ~ 2015.12.31.
			감 리 사				㈜삼보기술단
			설 계 사				㈜신성엔지니어링, ㈜유신
			시 공 사				㈜천명토건
자문요청사유							5,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 144,331천원
설계변경 사유(요약) ○ 서울지방경찰청 교통처리계획에 따라 서부도로사업소 및 서울지방경찰청 요구사항을 반영하여 교통안전시설(노면표시, 교통안전표지)를 변경 설치하고자 함
원설계자 의견(요약)
자문결과		조건부가결			○ 기계경비 산출시 유류대 적용에 대한 근거자료를 확인할 수 없으니 첨부하고 부가세가 포함되어 있는지 재확인후 반영할 것(p68,p69) ○ 교통안전표지(차선도색)에 대한 공정을 재검토후 반영할 것 - 문자·기호·횡단보도는 수동식 적용 - 실선과 파선은 자동식 적용
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원
	위 원

설계변경자문회의(소위원회)결과(제6차)

【2015. 6. 16(화)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			홍상필				요청일자				2015. 6
공 사 명			서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사										심의안건			③ 상부공 시공방법 변경
공 사 개 요			공사규모				○ 고가철거 및 신설 L=753m (고가설치405m, 옹벽설치: 208m, 기존보수보강: 140m)
			공사기간				2011.01.06. ~ 2015.12.31.
			감 리 사				(주)한국종합기술, ㈜선진엔지니어링 종합건축사사무소
			설 계 사				(주)동일기술공사외 1개사
			시 공 사				(주)흥화, 보훈종합건설(주)
자문요청사유							5,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 118,800천원
설계변경사유(요약) ○ 교량 상부공 슬라브 시공시 하부 교통통행에 따른 시공 안전성 및 품질확보를 위해 변경 (합판거푸집+목재동바리→프리캐스트 패널)함
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 동바리(데크피니셔) 수량산출시 돌출판(0.120)에 대한 수량을 확인할 수 없으니 재검토후 조정할 것(p113) ○ 리브데크(강변북로) 수량이 내역서와 단가산출서가 서로 상이하니 재검토후 조정할 것(p55, p130) - 내역서 : 397㎡, 수량산출서 : 396㎡ ○ 리브데크 제작시 Box 연결부(splice) 및 고장력 볼트 등을 고려하여 시공상세도 작성후 제작·시공하기 바람
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원
	위 원

설계변경자문회의(소위원회)결과(제6차)

【2015. 6. 16(화)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			박상철					요청일자			2015. 6
공 사 명			구리암사대교 연결도로 건설공사										심의안건		④ 방음벽(암사 Ramp-B) 규격 변경
공 사 개 요			공사규모				○ 사업연장(L) = 1.88km, 폭원(B) = 25.0~35.0m(6차로) 확장
			공사기간				2012. 8. 2 ~ 2015. 6. 30
			감 리 사				(주)도화엔지니어링, (주)제일엔지니어링종합건축사사무소
			설 계 사				(주)경화엔지니어링
			시 공 사				㈜신성건설, ㈜평광건설, ㈜대우종합조경
자문요청사유							5,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				감 138,000천원
설계변경사유(요약) ○ 방음벽 지주간격이 국토교통부 “방음벽 기초 표준도”와 설계도가 상이하여 방음벽 지주간격 조정(2m→4m)과 서울시민디자인위원회(‘14.8.6) 개최결과 방음판 재질을 강화접합유리로 확정된 사항을 변경하고자 함
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 방음판 재질이 변경(PC→강화접합유리)된 사항이므로 방음벽 자재(강화접합유리) 단가에 대해서만 협의율을 적용하고 그 외 단가는 계약단가(낙찰율)로 적용하는 것을 재검토해 볼 것 ○ 협의율 적용단가에 대한 근거자료(발주처, 감리단, 시공사 협의서)가 누락되어 있으니 보완할 것 ○ 방음벽 버림콘크리트 규격이 서로 상이하니 재검토후 조정할 것 - 내역서(규격) : 25-18-08, 도면(규격) : 25-16-08
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원
	위 원

설계변경자문회의(소위원회)결과(제6차)

【2015. 6. 16(화)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			박상철					요청일자			2015. 6
공 사 명			구리암사대교 연결도로 건설공사										심의안건		⑤ 미끄럼방지포장 반영
공 사 개 요			공사규모				○ 사업연장(L) = 1.88km, 폭원(B) = 25.0~35.0m(6차로) 확장
			공사기간				2012. 8. 2 ~ 2015. 6. 30
			감 리 사				(주)도화엔지니어링, (주)제일엔지니어링종합건축사사무소
			설 계 사				(주)경화엔지니어링
			시 공 사				㈜신성건설, ㈜평광건설, ㈜대우종합조경
자문요청사유							5,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 153,000천원
설계변경사유(요약) ○ 정수장사거리~훈련원사거리 교통소통대책 서울지방경찰청 교통규제심의 결과에 따라 미끄럼방지포장을 반영하고자 함
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 미끄럼방지포장 수량산출시 차선도색 및 노면 표시부 수량을 공제해야 할 것으로 판단되니 재검토후 조정할 것(p48)
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원
	위 원

설계변경자문회의(소위원회)결과(제6차)

【2015. 6. 16(화)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			박상철					요청일자			2015. 6
공 사 명			구리암사대교 연결도로 건설공사										심의안건		⑥ 절토사면 보강공법 반영
공 사 개 요			공사규모				○ 사업연장(L) = 1.88km, 폭원(B) = 25.0~35.0m(6차로) 확장
			공사기간				2012. 8. 2 ~ 2015. 6. 30
			감 리 사				(주)도화엔지니어링, (주)제일엔지니어링종합건축사사무소
			설 계 사				(주)경화엔지니어링
			시 공 사				㈜신성건설, ㈜평광건설, ㈜대우종합조경
자문요청사유							5,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 91,000천원
설계변경사유(요약) ○ 본선 절토사면(sta.1+280~1+860, L=580m, Hmax=25m) 구간 중 일부구간(sta.1+580~1+610, L=30m)에 파쇄대가 존재하고, 점토가 협재된 파쇄대 구간에 우수 침투 관련한 보강대책을 변경하고자 함
원설계자 의견 요약 :
자문결과		원안가결			○ 의견없음
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원
	위 원

설계변경자문회의(소위원회)결과(제6차)

【2015. 6. 16(화)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			이한규					요청일자			2015. 6
공 사 명			남부순환로(개봉역앞) 구조개선공사										심의안건		⑦ 아스팔트콘크리트 포장재료 변경
공 사 개 요			공사규모				○ 남부순환로 구조개선 - 지하차도 : 폭4차로, 연장 736m, 남·북측측도 : 폭2~3차로, 연장 2,680m
			공사기간				2007. 9. 10 ~ 2015. 6. 30
			감 리 사				(주)동명기술공단, (주)동일기술공사
			설 계 사				(주)동명기술공단, (주)경화엔지니어링
			시 공 사				(주)케이에스씨건설, 대우조선해양건설(주)
자문요청사유							5,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 106,425천원
설계변경사유(요약) ○ 유지관리부서(강서도로사업소) 및 시점부 주변 아파트 입주민들로부터 저소음 배수성 포장요구민원이 지속적으로 제기됨에 따라 민원사항을 반영한 아스팔트포장의 재질 변경으로 인한 공사비 변경
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 배수 유공관(Ø20mm) 설치를 위한 Asp포장 절단 및 깨기 수량이 상이하니 재검토후 조정할 것(p58, p161) - 실정보고시 : 5×5cm, 내역서 적용시 : 5×6cm ○ 배수 유공관(Ø20mm) 설치 주변은 공극이 발생되지 않도록 처리방안을 강구할 것
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원
	위 원

설계변경자문회의(소위원회)결과(제6차)

【2015. 6. 16(화)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			이한규					요청일자			2015. 6
공 사 명			남부순환로(개봉역앞) 구조개선공사										심의안건		⑧ 보도신설구간 보강도 옹벽 등 설치비 반영
공 사 개 요			공사규모				○ 남부순환로 구조개선 - 지하차도 : 폭4차로, 연장 736m, 남·북측측도 : 폭2~3차로, 연장 2,680m
			공사기간				2007. 9. 10 ~ 2015. 6. 30
			감 리 사				(주)동명기술공단, (주)동일기술공사
			설 계 사				(주)동명기술공단, (주)경화엔지니어링
			시 공 사				(주)케이에스씨건설, 대우조선해양건설(주)
자문요청사유							5,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 188,672천원
설계변경사유(요약) ○ 개봉역주변(림괄아파트)~공사 종점부까지 지역 주민의 보도 신설요구 민원에 의거 보도조성 및 사면보호를 위한 보강토 옹벽, 보행자 및 차량방호울타리 등 보도신설에 필요한 시설물 설치로 인한 공사비 반영
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 천연석재판 붙임(t=20~30) 수량이 상이하니 재검토후 조정할 것(p81, p369) - 내역서 : 109㎡, 수량산출서 : 114㎡
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원
	위 원

설계변경자문회의(소위원회)결과(제6차)

【2015. 6. 16(화)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			이한규					요청일자			2015. 6
공 사 명			남부순환로(개봉역앞) 구조개선공사										심의안건		⑨ 교통안전시설물 변경 설치
공 사 개 요			공사규모				○ 남부순환로 구조개선 - 지하차도 : 폭4차로, 연장 736m, 남·북측측도 : 폭2~3차로, 연장 2,680m
			공사기간				2007. 9. 10 ~ 2015. 6. 30
			감 리 사				(주)동명기술공단, (주)동일기술공사
			설 계 사				(주)동명기술공단, (주)경화엔지니어링
			시 공 사				(주)케이에스씨건설, 대우조선해양건설(주)
자문요청사유							5,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 82,148천원
설계변경사유(요약) ○ 『남부순환로(개봉역앞)구조개선공사』 시행중 두산APT 민원 및 구로구청 요청(지역주민 민원 요청사항 반영)으로 인한 본 공사 완공단계 교통처리계획의 변경, 서울시 교통안전시설(노면표시) 설치공사 시설기준 변경분 반영으로 인한 공사비 변경
원설계자 의견 요약 :
자문결과		원안가결			○ 의견없음
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원
	위 원

설계변경자문회의(소위원회)결과(제6차)

【2015. 6. 16(화)】

문서요청부서			방재시설부					담 당 자			장수철					요청일자			2015. 6
공 사 명			위례신도시 차집관로 증설공사										심의안건		⑩ 오수연결관로[신설]공사비 추가
공 사 개 요			공사규모				○ 차집관로 L= 4.395km , 맨홀 - 52개소
			공사기간				2013. 11. 22. ~ 2015. 06. 30
			감 리 사				(주)수성엔지니어링외 1개사
			설 계 사				(주)삼안외 2개사
			시 공 사				엘아이지건설(주)외 1개사
자문요청사유							5,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 249,986천원
설계변경사유(요약) ○ SH공사의 협의요청에 의해 공사중복 및 효율성를 감안하여 탄천우안 기존 차집관로에 문정지구 오수관을 연결하고 ○ 문정지구 오수관로연결시 횡단하는 지장물(열병합관 D800*2열)이 저촉됨으로 이설이 필요함
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ H-pile 박기 및 뽑기(H-250×250×9×14) 수량은 도면과 비교하면 맞지 않으니 재검토하여 조정하고, H-pile 중량도 오류가 없는지 확인해 볼 것 ○ 띠장 설치 및 철거 수량도 도면과 비교하여 오류가 없는지 재검토해 볼 것
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원
	위 원

설계변경자문회의(소위원회)결과(제6차)

【2015. 6. 16(화)】

문서요청부서			방재시설부					담 당 자			장수철					요청일자			2015. 6
공 사 명			위례신도시 차집관로 증설공사										심의안건	⑪ 차집관로 유입맨홀 추가 등 물량변경
공 사 개 요			공사규모				○ 차집관로 L= 4.395km , 맨홀 - 52개소
			공사기간				2013. 11. 22. ~ 2015. 06. 30
			감 리 사				(주)수성엔지니어링외 1개사
			설 계 사				(주)삼안외 2개사
			시 공 사				엘아이지건설(주)외 1개사
자문요청사유							5,000만원 이상 변경사항								자문요청금액			감 63,624천원
설계변경사유(요약) ○ 기존 매설된 지장물(지역난방) E.L위치가 설계상 계획관거보다 상향되어있어 차집관로[D1100]부설시 저촉됨으로 관과의 최소 이격거리를 확보하기 위해 관거LINE을 변경하여 우회 시공 ○ 설계상 시점맨홀[MH-01]로 위례신도시 하수가 집수 되도록 계획하였으나, 시험 터파기 결과 위치가 서로 다른 기존관[D800/D600] 두곳에서 유출되고 있어, 시점맨홀[MH-01]의 위치 변경 및 맨홀[MH-00] 추가 신설하여 본 차집관로에 연결 ○ 차집관로를 기존 box접합 연결시 관저고가 설계 종단도면과 상이하여 맨홀높이를 인상하고자 함.
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 강재손료 및 운반 수량에 대한 집계표가 누락되어 있으니 보완하고 전반적인 수량은 재검토후 반영할 것(p149) ○ 내역서상 유리섬유복합관(신규단가)에 대한 단가산출근거가 누락되어 있으니 보완하고 연결관은 기존단가로 표기할 것 ○ 차집관로 유입맨홀 추가 등 물량변경사항은 공사완료후 실측하여 물량을 정산하도록 할 것
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원
	위 원

설계변경자문회의(소위원회)결과(제6차)

【2015. 6. 16(화)】

문서요청부서			방재시설부					담 당 자			장수철				요청일자			2015. 6
공 사 명			위례신도시 차집관로 증설공사										심의안건	⑫ 포장공사(아스콘) 철거 및 복구비 물량 변경
공 사 개 요			공사규모				○ 차집관로 L= 4.395km , 맨홀 - 52개소
			공사기간				2013. 11. 22. ~ 2015. 06. 30
			감 리 사				(주)수성엔지니어링외 1개사
			설 계 사				(주)삼안외 2개사
			시 공 사				엘아이지건설(주)외 1개사
자문요청사유							5,000만원 이상 변경사항							자문요청금액			감 51,117천원
설계변경사유(요약) ○ 차집관로 구간중 도로(보행및자전거)포장 횡단하여 파손된 포장복구 및 그 외 도로 훼손구간 복구비를 해당관할 지자체로 이관함에 따른 포장복구비 변경
원설계자 의견 요약 :
자문결과		원안가결			○ 의견없음
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원
	위 원