(제6회) 설 계 변 경 사 유 서

[송정사근 빗물펌프장 증설공사]

1. 설계변경 사유 : 공사 실정보고 및 시공물량 정산에 의한 변경

구 분	변경사유	변경내용	도급비 (직접공사비)	비고
사근) 기존펌프장 지붕판넬 철거후 재설치 및 기존건물 계단실외 2개소 도장공사 반영 ※ 성동구청 요구사항 반영	- 기존펌프장 노후화에 따른 지붕 판넬의 누수 발생 및 계단실, 3층관사복도 1층 외부천정 도장공사 요구	- 시공물량 반영 · 샌드위치 판넬 설치: 391㎡ · 수정폐인트 로울러칠: 704㎡ · 에폭시 폐인트칠: 83㎡	증) 30,713천원	실정보고 2014-16차 (2014.11.14) 설계변경 자문 소위원회 (2014.12.11)
송정) 사토장 선정 및 토공 물량 정산 반영	- 토공 산출시 토출관 공제토(247㎥) 및 조경 토공물량 설계에 누락	- 시공물량 반영 · 토출관 공제토: 247㎥ · 조경 토공물량: 166㎥ · 사토장 운반거리: 20.78㎞	증) 4,692천원	실정보고 2014-19차 (2014.12.15)
송정) 자바라대문에서 철재대문으로 변경 및 기존담장 물량 정산 ※ 성동구청 요구사항 반영	- 보완상 문제상 자바라대문에서 철재대문으로 변경요구 기존담장 양호한 구간에 대해 금회공사에서 제외	- 시공물량 반영 · 자바라대문 → 철재대문: 3개소 · 담장설치: 107.4m → 54.7m	감) 5,009천원	실정보고 2014-20차 (2015.1.8)
송정) 관상수에서 관실수 변경 및 음지구간에 맥문동 추가 식재 ※ 성동구청 요구사항 반영	- 성동구청 요구사항에 대해 관상수에서 관실수로 변경하고 음지구간에 대해 잔디식재에서 맥문동으로 변경 식재	- 시공물량 반영 · 스트로브 잦나무: 38주 → 34주 · 왕벚나무: 3주 → 2주 · 감나무: 0 → 3주 · 맥문동 식재: 0 → 4,243본	증) 1,076천원	실정보고 2015-21차 (2015.1.23)
성동구청 요구사항 반영	1) 기존펌프장 진입램프 신설 및 기존 스틸그레이팅 철판 보강(사근) 2) 호이스트삭제 및 장비반입셔터설치(사근) 3) 경계난간 및 외부명판 설치(송정) 4) 중앙정문 경사로 설치(송정)	- 시공물량 반영 및 정산 · 진입램프 신설: 8m · 철골가공조립(적은구조): 3.12톤 · 장비반입 셔터 설치: 1개소 · 경계난간 설치: 14m · 송정빗물펌프장 명판: 1개소 · 잡철물제작설치(간단): 0.228톤	증) 11,314천원
기타시공물량 변경 및 실물량 정산에 따른 변경	1) 추진공사 물량 정산(송정) 2) 쉬트 파일인발 및 활재주입공 정산(사근) 3) 되메우기 유용토 운반(송정)	- 추진공사 물량정산(송정) · 천공 및 멘젯튜브 설치: 700m → 140m · L.W GROUT 주입: 89㎥ → 228㎥ · 고재처리: 용해용(상) (매입가) → 중량철A - 쉬트 파일인발 및 활재주입공 정산(사근) · 쉬트 파일인발: 87본 → 0 · 활재주입공: 59m → 0 - 되메우기 유용토 운반(송정) · 되메우기 토사운반: 0 → 996㎥	증) 23,089천원 감) 20,206천원 증) 5,882천원
보험료 정산	- 각종 보험료 정산	- 보험료 정산 · 감) 건강보험료 · 감) 연금보험료 · 감) 노인장기요양보험료	감) 95,236천원
직접공사비 소계			감) 33,103천원
제 경 비			감) 51,815천원
도 급 비			감) 84,918천원

2. 변경내용

가. 주요공종 물량증감

구 간	공 종	총 차 분			2 차 분			비고
		당 초	변 경	증·감	당 초	변 경	증·감
(사근) 기존펌프장 지붕판넬 철거후 재설치	샌드위치 판넬설치	-	391㎡	증) 391㎡	42.7㎡	-	감) 42.7㎡	실정보고 2014-16차 (2014.11.14) 설계변경 자문 소위원회 (2014.12.11)
	기존지붕 판넬철거	-	282㎡	증) 282㎡	-	1.7a	증) 1.7a
	수정폐인트, 로울러칠	-	704㎡	증) 704㎡	-	164.4㎡	증) 164.4㎡
	에폭시 폐인트칠	-	83㎡	증) 83㎡	-	1.8a	증) 1.8a
(송정) 토공물량 정산반영	잔토처리	5㎥	109㎥	증)109㎥	-	48m	증) 48m	실정보고 2014-19차(2014.12.15)
	되메우기 유용토 운반	-	996㎥	증) 996㎥	-	80m	증) 80m
(송정) 자바라대문→철재대문 기존담장 정산	자바라 대문	3개소	-	감) 3개소	-	68m	증) 68m	실정보고 2014-20차(2015.1.8)
	철재대문	-	3개소	증) 3개소	-	46.5㎡	증) 46.5㎡
	담장 설치	107.4m	54.7m	감) 52.7m	-	84경간	증) 84경간
(송정) 관상수→유실수 맥문동 추가식재	스트로브 잦나무	38주	34주	감) 4주	-	30m	증) 30m	실정보고 2015-21차(2015.1.23)
	왕벚나무	3주	2주	감) 1주
	감나무	-	3주	증) 3주
	잔디식재	232㎡	153㎡	감) 79㎡
	맥문동 식재	-	4,243본	증) 4,243본	-	2개소	증) 2개소
(송정사근) 성동구청 요구사항반영	진입램프 신설	-	8m	증) 8m	-	50공	증) 50공
	철근가공조립(적은구조)	-	3.12톤	증) 3.12톤	-	0.283톤	증) 0.283톤
	장비반입 셔터설치	-	1개소	증) 1개소
	경계난간 설치	-	14m	증) 14m
	송정빗물펌프장 명판설치	-	1개소	증) 1개소
	잡철물 제작설치(간단)	-	0.228톤	증) 0.228톤	-	0.507톤	증) 0.507톤
(송정사근) 기타물량변경 및 실물량 정산변경	천공및멘젯튜브 설치	700m	140m	감) 560m	28㎥	-	감) 28㎥
	LW GROUT주입	89㎥	228㎥	감) 139㎥	1.8톤	1.139톤	감) 0.661톤
	고재처리(용해성(상))	115,395KG	-	감)115,395KG
	고재처리(중량철A)	-	115,395KG	증)115,395KG
	쉬트파일 인발	87본	-	감) 87본
	활재주입공	59m	-	감) 59m	-	0.326톤	증) 0.326톤

나. 공사비 증·감 사항                                                                   (단위 : 원)

구 분	총차 (전체)			2차공사			3차공사
	당 초	변 경	증·감	당 초	변 경	증·감	당 초	변 경	증·감
공급가액	6,886,189,000	6,808,990,000	감) 77,199,000	4,532,600,364	4,455,401,364	감) 77,199,000	676,952,272	676,952,272	-
부가세	688,618,900	680,899,000	감) 7,719,900	453,260,036	445,540,136	감) 7,719,900	67,695,228	67,695,228	-
도급비	7,574,807,900	7,489,889,000	감) 84,918,900	4,985,860,400	4,900,941,500	감) 84,918,900	744,647,500	744,647,500	-