설계변경자문회의(소위원회) 결과 (제7차)

문서번호		요청부서		방재시설부 담당 김학지	요청일		2016년 7월 일
공 사 명	경춘철교 정비공사
공사개요	공사규모		복합소재 바닥판 : 955M2, Rolled Beam : 93.626Ton, 엘리베이터 2개동
	공사기간		2015 . 01 . 06 ~ 2016 . 7. 30
	감 리 사		(주)선진엔지니어링건축사사무소
	설 계 사		(주)동일기술공사
	시 공 사		대흥토건주식회사
자문 안건명			수변데크 설치			요청 금액		204,029천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			사업계획 변경(정책, 계획변경 등)
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 경춘철교 좌안에 설치되는 엘리베이터 및 계단설치로 인해 기존 자전거도로 및 보행자도로를 점유하여 도록폭이 축소되어, 당초 폭을 유지할수 있는 수변데크 설치
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : -
자문결과 : 조건부 가결 ❑ 자문의견 ○ 협소할증을 25%반영하였으나 데크작업 공간은 보도와 연접되어 있으므로 보행자 및 자전거 통행이 많아 작업이 불리하다면 지세할증으로 변경 및 할증율을 검토 ○ 수변데크 하부공법 H-beam에 대한 상재하중 및 홍수시 하천유속을 감안한 구조 검토 ○ 적용단가 조사표(p30)가격정보와 비교하여 최저가격 적용 간접비 산출

설계변경자문회의(소위원회) 결과 (제7차)

문서번호		요청부서		토목부 담당 김상도	요청일		2016년 07 월 일
공 사 명	사가정길(전농동 사거리~장안동 삼거리) 확장공사
공사개요	공사규모		-. 도로 교차로구간 확장 (L = 520m) -. 하수관 개량(L = 775 m) -. 전기, 조경공 1식
	공사기간		2016. 02. 29 ~ 2016. 12. 31
	감 리 사		㈜삼안,(주)유신,경동엔지니어링
	설 계 사		㈜대한컨설턴트
	시 공 사		고양종합건설(주)
자문 안건명			설계도서 검토 件			요청금액		136,744천원
자문요청사유			- 5,000만원 이상 변경사항 - 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			- 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 - 현장여건 상이(지질, 용수 등)
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 변경 시방규정과 부합되지 않거나 현장여건과 상이하게 작성된 설계서에 대하여 원설계자의 의견을 반영,시방규정 및 현장여건과 부합하도록 설계도서 수정에 따른 사업비 반영
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 건설사업관리단 검토가 적정
자문결과 : 원안가결

설계변경자문회의(소위원회) 결과 (제7차)

문서번호		요청부서		토목부 담당 김상도	요청일		2016년 07 월 일
공 사 명	사가정길(전농동 사거리~장안동 삼거리) 확장공사
공사개요	공사규모		-. 도로 교차로구간 확장 (L = 520m) -. 하수관 개량(L = 775 m) -. 전기, 조경공 1식
	공사기간		2016. 02. 29 ~ 2016. 12. 31
	감 리 사		㈜삼안,(주)유신,경동엔지니어링
	설 계 사		㈜대한컨설턴트
	시 공 사		고양종합건설(주)
자문 안건명			교통소통대책 및 교통안전시설물 원인자부담공사 件			요청금액		206,711천원
자문요청사유			- 5,000만원 이상 변경사항 - 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			- 제도, 기준변경 - 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 경찰청 교통규제 심의결과 및 관할 성동도로사업소 승인을 받기 위하여 심의받은 교통소통 대책에 준한 시설물 변경(노면표시,차선도색 : 고휘도 변경)과 서울시 교통소통대책 심의를 위한 교통소통대책 설계비 반영이 필요함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 사업 재원의 최소화위해 노면표시 등 일반, 융착식으로 설계하였으나 경찰청 교통규제 심의 결과 및 성동도로사업소 승인사항을 반영한 건설사업관리단 검토가 적정
자문결과 : 조건부 가결 ❑ 자문의견 ○ 교통소통대책 설계용역비, 교통안전시설물공사 실시설계용역비, 교통안전시설물공사 감리비는 해당업체 산출금액의 100%적용하였으나 낙찰율(조달청 평균 낙찰율)또는 협의율 적용 ○ 교통안전시설물 공사에 대한 감리는 별도 시행하는 바 본 공사 감리용역비 산출시 적용된 대상공사비에서 교통안전시설물 공사비는 제외여부 확인 필요 ○ 임시차선 고휘도 적용근거 및 교통소통대책비 사용근거 제시