설계변경자문회의(소위원회)결과(제7차)

【2014. 8. 29(금)】

문서요청부서			방재시설부					담 당 자			조동협					요청일자			2014. 8
공 사 명			염창2외 1개소 빗물펌프장 증설공사										심의안건		① 흙막이 가시설(시트파일) 변경
공 사 개 요			공사규모				○ 염창2 : 기존 160㎥/min→330㎥/min 1대 교체, 330㎥/min 1대 증설 ○ 방화 : 190㎥/min × 2대 증설
			공사기간				2013. 1. 3 ~ 2014.12.31
			감 리 사				서울특별시 시설관리공단
			설 계 사				선진엔지니어링
			시 공 사				홍용종합건설
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 42,370천원
설계변경 사유(요약) ○ 흙막이 가시설(쉬트파일)이 당초 인발하도록 설계되어 있었으나 공기만회 대책 및 주변 구조물 안정을 위해 사장처리
원설계자 의견(요약)
자문결과		조건부가결			○ 펌프장 설치를 위한 지반 굴착시 지하수위 저하로 주변 지반의 침하가 우려되니 안정성 등을 검토하여 보강이 필요한지 재검토해 볼 것 ○ 쉬트파일 사장에 따른 자재단가는 계약상대자, 감리(공단), 발주처가 성실히 협의하여 결정 하여야 할 사항으로 판단됨
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원

설계변경자문회의(소회의)결과(제7차)

【2014. 8. 29(금)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			김 구					요청일자			2014. 8
공 사 명			강남순환도시고속도로(8공구)건설공사										심의안건		② 준공기한 연장에 따른 관련 비목 변경
공 사 개 요			공사규모				○ 폭원4-10차도, 연장 7.96KM, 지하차도(4개소) : 2,790M 교량(2개소) : 540M
			공사기간				2002. 07. 03 ~ 2018. 07. 31
			감 리 사				㈜동명기술공단건축사사무소
			설 계 사				㈜수성엔지니어링
			시 공 사				롯데건설(주)외 1
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 1,426,289천원
설계변경 사유(요약) ○ 공사기간 2002.7.3~2014.5.30에서 2002.7.3~2018.7.31로 변경됨에 따라 관련비목(공사이행보증수수료 및 공사손해보험료) 증액
원설계자 의견(요약)
자문결과		원안가결			○ 의견없음
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원

설계변경자문회의(소회의)결과(제7차)

【2014. 8. 29(금)】

문서요청부서			방재시설부					담 당 자			김학지					요청일자			2014. 8
공 사 명			공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사										심의안건		③ 기존 Box 개구부 폐쇄
공 사 개 요			공사규모				○ 펌프장토출용량469m2/,분,관거412m, 강관추진(Ø1,500mm@2련)53m
			공사기간				2013. 01. 08 ~ 2015. 6. 30
			감 리 사				서울시시설관리공단
			설 계 사				도화엔지니어링
			시 공 사				㈜승영기술공사
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 36,839천원
설계변경사유(요약) ○ 기존하수암거를 고지배수관로로 활용함에 따라 하수관로, 빗물받이연결부, 맨홀 등 개구부 폐쇄
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 기존암거 개구부(유입관 및 작업구) 폐합 시공수량이 불일치하니 재검토하여 조정할 것 → 시공수량 불일치(보고서 33개소, 수량산출 66개소, 내역서 69개소) ○ 기존암거 개구부 폐합시공에 따른 신규단가 적용근거를 확인할 수 없으니 낙찰율 적용 등 적정단가를 재확인후 설계변경시 반영할 것 ○ 기타 기존암거 개구부 폐합에 따른 케미칼 앵커 천공 및 주입재 충진작업의 적정성을 재검토해 볼 것
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원

설계변경자문회의(소회의)결과(제7차)

【2014. 8. 29(금)】

문서요청부서			방재시설부					담 당 자			김학지					요청일자			2014. 8
공 사 명			공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사										심의안건		④ 상수도 이설비(원인자) 반영
공 사 개 요			공사규모				○ 펌프장토출용량469m2/,분,관거412m, 강관추진(Ø1,500mm@2련)53m
			공사기간				2013. 01. 08 ~ 2015. 6. 30
			감 리 사				서울시시설관리공단
			설 계 사				도화엔지니어링
			시 공 사				㈜승영기술공사
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 226,270천원
설계변경사유(요약) ○ 면목4동 저지배수관로 부설에 따른 지상 상수관 이설 (원인자 이설)
원설계자 의견 요약 :
자문결과		원안가결			○ 의견없음
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원

설계변경자문회의(소회의)결과(제7차)

【2014. 8. 29(금)】

문서요청부서			방재시설부					담 당 자			김학지					요청일자			2014. 8
공 사 명			공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사										심의안건		⑤ 물가변동(E/S) 반영
공 사 개 요			공사규모				○ 펌프장토출용량469m2/,분,관거412m, 강관추진(Ø1,500mm@2련)53m
			공사기간				2013. 01. 08 ~ 2015. 6. 30
			감 리 사				서울시시설관리공단
			설 계 사				도화엔지니어링
			시 공 사				㈜승영기술공사
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 146,022천원
설계변경사유(요약) ○ 물가변동에 따른 계약금액 조정
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 물가변동(E/S)에 따른 계약금액 조정 적정여부를 재검토하여 설계변경시 반영할 것 → 물가변동 조정에 따른 예정공정표 확인자 재검토(현장대리인 → 계약자 대표) → 물가변동으로 인한 계약금액 적정여부 검토시 비교시점(조정기준일)이 2014. 01. 01.일 기준이나, 신규 계약분(‘13.10.17)이 적용되어 있으니 적정여부를 재확인해 볼 것
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원

설계변경자문회의(소회의)결과(제7차)

【2014. 8. 29(금)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			이병환					요청일자			2014. 8
공 사 명			동부간선도로 확장공사(3공구)										심의안건		⑥ 창동진출로 호안법면조정 및 차량방호책 변경
공 사 개 요			공사규모				○ L = 2.25㎞, B = 4~6차로
			공사기간				2008. 02. 15 ~ 2015. 12. 31
			감 리 사				동부엔지니어링(주), (주)한국건설관리공사
			설 계 사				(주)동일기술공사, (주)건화
			시 공 사				세원건설(주), 홍용종합건설(주)
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				감 51,505천원
설계변경사유(요약) ○ 창동진출로 L형옹벽 배면 호안높이조정, 옹벽상단 차량방호책 삭제 및 일부구간 메쉬휀스 설치와 종점부 장암지하차도 시공구간의 웹카메라 설치, 도로사면 우수침투방지 및 사면유실을 방지코자 사면보호 콘크리트타설 실시
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ L형 옹벽 노출부와 토공용 메쉬휀스 접합부(경계부)의 상세도면을 작성하여 도로와의 접근 방지 및 미관을 고려한 시공이 되도록 할 것
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원

설계변경자문회의(소회의)결과(제7차)

【2014. 8. 29(금)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			이병환					요청일자			2014. 8
공 사 명			동부간선도로 확장공사(3공구)										심의안건		⑦ 가설 보도육교 설치비 반영
공 사 개 요			공사규모				○ L = 2.25㎞, B = 4~6차로
			공사기간				2008. 02. 15 ~ 2015. 12. 31
			감 리 사				동부엔지니어링(주), (주)한국건설관리공사
			설 계 사				(주)동일기술공사, (주)건화
			시 공 사				세원건설(주), 홍용종합건설(주)
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 63,265천원
설계변경사유(요약) ○ 장암지하차도 공사구간이 동부간선도로 상.하행선 가운데 위치하여 작업장 진출입 근로자의 안전을 위하여 임시 보도육교(L=16.0m, B=2.0m, H=5.9m) 설치
원설계자 의견 요약 :
자문결과		원안가결			○ 의견없음
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원

설계변경자문회의(소회의)결과(제7차)

【2014. 8. 29(금)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			이병환					요청일자			2014. 8
공 사 명			동부간선도로 확장공사(3공구)										심의안건		⑧ 상계근린공원 방음벽구간 교통처리계획 반영
공 사 개 요			공사규모				○ L = 2.25㎞, B = 4~6차로
			공사기간				2008. 02. 15 ~ 2015. 12. 31
			감 리 사				동부엔지니어링(주), (주)한국건설관리공사
			설 계 사				(주)동일기술공사, (주)건화
			시 공 사				세원건설(주), 홍용종합건설(주)
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 147,890천원
설계변경사유(요약) ○ 발주시 제내지 방음벽처리에 대한 교통처리 계획이 반영되지 않아 금회 상계근린공원 방음벽 설치에 따른 교통안전시설 설치가 불가피하여 유관부서와 협의한 내용을 중심으로 교통안전시설 설치
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 교통안전시설물(차선규제봉) 추가 설치수량이 중복된 구간이 있는 것으로 보이니 확인후 조정할 것
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원

설계변경자문회의(소회의)결과(제7차)

【2014. 8. 29(금)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			이병환					요청일자			2014. 8
공 사 명			동부간선도로 확장공사(3공구)										심의안건		⑨ 장암지하차도 그라우팅 수량 변경
공 사 개 요			공사규모				○ L = 2.25㎞, B = 4~6차로
			공사기간				2008. 02. 15 ~ 2015. 12. 31
			감 리 사				동부엔지니어링(주), (주)한국건설관리공사
			설 계 사				(주)동일기술공사, (주)건화
			시 공 사				세원건설(주), 홍용종합건설(주)
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 215,921천원
설계변경사유(요약) ○ 장암지하차도 영구벽체 배면 및 전면부 그라우팅 수량산출기준 불분명, 수량오기 등으로 인하여 수량 변경
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 장암지하차도 전면부 그라우팅 작업시 바닥기초까지 터파기 후 그라우팅을 하는 것으로 되어 있어 흙막이공 strut와의 간섭이 예상되므로 주의하여 시공할 것 ○ 그라우팅 증가 수량 중 사급자재(시멘트) 단가를 협의율(86.645%)로 적용하였으나, 협의율 적용근거가 없으니 보완할 것
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원

설계변경자문회의(소회의)결과(제7차)

【2014. 8. 29(금)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			이병환					요청일자			2014. 8
공 사 명			동부간선도로 확장공사(3공구)										심의안건		⑩ 상계근린공원 방음판 폐기물 처리
공 사 개 요			공사규모				○ L = 2.25㎞, B = 4~6차로
			공사기간				2008. 02. 15 ~ 2015. 12. 31
			감 리 사				동부엔지니어링(주), (주)한국건설관리공사
			설 계 사				(주)동일기술공사, (주)건화
			시 공 사				세원건설(주), 홍용종합건설(주)
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 80,443천원
설계변경사유(요약) ○ 상계근린공원 구간의 기존방음벽(H=4m) 철거 후 H=6m 방음벽을 신설하여야 하는 바, 기존방음벽 방음판이 시멘트 압축방음판으로 석면를 함유(24%)하고 있어, 이에 따라 석면폐기물로 처리
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 상계근린공원 기존 방음판 폐기물(석면) 처리는 적정하나, 공사비 내역(견적금액)을 재검토하여 반영할 것 → 보고서상 석면 처리수량(1,362㎡)과 견적서상 처리수량(20ton)을 확인할 수 있는 근거자료(재료의 단위중량 등)가 없으므로 보완할 것 → 폐기물처리에 대한 공사비를 견적을 근거로 1식 단가로 적용하였으나, 견적서 내용을 보면 석면해체공사와 석면분석용역으로 분리하여 공사분은 제잡비 적용이 필요할 것으로 사료되니 재검토해 볼 것 ○ 기타, 기존 방음판 폐기물(석면) 처리시 관련규정을 준수하여 적정하게 처리되도록 할 것
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원