설계변경 소위원회 자문결과

문서번호		요청부서		토목부 이한규	요청일			2018년 8월
공 사 명	종로 중앙버스전용차로 설치공사
공사개요	공사규모		도로개설 L=3.8km, 버스정류소 15개소
	공사기간		2017. 08. 29 ~ 2018. 07. 31
	감 리 사		(주)제일엔지니어링외 1개사
	설 계 사		(주)진화기술공사
	시 공 사		천마산건설(주)
자문 안건명			차도상 맨홀인상 실정보고			요청금액	증 231,418천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			사업계획 변경(정책, 계획변경 등) 민원해결, 보수, 보강
설계변경사항(요약) ○ 공사구간내 포장으로 인한 포장면과 맨홀의 단차에 대해 유관기관인 북부도로사업소의 맨홀 보수 요청에 따라 맨홀인상 시행
원설계자 의견(요약) ○ 해당없음
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ 북부도로사업소 공법 적용에 따라 해당 단가를 적용하였으나 초속경 몰탈 단가에 대한 해당 현장에 맞는 단가적용을 위하여 물가자료 등 자료를 토대로 재검토하기 바람 ○ P124, 중기산출표 2,3,4,5호표의 경비단가가 품셈단가와 상이하므로 검토하기 바람 ○ P126, 경유+휘발유 비교단가와 적용단가 일치여부 확인하기 바람

설계변경 소위원회 자문결과

문서번호		요청부서		토목부 이한규	요청일			2018년 8월
공 사 명	종로 중앙버스전용차로 설치공사
공사개요	공사규모		도로개설 L=3.8km, 버스정류소 15개소
	공사기간		2017. 08. 29 ~ 2018. 07. 31
	감 리 사		(주)제일엔지니어링외 1개사
	설 계 사		(주)진화기술공사
	시 공 사		천마산건설(주)
자문 안건명			차선도색 수량변경 및 교통안전시설물 노면시공감리용역비 반영 검토보고			요청금액	증 889,383천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			사업계획 변경(정책, 계획변경 등)
설계변경사항(요약) ○ 단계별 교통소통대책 변경에 따른 차선도색 추가사항 및 자전거도로 도색을 반영하고 교통안전시설물 설계 및 감리용역비 반영
원설계자 의견(요약) ○해당없음
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ P228~231 맨홀인상에 대한 검토의견서 표기내용 오류 수정하기 바람 ○ P233 차선도색 제거 공정과 관련하여 검토의견서, P249 도급내역서, P268 수량산출서의 차선도색 제거 당초 수량이 각각 상이하므로 검토하기 바람

설계변경 소위원회 자문결과

문서번호		요청부서		토목부 이한규	요청일			2018년 8월
공 사 명	종로 중앙버스전용차로 설치공사
공사개요	공사규모		도로개설 L=3.8km, 버스정류소 15개소
	공사기간		2017. 08. 29 ~ 2018. 07. 31
	감 리 사		(주)제일엔지니어링외 1개사
	설 계 사		(주)진화기술공사
	시 공 사		천마산건설(주)
자문 안건명			종로 버스중앙차로 및 자전거도로 안내표지판 설치 정산 검토보고			요청금액	증 160,685천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			사업계획 변경(정책, 계획변경 등)
설계변경사항(요약) ○ 금속구조물 창호공사업(교통안내시설)의 신규공정 및 변경 공사물량의 증감물량 반영
원설계자 의견(요약) ○ 해당없음
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ P559, 560 레미콘 타설단가에서 인력타설을 장비타설로 검토하기 바람(품셈참고) ○ P551 (중앙차로버스전용표지설치+도로안내표지판)과 P552 도로안내표지판이 일위대가(113호, No.73호)와 중복되므로 수정하기 바람 ○ P552, (교통안내표지판 오각)의 일위대가 115에서 교통안전표지설치 금액 오류가 있으니 검토바람 ○ P553 교통안전표지판 철거, 이중+보조부착식 일위대가 122호에서 일위대가 42의 단위단가 20..516원을 적용해야하므로 검토바람 ○ P552~553 도급내역서 교통안전표지판 당초 수량과 수량산출서 P566 총괄 수량 집계표의 당초 수량이 각각 상이하므로 검토하기 바람

설계변경 소위원회 자문결과

문서번호		요청부서		방재시설부 담당 박계현	요청일		2018년 7월 25일
공 사 명	디지털3단지 ~ 두산길간 지하차도 건설공사
공사개요	공사규모		도로(4차로) 개설 L=452m(지하차도(2차로) L=290m+일반162m)
	공사기간		2017.12.26. ~ 2021.04.08.
	감 리 사		㈜제일엔지니어링외 2개사
	설 계 사		㈜유신외 1개사
	시 공 사		대명지이씨(주)외 3개사
자문 안건명			하수관로 설계서 보완 및 야간작업 반영			요청금액		증 70,000천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 현장여건 상이(지질, 용수 등) 민원해결, 보수, 보강
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 두산로 하수관로 이설에 대한 설계서 상호모순 보완과 공사중 사업장 진출입로 통행단절 해소 및 영업지장 최소화를 위한 야간작업 시행 등에 대한 비용 반영
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ 두산로 북측 관거변경(D1700㎜→□1.5×1.5)사항은 각각의 절대 단면이 상이한 바 유량계산을 시행하여 적정여부를 검토하기 바람 ○ P106 도급내역서 우수받이 및 연결과 몰탈 변경수량(1.134)과 P181 우수공 총괄 수량집계표 및 P208 수량집계표의 몰탈 변경수량(1.617)이 상이하므로 검토하기 바람 ○ 야간작업 할증 50%적용에 대한 세부근거 제시하기 바라며 근로자 노임 근로기준법에 따라 정산 지급하시기 바람

설계변경 소위원회 자문결과

문서번호		요청부서		방재시설부 담당 박계현	요청일		2018년 7월 25일
공 사 명	디지털3단지 ~ 두산길간 지하차도 건설공사
공사개요	공사규모		도로(4차로) 개설 L=452m(지하차도(2차로) L=290m+일반162m)
	공사기간		2017.12.26. ~ 2021.04.08.
	감 리 사		㈜제일엔지니어링외 2개사
	설 계 사		㈜유신외 1개사
	시 공 사		대명지이씨(주)외 3개사
자문 안건명			건물철거용 가림막 설치			요청금액		증 159,000천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			현장여건 상이(지질, 용수 등) 민원해결, 보수, 보강
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 도로시설계획에 의해 보상 완료된 지장건물 철거시 보행자 안전확보, 비산먼지 발생 방지, 외부 시선 차단, 인접건물 피해방지 등을 위한 가림막설치 비용을 반영
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
자문결과 : 원안가결 ※ P41 단가산출서 가설가림막 설치(일위대가표 3)에서 강관비계 설치해체 단위 수량 0.95㎡ 적용근거 제시 바람

설계변경 소위원회 자문결과

문서번호		요청부서		방재시설부	요청일		2018년 7월 일
공 사 명	양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사(장기계속)
공사개요	공사규모		□CSOs 저류조 Q=46,000㎥, 128m x 60x x 6m □설비실(기계실, 전기실) A=903.5㎡, 451.7㎡ x 2층 □수목이식 168주,식재(관목, 교목) 3,392주, 초화류 111,000본 □기계 및 전기공사 1식
	공사기간		2016. 12. 05. ~ 2019. 08. 04
	감 리 사		(주)경동엔지니어링 외 3개사
	설 계 사		(주)동명기술공단 외 1개사
	시 공 사		대우산업개발(주) 외 2개사
자문 안건명			품질시험계획 이행확인 점검에 따른 실정보고			요청금액		증 113,300천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			현장여건 상이(지질, 용수 등)
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 『양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사(장기계속)』 추진과 관련하여 구조물 외벽 되메우기를 서울시 품질시험소 품질점검결과(18.7.17) 방수층 보호 및 침하방지를 위해 모래 다짐으로 시공토록 검토 지시한 바에 따라 모래(물다짐)로 변경코저 함.
원설계자 의견(요약)
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ 원설계자 의견이 필요하므로 첨부하기 바람 ○ P22,자문요청서 골재수량 산출 및 P19 내역 수량이 상이한 바 확인 후 반영하기 바람 ○ P13 검토의견서, P19 내역서에 단가(신규 또는 기존) 표기가 없으므로 반영하기 바람