제9차 설계변경 자문회의(소위원회) 검토의견 요약

건 명	검 토 의 견
선사로~고덕지구간 도로 확장공사 - U형측구 형식변경	U형 측구 시공시 기초(버림)콘크리트를 일반적으로 타설하고 있으므로 타설검토
선사로~고덕지구간 도로 확장공사 - 오수관로 부단수 차단공법	원안가결(단가협의 근거 확인)
강남순환도시고속도로 (4공구) 건설공사 - 본선 토공부 방음벽 형식변경	- 투명방음판 설치수량 기준을 1미터로 하였으나 방음판규격(0.5m, 1m)별로 적용 원가계산시 물가변동 (K값) 반영조치 단가산출서 규격과 내역서이 규격이 상이하므로 검토
강남순환도시고속도로 (4공구) 건설공사 - 한신아파트 보도육교 보강	신설 교각에 대한 충돌방지시설 설치바람 동적, 정적 재하시험을 통해 설계시 구조검토 비교
서울역고가 바닥판 철거공사 - 모범운전자 및 교통신호수 등 정산	원안가결
서울역고가 바닥판 철거공사 - 본선코아 천공수량 및 천공깊이 변경	원안가결

건 명	검 토 의 견
서울역고가 바닥판 철거공사 - 서울역고가 통행금지에 따른 홍보물 설치수량 정산	원안가결
서울역고가 바닥판 철거공사 - 스터드 볼트 및 S자형 철근절단 수량반영	원안가결 (스터드볼트 1개절단시 그라인더날 10개 소모→10개절단시 1개 소모로 수정)