설계변경자문회의(소위원회) 결과 (제9차)

문서번호		요청부서		토목부 담당 이한규	요청일		2016년 08월 일
공 사 명	선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사
공사개요	공사규모		- 위 치 : 강동구 암사동, 고덕동 일원 - 규 모 : 기존도로확장 • 도로폭원 : 8~10m ⟶ 28.5~35.0m, L=3.7km
	공사기간		2009. 01. 06 ～ 2016. 12. 31.
	감 리 사		(주)한국건설관리공사외 1개사
	설 계 사		(주)한국종합기술외 1개사
	시 공 사		(주)대저건설 외 1개사
자문 안건명			U형측구 형식변경			요청금액		감 79,090천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			- 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) - 공법변경(신기술, 신공법 포함)
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 절토부 비탈면 하부에 설치되는 U형측구를 현장타설에서 기성품(측구수로관)으로 변경하여, 공사비 절감, 품질향상, 공사기간 단축 등의 효과를 도모함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
자문결과 : 조건부 가결 ❑ 자문의견 ○ U형 측구 시공시 기초(버림)콘크리트를 일반적으로 타설하고 있으므로 타설검토

설계변경자문회의(소위원회) 결과 (제9차)

문서번호		요청부서		토목부 담당 이한규	요청일		2016년 08월 일
공 사 명	선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사
공사개요	공사규모		- 위 치 : 강동구 암사동, 고덕동 일원 - 규 모 : 기존도로확장 • 도로폭원 : 8~10m ⟶ 28.5~35.0m, L=3.7km
	공사기간		2009. 01. 06 ～ 2016. 12. 31.
	감 리 사		(주)한국건설관리공사외 1개사
	설 계 사		(주)한국종합기술외 1개사
	시 공 사		(주)대저건설 외 1개사
자문 안건명			오수관로(D400mm) 부단수 차단공법			요청금액		증 66,000천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			- 현장여건 상이(지질, 용수 등) - 유관기관 요청
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 오수의 지속적인 유입으로 기존오수펌프장의 상시 가동상태에서 신설오수펌프장의 유출 오수관을 기존오수관과 연결을 위해 부단수차단(D400㎜) 공법 적용.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
주 요 변 경 내 역 및 공 종
자문결과 : 원안 가결 ※ 단가협의 근거 확인

설계변경자문회의(소위원회) 결과 (제9차)

문서번호		요청부서		토목부 담당 시희식	요청일		2016년 8 월 일
공 사 명	강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사
공사개요	공사규모		폭: 왕복 4~8차로, 연장: L=2.48km 지하차도: 760m, 본선교량:820m, 토공: 900m
	공사기간		2001.12.29 ~ 2019.11.30
	감 리 사		㈜서영엔지니어링
	설 계 사		㈜서영엔지니어링
	시 공 사		롯데건설(주)
자문 안건명			본선 토공부 방음벽 형식 변경			요청금액		증 278,200천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			민원해결, 보수, 보강
설계변경사항(요약) ○ 내용 : - 광명신촌휴먼시아 앞 방음벽을 당초 흡음형(직선형 H=4~8m)으로 계획하였으나, 광명시(신촌휴먼시아 주민)와 국회의원(이언주)이 개방감있는 투명형 방음벽으로 변경을 요구하고 있으며 기 시행중인 종점부 방음벽(시흥3동)과 일체성 확보를 위하여 흡음+투명형(상부곡선 H=4~8m)으로 변경하여 설계에 반영하고자 함.
원설계자 의견(요약)
자문결과 : 조건부 가결 ❑ 자문의견 ○ 투명방음판 설치수량 기준을 1미터로 하였으나 방음판규격(0.5m, 1m)별로 구분 적용 ○ 원가계산시 물가변동(K값) 반영조치 ○ 단가산출서 규격과 내역서의 규격이 상이하므로 검토

설계변경자문회의(소위원회) 결과 (제9차)

문서번호		요청부서		토목부 담당 시희식	요청일		2016년 8 월 일
공 사 명	강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사
공사개요	공사규모		폭: 왕복 4~8차로, 연장: L=2.48km 지하차도: 760m, 본선교량:820m, 토공: 900m
	공사기간		2001.12.29 ~ 2019.11.30
	감 리 사		㈜서영엔지니어링
	설 계 사		㈜서영엔지니어링
	시 공 사		롯데건설(주)
자문 안건명			한신아파트 보도육교 보강			요청금액		증 92,500천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			민원해결, 보수, 보강
설계변경사항(요약) ○ 내용 : - 금천구 한신아파트 보도육교에 추가 조형물등 설치에 따른 하중 증가로 보도육교의 불안감 민원이 지속적으로 제기되어 구조검토를 통해 한신아파트 보도육교 교각(1개소)을 추가 설치하여 설계에 반영하고자 함.
원설계자 의견(요약)
자문결과 : 조건부 가결 ❑ 자문의견 ○ 신설 교각에 대한 충돌방지시설 설치바람 ○ 동적, 정적재하시험을 통해 설계시 구조검토 비교

설계변경자문회의(소위원회) 결과 (제9차)

문서번호		요청부서	토목부 담당 이상근	요청일		2016년 8월 일
공 사 명	서울역고가 바닥판 철거공사
공사개요	공사규모	- 본선 교량 철거 : 바닥판 철거 L=516.5m. RC SLAB 철거 L=185.88m - 램프 교량 철거 : 2개소 253m, - 보도육교 철거 : L=30m
	공사기간	2015. 11. 18. ~ 2016. 08. 30.
	감 리 사	㈜진우엔지니어링코리아,(주)신명건설기술공사,(주)진전기엔지니어링,해주엔지니어링(주)
	설 계 사	㈜삼안
	시 공 사	성도건설산업(주)
자문 안건명		모범운전자 및 교통신호수 등 정산			요청금액		증 152,196천원
자문요청사유		5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형		민원해결, 보수, 보강
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 서울역고가 철거시 공사구간 및 인근 교차로에 대한 교통정리(모범운전자, 교통신호수)와 철도구간 안전관리를 위하여 투입된 인원(철도안전관리자, 철도 감시원)에 대한 정산
원설계자 의견(요약) ○ 해당없음
자문결과 : 원안 가결 ※ 단가협의 근거 확인

설계변경자문회의(소위원회) 결과 (제9차)

문서번호		요청부서	토목부 담당 이상근	요청일		2016년 8월 일
공 사 명	서울역고가 바닥판 철거공사
공사개요	공사규모	- 본선 교량 철거 : 바닥판 철거 L=516.5m. RC SLAB 철거 L=185.88m - 램프 교량 철거 : 2개소 253m - 보도육교 철거 : L=30m
	공사기간	2015. 11. 18. ~ 2016. 08. 30.
	감 리 사	㈜진우엔지니어링코리아,(주)신명건설기술공사,(주)진전기엔지니어링,해주엔지니어링(주)
	설 계 사	㈜삼안
	시 공 사	성도건설산업(주)
자문 안건명		본선 코아 천공 수량 및 천공 깊이 변경			요청금액		증 443,993천원
자문요청사유		5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형		- 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 - 현장여건 상이(지질, 용수 등)
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 슬라브 두께 변경(180mm→120~470mm) 및 슬래브와 밀착한 Cross Beam 손상을 방지하기 위하여 절단 코아를 추가로 천공하여야 하는 등 당초설계와 현장여건이 상이한 점에 대한 공사금액 정산
원설계자 의견(요약) ○ 해당없음
자문결과 : 원안 가결

설계변경자문회의(소위원회) 결과 (제9차)

문서번호		요청부서	토목부 담당 이상근	요청일		2016년 8월 일
공 사 명	서울역고가 바닥판 철거공사
공사개요	공사규모	- 본선 교량 철거 : 바닥판 철거 L=516.5m. RC SLAB 철거 L=185.88m - 램프 교량 철거 : 2개소 253m - 보도육교 철거 : L=30m
	공사기간	2015. 11. 18. ~ 2016. 08. 30.
	감 리 사	㈜진우엔지니어링코리아,(주)신명건설기술공사,(주)진전기엔지니어링,해주엔지니어링(주)
	설 계 사	㈜삼안
	시 공 사	성도건설산업(주)
자문 안건명		서울역고가 통행금지에 따른 홍보물 설치수량 정산			요청금액		감 196,955천원
자문요청사유		5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형		- 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 - 민원해결, 보수, 보강
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 서울역고가 통행금지(‘15.12월)에 따른 시민안전 확보 및 불편완화를 위해 설치한 홍보물(안내표지판, 현수막, 배너 등)를 실제 설치한 수량으로 정산
원설계자 의견(요약) ○ 해당없음
자문결과 : 원안 가결

설계변경자문회의(소위원회) 결과 (제9차)

문서번호		요청부서	토목부 담당 이상근	요청일		2016년 8월 일
공 사 명	서울역고가 바닥판 철거공사
공사개요	공사규모	- 본선 교량 철거 : 바닥판 철거 L=516.5m. RC SLAB 철거 L=185.88m - 램프 교량 철거 : 2개소 253m, - 보도육교 철거 : L=30m
	공사기간	2015. 11. 18. ~ 2016. 08. 30.
	감 리 사	㈜진우엔지니어링코리아,(주)신명건설기술공사,(주)진전기엔지니어링,해주엔지니어링(주)
	설 계 사	㈜삼안
	시 공 사	성도건설산업(주)
자문 안건명		스터드 볼트 및 S자형 철근 절단 수량 반영			요청금액		증 116,556천원
자문요청사유		5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형		설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 서울역고가 철거공사에서 당초 설계에 누락된 거더상부의 스터드 볼트(28,857개) 및 S자형 철근(442개) 절단한 사안에 대한 공사비 반영
원설계자 의견(요약) ○ 해당없음
자문결과 : 원안 가결 ※ 스터드볼트 1개 절단시 그라인더날 10개 소모→10개 전달시 1개 소모로 수정