제97차 기술용역타당성 심사결과

□ 건    명 : ｢방화동 범머리 웅덩이 주변 하수관 신설공사 실시설계용역｣

□ 심 사 일 : 2013.  1. 25.

□ 사업개요

- 용 역 비 : 50백만원

- 용역기간 : 착수일로부터 90일

- 사업규모 : D800㎜ L=100m, D1000㎜ L=800m

□ 심사결과 : 부적정

심사항목	심 사 내 용
1. 용역의 필요성 [자체시행 47개 공종대상여부} □ 대상 ■ 미대상	○ 본 용역은 방화동 범머리 웅덩이 주변 상습 침수를 해소하기 위한 용역이나 - 주변 지역이 개활지로 표준설계도 등에 의한 자체설계로 시행하는 것이 타당함.
	알림 : 주요 공종이 자체시행대상 용역인 경우 원칙적으로 발주부서 자체추진
2. 용역비 산정의 적정성 - 개략공사비 산정의 적정성 - 소요 기술인력 산정의 적정성	○ 용역비 조정 : 50백만원 → 0원 (감 50백만원, 용역비 대비 100.0%)
3. 과업의 내용, 범위의 적정성 등 기타 검토의견	◦ 용역수행과정에서 용역비 집행 및 정산관리 등에 철저를 기하기 바람
4. 리스크 관리항목 적정성 - 용역지연ㆍ중단요인의 관리대책 적정성 - 용역비 증가요인의 관리대책 적정성	◦ 용역발주 시 명확한 과업범위를 제시하여 용역수행 중 과업범위 변경 등으로 인한 용역비 증가를 최소화 할 것