진접선차량기지 건설사업

<도시철도건설사업비특별회계 >

Ⅰ. 사업개요

□  사업근거 : 도시철도법 제3조의 2

□  위    치 : 경기도 남양주시 진접읍 일원

□  규    모 : 차량기지 254,666㎡, 인입선 3.07㎞, 창동차량기지 철거 1식

□  사업기간 : 2015. 1.~2019. 12.

□  총사업비 : 403,700백만원(’16년 : 7,880백만원)

□  추진방식 : 자체추진

□  예산 배정요구 및 집행계획

(단위 : 백만원)
예산액 (통계목별 작성)		계	1분기			2분기			3분기			4분기
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	배정	11,487						3,000			5,830	2,657
	집행	11,487						3,000				5,830	2,657
시설비	배정	11,487						3,000			5,830	2,657
	집행	11,487						3,000				5,830	2,657
감리비	배정
	집행
시설 부대비	배정
	집행

※배정요구 계획에 따라 정기배정(1분기내 배정원칙) / 집행계획은 실제 지출액 기준

Ⅱ. 추진계획

□  ’16. 03. : 설계단계 건설사업관리용역 계약(2차)

□  ’16. 09. : 진입도로 보상 추진

□  ’16. 10. : 기본 및 실시설계용역 완료

□  ’16. 10. : 건설사업관리용역(감리) 발주

□  ’16. 10. : 공사발주

작 성 자	도시철도계획부장 : 한동근 ☎772-7020 도철설계과장 : 이명수 ☎7022 담당 : 박창복 ☎7141