문서번호	시설과-7725
결재일자	2015.10.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	중부공원녹지사업소장
협조	공원운영과장
	조경팀장

조달물품 구매 변경 검토보고

(식물매트, 남산 국궁장시설 개선공사)

2015. 10.

조달물품 구매 변경 검토보고

(식물매트, 남산 국궁장(석호정)시설 개선공사)

남산 국궁장(석호정)*************급자재(조달구매)로 지급된 ‘식물매트’에 대해 조달구매 계약을 변경하고자 함

□ 조달물품 구매내역

○ 품    명 : 식물매트

○ 수    량 : 맥문동(340*500*T40), 금계국외(340*500*T40)

○ 납품기한 : ‘15.10.30(납품요구일 ’15.8.27)

○ 계약금액 : 24,330,680원(품대계 24,200,000원, 수수료 130,680원)

○ 업 체 명 : 그린유토피아  대표 박재희

□ 조달물품 변경내용

○ 수량 및 금액 변경

구분	품명	수량 (매)	단가	금 액			식별번호
				품대계	수수료	합계
변경전	식물매트 (맥문동)	915	10,000	9,150,000	49,410	9,199,410	22711641
변경후	식물매트 (맥문동)	-	-	-	-	-	-
변경전	식물매트 (금계국외)	1,075	14,000	15,050,000	81,270	15,131,270	22711655
변경후	식물매트 (금계국외)	-	-	-	-	-	-
변경전	-	-	-	-	-	-	-
변경후	식물망태	988	37,800	37,346,400	201,670	37,548,070	21809969

○ 납품기한 : 변경 없음

○ 변경사유 : 과녁판 뒤 사면이 급경사 및 마사토 지역으로 식물 활착이 어렵고 사면이 안정화되기 어려울 것으로 사료되므로 식물매트에서 식물망태로 변경 시행.  끝.