1. 강남고속터미널 고가도로 공사와 관련하여 안전대책을 수립후

공사를 시행하기 바라며, 향후 공사추진시 지역구 시의원들에게

사전에 충분히 설명하기 바람

	< 핵심답변 >
□고가를 이용하는 시민의 안전사고 방지를 위하여 방호벽 철거 구간에 임시방호책인 H빔을 전부 보완하여 설치하였으며 □2014년 11.30일까지 방호벽설치와 관련한 주요공정을 완료하였고 준공기한인 12.7일까지 최선을 다하여 안전하게 사업을 마무리 하겠음

□  공사개요

○ 공사기간 : 2014. 6. 11 ~ 12.7

○ 총사업비 : 1.700백만원

○ 도 급 자 : 예신건설(주) 대표 이혜경

○ 공사내용 : 방호벽 재설치 1013m, 가로등 22주 이설, 신축이음장치 28.8m교체 등

□  공사관련 안전조치

○ 방호벽 철거 구간에 설치된 임시 방호책인 H빔을 400m구간에 전부 보완하여 설치완료 (기존 임시방호책은 H빔 사이에 평균 6.3m가 벌어짐)

※ 현장개략도 및 사진 참조

□  추진현황

○ 2014. 6.11. : 공사 착공

○ 2014.11.13. : 행정사무감사 관련 현장방문

○ 2014.11.30. : 방호벽 1,013m 및 가로등 22주 재설치 완료

○ 2014.12.  7. : 신축이음장치 교체 등 잔여공사 완료 후 준공 예정

□ 향후계획

○ 향후 사업소 관내에서 공사를 시행 시, 수시로 시의원님께 알려드리고

대시민 홍보와 관련하여 긴밀하게 업무를 추진토록 하겠음

붙  임 : 현장개략도 및 사진 1부.

□ 현장 개략도

506.5m

임시방호책 보완설치 400m

현장사진 ①			현장사진 ②
반포대교방향	상 행				성모병원방향
	하 행
현장사진 ⑥		현장사진 ⑤	현장사진④	현장사진 ③

□ 현장사진

방호책 보완전		방호책 보완전		방호책 보완전
보완후 현장사진 ①		보완후 현장사진 ②		보완후 현장사진 ③
보완후 현장사진 ④		보완후 현장사진 ⑤		보완후 현장사진 ⑥