□ 지적사항 및 조치계획

현장명	지적내용	조치계획	비 고
한 강 월드컵대교	- 북단접속교(MP5) 가시설(가축도 등) 우기전 철거 및 저수호안 원상복구 필요	- ‘17년 6월 구조물 시공완료 후 가축도 및 호안 복구실시
	- 점용허가외 구간 원상복구 및 점용필요시 점용허가 득한 후 공사 시행	- 난지공원내 공사구간에 대한 하천점용허가 수행 ‘17년 2월한 실시
	- 물양장 구간 임시 축제구간은 우기 전 세굴안전 대책 강구 필요	- 노출 성토사면 토사유실 방지시설 설치 ‘17년 3월한 쉬트파일 시공
	- 고수부지 자재 등은 우기 전 철거 필요	- ‘17년 3월한 야적자재 외부반출

- 월드컵대교 건설공사 -

서울지방국토관리청 홍수기 후 점검 조치계획

□ 점검목적 : 2017년 홍수기 후 현장점검

□ 점검일시 : 2016. 12. 7(수) 13:00

□ 점 검 자 : 서울지방국토관리청 하천공사과

□ 점검사항 및 조치계획

점검사항	조치계획	비 고
북단접속교(MP5) 가시설(가축도 등) 우기전 철거 및 저수호안 원상복구 필요	가축도 시공 조치계획 - ‘17년 6월 구조물 시공 완료 후 가축도 및 호안 원상복구 실시
점용허가외 구간 원상복구 및 점용필요시 점용허가 득한 후 공사 시행	1,850㎡ 1,815㎡ 2,735㎡ 1,114㎡ 4,094㎡ 조치계획 - 난지공원내 공사구간 면적에 대하여 ‘17년 2월한 추가 하천점용 요청

점검사항	조치계획	비 고
물양장 구간 임시 축제구간은 우기 전 세굴안전 대책 강구 필요	조치계획 - 성토사면 전면부에 토사유실 방지시설 설치 ‘17년 3월한 쉬트파일 시공
고수부지 자재 등은 우기 전 철거 필요	조치계획 - ‘17년 3월 야적자재 외부반출