국립중앙의료원 담장개방 녹화사업 조치(취소)보고

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 국립중앙의료원 담장개방 녹화사업 실시설계용역

○ 대 상 지 : 중구 을지로6가 18-79번지 국립중앙의료원 담장주변 일대

○ 용역기간 : 2014.  3.  12 ~ 9.  30 (진행률 약 55%)

○ 도 급 자 : ㈜에코밸리 대표 이재흥

○ 도 급 액 : 14,700천원

○ 용역내용 : 담장 330m구간 개방 후 식재 및 녹지대 시설정비

□ 추진경위

○ 2014.  2. 11 : 사업 추진계획 통보[조경과-1716(2014.2.11.)]

○ 2014.  2. 27 : 기술용역타당성 심사 완료

○ 2014.  3. 12 : 실시설계용역 착수

○ 2014.  4.  3 : 용역안 보고 및 의견수렴(용역사↔국립의료원)

○ 2014.  4. 28 : 준공기한연기(~5.30)

○ 2014.  5. 13 : 의견반영 및 수정안 설명(용역사↔국립의료원)

○ 2014.  5. 28 : 추진일정 연기요청(국립의료원)

○ 2014.  5. 29 : 준공기한 연기(~9.30)

○ 2014.  9.  7 : 담장개방 녹화사업범위 조정요청(국립의료원)

○ 2014.  9. 26 : 사업 “부적합” 통보(조경과)

○ 2014.  9. 30 : 사업 중단 검토보고 및 관계기관 통보

○ 2014. 10. 07 : 기성부분준공검수

○ 2014. 10. 13 : 설계비(국비) 납부요청

○ 2014. 10. 31 : 국비 납부완료(국립의료원 2,409천원)

○ 2014. 11. 12 : 용역준공금 지출완료

□ 사업취소 사유

○ 근    거

- 국립중앙의료원 시설팀-1113(2014.09.05.)

- 조경과-12892(2014.9.25.)

○ 취소사유

- 국립의료원측에서 담장개방 구역의 축소 및 일부조정 요청에 대해 서울시(조경과)에 진단한 바, 조정지역은 2003년 담장개방이 기 시행된 구간으로 사업취지에 “부적합” 하다고 판단하였음

□ 조치결과

○ 용역비산정 : 용역수행 실적에 따른 정산(예정공정표상 공정율 적용)

○ 용역비 정산금액

- 계약금액 : 금14,700,000원

- 정산금액 : 금 8,030,000원 (계획대비 실적 공정율 55% 인정)

○ 용역비 지급 :  시비:국비=7:3 매칭비율에 맞춰 지급처리

∘ 중부사업소(시비) : 8,030천원×70%=5,621,000원

∘ 국립의료원(국비) : 8,030천원×30%=2,409,000원

첨부 : 공공기관 담장개방 녹화사업 조치(취소)보고 1부.

공공기관 담장개방 녹화사업 조치(취소)보고

사 업 명	국립중앙의료원 담장개방 녹화사업
대 상 지	서울시 중구 을지로6가 18-79번지 국립중앙의료원 담장
대상면적	1,080㎡(330m)		녹화면적		1,080㎡
사업내용	- 국립중앙의료원 담장 철거 및 녹지조성
용역기간	2014. 3. 12 ~ 9. 30
공사기간	-
용 역 사	(주)에코밸리 대표 이재흥
시 공 사	-
예산구분	계	설계용역				기타
		시비(서울시)		국비(국립중앙의료원)
예산배정액 (원)	15,438,000	15,438,000
원인행위액 (원)	14,700,000	14,700,000
기성준공액 (원)	8,030,000	8,030,000
지 출 액 (원)	8,030,000	5,621,000		2,409,000
잔 액 (원)	9,817,000	9,817,000
기타사항	- 설계용역수행 중 국립중앙의료원의 사업구간 조정요청 등 사유발생으로 사업추진이 중단됨.