㈜도화엔지니어링외 1개사	감 리 검 토 의 견 서	2015. 01.
공 사 명	구리암사대교연결도로건설공사	작성자 : 곽경표
검 토 건 명	RAMP-B 종배수관 변경 검토

1. 검토사유

본선 배수관로(명일역방향 D600)의 종점부가 서원마을 V형측구와 연결되어 있어  민원이 야기됨으로 이에 대한 방안으로 RAMP-B의 자전거도로측으로 배수관로를 연장 연결하여 천호3수문으로 배수하는 안을 검토함.

o 관련근거 : 신성 제2015-5 (2015. 01. 07)

o 위치도

2. 검토내용

가. 민원해소 방안

☐ 녹지대 하부의 V형 측구는 녹지대에서 서원마을로 유입되는 우수처리용으로서 삭제가          불가능하며 현재 설계대로 존치

☐ 용마방향의 종배수관(D600)을 암사IC RAMP-B 측면의 자전거도로에 연장 연결하여           천호3수문으로 배수처리

☐ 배수관로 평면도

서원마을대체녹지

☐ 배수관로 횡단면도

나. 공사비 증감

공 종	단위	수 량			공사비 (단위 천원)			비 고
		당초	변경	증감	당초	변경	증감
☐ 배수공
흄관(∅600)	m	-	145	145	-	7,166	7,166
터파기(토사)	㎥	-	542	542	-	412	412
되메우기 및 다짐	㎥	-	442	442	-	1,218	1,218
원형맨홀1호	NR	-	5	5	-	6,547	6,547
터파기(토사)	㎥	-	107	107	-	81	81
되메우기 및 다짐	㎥	-	90	90	-	248	248
직접공사비계						15,672	15,672
제경비						7,628	7,628
관급자재비						5,200	5,200
총공사비						28,500	28,500

3. 결론

☐ 본선 종배수관(명일역방향)의 V형측구연결은 도로의 우수가 마을쪽으로 배수되는 것에 대       한 서원마을의 민원에 대하여

☐ RAMP-B의 자전거도로로 종배수관을 연결하여 천호3수문으로 배수처리를 하고자 하며

☐ 이로인한 공사비 증액 28,500천원은 추후 설계변경시 반영하고자 함.

붙임 : 시공사 관련공문 사본 1부

암사대교건설공사 외1건

통합전면책임감리용역

책임감리원 우 재 경