	주간 업무 현황 보고서
	단계	실행 및 통제	프로세스명	보고관리	문서번호	PJ2-5-1
	버전	v 1.0	사업명	2013행정포털개선사업	작성부서	가비아

▪ 사 업 명	: 2013년 행정포털 개선사업
▪ 사 업 부 서	: 정보시스템담당관
▪ 추 진 기 간	: 2013.12.06 ~ 2014.06.03

번호	작업구분명	사업기간	단계	진척율		비고
				계획	실적
총계	프로젝트 전체 진척율	2013.12.06 ~ 2014.06.03	전체	12%	12%
1	사업관리	2013.12.06 ~ 2014.06.03	준비	12%	12%
2	컨설팅	2013.12.06 ~ 2014.02.10	준비	13%	13%
3	인프라구성	2013.12.06 ~ 2014.02..10	준비	15%	15%
4	시스템개발	2013.12.06 ~ 2014.05.10	준비	10%	10%
6	시험 및 운영, 안정화

주간 업무 현황 보고서(4/26주차)

주간업무현황보고서

서울특별시                                                                PJ2-5-1/                                                                              가비아

진행단계	보고						전체 진척율	12% / 12% (실적/계획)
단위과제	금주실적(2013.12.30 ~ 2014.01.03)						차주계획(2014.01.06 ~ 2014.1.10)
	계 획		진척율	실 적		진척율	내 용		진척율
사업관리	성과 목표치(KPI) 재설정		12%	성과 목표치 (KPI) 재설정 개발 인력 투입		12%	품질 관리 일정 관리		15%
UI/UX 컨설팅	메뉴별 이용현황 분석 분석결과 검토		13%	메뉴별 이용현황 분석 분석결과 검토 외부컨설팅 전문가 섭외		13%	정보수요조사 벤치마킹 사용자현황조사 전문가 계약진행/업무계획수립		16%
인프라구성	S/W 설치, H/W 설치 일정 내부 확정		15%	S/W 설치, H/W 설치 일정 내부 확정 (1월 24일 설치 예정)		15%	S/W,H/W 설치 준비		20%
시스템개발	개발서버/운영서버 구성 기술분석		10%	개발서버/운영서버 구성 - 사업개발/운영 개발서버 구성 계획서 제출 기술분석 - 데이터 베이스(DB) 구조 분석 - 게시판 구조 분석 - 소스 취약점 분석 - 모바일 환경설정 관련 분석 - 포털 환경 설정 관련 분석 - 포털 기능 점검		10%	개발서버/운영서버 구성 기술분석 요구사항 정의		13%
미결업무 대책	내 용				대책 및 조치사항
	개발서버 확보현황 별도 보고, 대책 수립 요				인프라 구성 이후 개발/ 운영 서버 구성
협의사항
산출물 / 별첨사항	일련번호	내 용