	주간 업무 현황 보고서
	단계	실행 및 통제	프로세스명	보고관리	문서번호	PJ2-5-1
	버전	v 1.0	사업명	2013행정포털개선사업	작성부서	가비아

▪ 사 업 명	: 2013년 행정포털 개선사업
▪ 사 업 부 서	: 정보시스템담당관
▪ 추 진 기 간	: 2013.12.06 ~ 2014.06.03

번호	작업구분명	사업기간	단계	진척율		비고
				계획	실적
총계	프로젝트 전체 진척율	2013.12.06 ~ 2014.06.03	전체	15%	15%
1	사업관리	2013.12.06 ~ 2014.06.03	준비	15%	15%
2	컨설팅	2013.12.06 ~ 2014.02.10	준비	16%	16%
3	인프라구성	2013.12.06 ~ 2014.02.10	준비	20%	20%
4	시스템개발	2013.12.06 ~ 2014.05.10	준비	13%	13%
6	시험 및 운영, 안정화

주간 업무 현황 보고서(5/26주차)

주간업무현황보고서

서울특별시                                                                PJ2-5-1/                                                                              가비아

진행단계	보고						전체 진척율	15% / 15% (실적/계획)
단위과제	금주실적( 2014.01.06 ~ 2014.01.10. )						차주계획 ( 2014.01.13 ~ 2014.1.17)
	계 획		진척율	실 적		진척율	내 용		진척율
사업관리	- 품질관리 - 일정관리		15%	- 품질관리 - 서류 제출 - 일정관리		15%	- 품질 관리 - 일정 관리		18%
UI/ UX 컨설팅	- 서베이 사례 조사 - 화면캡처 분석 - 벤치마킹 - 전문가 계약진행/업무계획수립		16%	- 서베이 사례조사 및 설문조사계획수립 중 - 화면캡처 분석 진행중 - 벤치마킹 - 전문가 계약진행/업무계획수립		16%	- 설문조사 계획 수립 - 전문가 평가계획 수립 - 화면분석 및 대안제시 드래프트 - 벤치마킹 진행 계속		18%
인프라구성	- S/W 설치, H/W 설치 준비		20%	- 하드웨어 설치계획서 제출		20%	- 24일 설치 준비		23%
시스템개발	- 개발서버/운영서버 구성 NT서버 렌탈 및 DBMS 설치 개발라이센스 확보 완료 - 기술 분석 - 요구사항 정의		13%	- 개발 서버/운영서버 구성 DB 서버 구축 사전 작업 개발라이센스 확보 완료 및 발주 - 기술 분석 현행 시스템 분석(게시판 소스 구조, 사용자 권한, 모바일 설치 환경 분석) - 요구사항 정의 요구사항확인요소 작성(면담기초자료)		13%	- 기술 분석 - 요구사항 정의 1차 완료 및 feedback		15%
미결업무 대책	내 용				대책 및 조치사항
협의사항
산출물 / 별첨사항	일련번호	내 용