	주간 업무 현황 보고서
	단계	실행 및 통제	프로세스명	보고관리	문서번호	PJ3-5-1
	버전	v 1.0	사업명	2013행정포털개선사업	작성부서	가비아

▪ 사 업 명	: 2013년 행정포털 개선사업
▪ 사 업 부 서	: 정보시스템담당관
▪ 추 진 기 간	: 2013.12.06 ~ 2014.06.03

번호	작업구분명	사업기간	단계	진척율		비고
				계획	실적
총계	프로젝트 전체 진척율	2013.12.06 ~ 2014.06.03	전체	60%	59%
1	사업관리	2013.12.06 ~ 2014.06.03	실행	62%	58%
2	UI/UX 컨설팅	2013.12.06 ~ 2014.03.05	완료	100%	100%
3	인프라구성	2013.12.06 ~ 2014.02.15	완료	100%	100%
4	시스템개발	2013.12.06 ~ 2014.05.10	개발	55%	55%
6	시험 및 운영, 안정화	2014.04.07.~2014.06.03	준비

주간 업무 현황 보고서(17/26주차)

주간업무현황보고서

서울특별시                                                                 PJ3-5-1 /2                                                                           가비아

진행단계	보고						전체 진척율	60% / 59% (계획/실적)
단위과제	금주실적 (2014.3.31 ~ 2014.4.4)						차주계획 (2014.4.07 ~ 2014.4.11)
	계 획		진척율	실 적		진척율	내 용		진척율
사업관리	감리 및 시정조치 보완		62%	감리 및 시정조치 보완 시정조치계획 수립 결과보완(검사기준서 작성 중)		58%	감리 및 시정조치 보완		62%
UI/ UX 컨설팅			100%			100%			100%
인프라구성			100%			100%			100%
시스템개발	1) 설계 스토리보드 수정 작업 요구사항 추적표 작성(감리기준 적용) 프로그램 명세서 수정 2) 개발 퍼블리싱 - 게시판 퍼브리싱 작업 UX전환 -메인(50%)/게시판(50%)/개인화(80%) 메인 페이지 개인화 관리기능 개발 - 마이포털(100%, 4.1) 게시판 - 시구공동게시판 검색기능 개선(100%) - 게시판 설명 조회 기능(100%) - 게시판 설명 조회기능(100%) 공통 innorix FD / AD 7.x 설치(100%) 브라우저 호환성 오류 처리		55%	1) 설계 스토리보드 수정 작업 요구사항 추적표 작성(감리기준 적용) 프로그램 명세서 수정 2) 개발 퍼블리싱 - 게시판 퍼브리싱 작업 UX전환 - 메인(50%)/게시판(50%)/개인화(85%) 메인 페이지 개인화 관리기능 개발 - 마이포털(70%, 4.4 완료예정) *포틀릿 작업 미완료, 설정 팝업작업(신규) 게시판 - 시구공동게시판 검색기능 개선(100%) - 게시판 설명 조회 기능(100%) - 관리자/사용자 구분 모드 개발(50%) 공통 innorix FD / AD 7.x 설치(100%) 브라우저 호환성 오류 처리 - 조직도 오류 처리		55%	1) 설계 -스토리보드(통합검색, 관리자) 2) 개발 퍼블리싱 - 마이포털 퍼브리싱 작업 UX전환 - 메인(60%)/게시판(60%)/개인화(95%) 메인 페이지 개인화 관리기능 개발 - 마이포털(100%) *포틀릿 작업 미완료, 설정 팝업작업(신규) - 추가포틀릿 개발 작업(50%) 게시판 - 게시판 종합 검색 기능 - 관리자/사용자 구분 모드 개발(70%) 공통 식단관리자 등록기능 개선(100%) 브라우저 호환성 오류 처리 관리자 계정으로 로그인시 자동고지(100%)		60%
미결업무 대책	내 용				대책 및 조치사항
협의사항	화면기획(설계)요건 마감 필요함
산출물 / 별첨사항	일련번호	내 용