	주간 업무 현황 보고서
	단계	실행 및 통제	프로세스명	보고관리	문서번호	PJ3-5-1
	버전	v 1.0	사업명	2013행정포털개선사업	작성부서	가비아

▪ 사 업 명	: 2013년 행정포털 개선사업
▪ 사 업 부 서	: 정보시스템담당관
▪ 추 진 기 간	: 2013.12.06 ~ 2014.06.03

번호	작업구분명	사업기간	단계	진척율		비고
				계획	실적
총계	프로젝트 전체 진척율	2013.12.06 ~ 2014.06.03	전체	64%	63%
1	사업관리	2013.12.06 ~ 2014.06.03	실행	65%	62%
2	UI/UX 컨설팅	2013.12.06 ~ 2014.03.05	완료	100%	100%
3	인프라구성	2013.12.06 ~ 2014.02.15	완료	100%	100%
4	시스템개발	2013.12.06 ~ 2014.05.10	개발	60%	59%
5	시험 및 운영, 안정화	2014.04.07.~2014.06.03	준비	10%	10%

주간 업무 현황 보고서(18/26주차)

주간업무현황보고서

서울특별시                                                                 PJ3-5-1 /2                                                                           가비아

진행단계	보고						전체 진척율	64% / 63% (계획/실적)
단위과제	금주실적 (2014.4.07 ~ 2014.4.11)						차주계획 (2014.4.14 ~ 2014.4.18)
	계 획		진척율	실 적		진척율	내 용		진척율
사업관리	감리 및 시정조치 보완 테스트 계획서 작성		65%	감리 및 시정조치 보완 과업대비표 작성 및 기존 산출물 보완		62%	검사기준서 작성		70%
UI/ UX 컨설팅 인프라구성			100%			100%			100%
시스템개발	1) 설계 -스토리보드(통합검색, 관리자) 2) 개발 퍼블리싱 - 마이포털 퍼브리싱 작업(80%) UX전환 - 메인(60%)/게시판(60%)/개인화(95%) 메인 페이지 개인화 관리기능 개발 - 마이포털(100%) *포틀릿 작업 미완료,설정 팝업작업(신규) - 추가포틀릿 개발 작업(50%) 게시판 - 게시판 종합 검색 기능 - 관리자/사용자 구분 모드 개발(70%) 공통 식단관리자 등록기능 개선(100%) 브라우저 호환성 오류 처리 관리자 계정으로 로그인시 자동고지(100%)		60%	1) 설계 -스토리보드(통합검색, 관리자) 2) 개발 퍼블리싱 - 마이포털 퍼브리싱 작업(80%) UX전환 - 메인(60%)/게시판(60%)/개인화(95%) 메인 페이지 개인화 관리기능 개발 - 마이포털(80%, 4월 11일 완료 예정) *포틀릿 작업 미완료, 설정 팝업작업(50%) - 추가포틀릿 개발 작업(50%) - 해야할일 동적카운트 작업(50%) 게시판 - 게시판 종합 검색 기능(50%, 4월11일 완료) - 관리자/사용자 구분 모드 개발(100%) 게시판 관리자 사용자 권한관리(80%) 공통 식단관리자 등록기능 개선(100%) 브라우저 호환성 오류 처리 관리자 계정으로 로그인시 자동고지(80%, 4월9일 완료예정) 관리자 기능 오류 처리(전환작업)		59%	1) 설계 -스토리보드(통합검색, 관리자) 2) 개발 퍼블리싱 - 마이포털 퍼브리싱 작업(90%) UX전환 - 메인(60%)/게시판(60%)/개인화(95%) 메인 페이지 개인화 관리기능 개발 - 마이포털(100%) *포틀릿 작업 미완료,설정 팝업작업(100%) - 추가포틀릿 개발 작업(70%) - 해야할일 동적카운트 작업(100%) 게시판 - 부서업무공지 등록기능 개선(100%) - 공지게시판의 개인화 구성(100%) 공통 브라우저 호환성 오류 처리 관리자 기능 오류 처리(전환작업)		68%
시험 및 운영안정화	테스트계획수립		10%	테스트 계획 작성중		10%	테스트계획/시나리오 수정 보완		15%
미결업무 대책	내 용				대책 및 조치사항
협의사항	이노릭스 파일 첨부 관련(GNB고정과 연관) / 팝업시 기능은 I-Frame기능 사용 / 추가수정요구사항 반영
산출물 / 별첨사항	일련번호	내 용