	주간 업무 현황 보고서
	단계	실행 및 통제	프로세스명	보고관리	문서번호	PJ3-5-1
	버전	v 1.0	사업명	2013행정포털개선사업	작성부서	가비아

▪ 사 업 명	: 2013년 행정포털 개선사업
▪ 사 업 부 서	: 정보시스템담당관
▪ 추 진 기 간	: 2013.12.06 ~ 2014.06.03

번호	작업구분명	사업기간	단계	진척율		비고
				계획	실적
총계	프로젝트 전체 진척율	2013.12.06 ~ 2014.06.03	전체	71%	70%
1	사업관리	2013.12.06 ~ 2014.06.03	실행	70%	70%
2	UI/UX 컨설팅	2013.12.06 ~ 2014.03.05	완료	100%	100%
3	인프라구성	2013.12.06 ~ 2014.02.15	완료	100%	100%
4	시스템개발	2013.12.06 ~ 2014.05.10	개발	71%	69%
5	시험 및 운영, 안정화	2014.04.07.~2014.06.03	준비	15%	15%

주간 업무 현황 보고서(19/26주차)

주간업무현황보고서

서울특별시                                                                 PJ3-5-1 /2                                                                           가비아

진행단계	보고						전체 진척율	71% / 70% (계획/실적)
단위과제	금주실적 (2014.4.14 ~ 2014.4.18)						차주계획 (2014.4.21 ~ 2014.4.25)
	계 획		진척율	실 적		진척율	내 용		진척율
사업관리	감리 및 시정조치 보완		70%	감리 및 시정조치 보완 과업대비표 작성 및 기존 산출물 보완 인력추가투입(김종배)		70%	감리 조치사항 현장확인		74%
UI/ UX 컨설팅 인프라구성			100%			100%			100%
시스템개발	1) 설계 -스토리보드(통합검색, 관리자) 2) 개발 퍼블리싱 - 마이포털 퍼브리싱 작업(90%) UX전환 - 메인(60%)/게시판(60%)/개인화(95%) 메인 페이지 개인화 관리기능 개발 - 마이포털(100%) *포틀릿 작업 미완료,설정 팝업작업(100%) - 추가포틀릿 개발 작업(70%) - 해야할일 동적카운트 작업(100%) 게시판 - 부서업무공지 등록기능 개선(100%) - 공지게시판의 개인화 구성(100%) 공통 브라우저 호환성 오류 처리 관리자 기능 오류 처리(전환작업)		71%	1) 설계 -스토리보드(통합검색, 관리자) 모바일 요구사항 명세화 2) 개발 퍼블리싱 - 전체 퍼브리싱 작업(85%) UX전환 -메인(80%)게시판(70%)개인화(95%)검색(40%) 메인 페이지 개인화 관리기능 개발 - 마이포털(90%) *포틀릿 작업 미완료, 설정 팝업작업(80%) - 추가포틀릿 개발 작업(60%) - 해야할일 동적카운트 작업(80%) - layer 팝업 작업(60%) 게시판 - 부서업무공지 등록기능 개선(90%) - 공지게시판의 개인화 구성(100%) - 게시판 종합 검색 기능(50%) - 관리자/사용자 구분 모드 개발(100%) 게시판 관리자 사용자 권한관리(80%) 공통 브라우저 호환성 오류 처리 관리자 기능 오류 처리(전환작업) 비밀번호 정지해제/초기화 작업(70%) 통합검색 수집서버 : 수집웹사이트 룰 등록 및 수집진행 검색서버 : 권한 및 카테고리 SQL개발진행 Open API코드개발 중		69%	1) 설계 -스토리보드(통합검색, 관리자) 2) 개발 퍼블리싱 - 전체 퍼브리싱 작업(100%) UX전환 - 메인(100%)/게시판(100%)/개인화(100%)/검색(40%) 메인 페이지 개인화 관리기능 개발 - 마이포털(100%) *포틀릿 작업 미완료, 설정 팝업작업(100%) - 추가포틀릿 개발 작업(100%) - 해야할일 동적카운트 작업(100%) - layer 팝업 작업(100%) 게시판 - 게시판 종합 검색 기능(100%) 게시판 관리자 사용자 권한관리(80%) 공통 브라우저 호환성 오류 처리 관리자 기능 오류 처리(전환작업) 비밀번호 정지해제/초기화 작업(100%) 통합검색 수집서버: 수집진행 및 수집데이터 테스트 검색서버:권한 및 카테고리 개발/검색페이지개발 Open API코드개발 진행		80%
시험 및 운영안정화	테스트계획/시나리오 수정 보완		15%	테스트계획/시나리오 수정 보완 단위테스트 체크리스트 작성 시스템전환 계획 협의		15%			15%
미결업무 대책	내 용				대책 및 조치사항
협의사항	이노릭스 파일 첨부 관련 협의중 팝업 레이어크기 조절 검토요청 게시판 신규생성, 통합, 분할에 따른 데이터 정비방안 수립 필요 모바일API 개발시 사용자 인증에 단방향 암호화 적용시켜야 함 테스트 환경 구축 및 시스템 전환을 위해 행정포털 운영팀과 협의가 필요함
산출물 / 별첨사항	일련번호	내 용