	주간 업무 현황 보고서
	단계	실행 및 통제	프로세스명	보고관리	문서번호	PJ3-5-1
	버전	v 1.0	사업명	2013행정포털개선사업	작성부서	가비아

▪ 사 업 명	: 2013년 행정포털 개선사업
▪ 사 업 부 서	: 정보시스템담당관
▪ 추 진 기 간	: 2013.12.06 ~ 2014.06.03

번호	작업구분명	사업기간	단계	진척율		비고
				계획	실적
총계	프로젝트 전체 진척율	2013.12.06 ~ 2014.06.03	전체	74%	74%
1	사업관리	2013.12.06 ~ 2014.06.03	실행	74%	74%
2	UI/UX 컨설팅	2013.12.06 ~ 2014.03.05	완료	100%	100%
3	인프라구성	2013.12.06 ~ 2014.02.15	완료	100%	100%
4	시스템개발	2013.12.06 ~ 2014.05.10	개발	80%	80%
5	시험 및 운영, 안정화	2014.04.07.~2014.06.03	준비	20%	20%

주간 업무 현황 보고서(20/26주차)

주간업무현황보고서

서울특별시                                                                 PJ3-5-1 /2                                                                           가비아

진행단계	보고						전체 진척율	74% / 74% (계획/실적)
단위과제	금주실적 (2014.4.21 ~ 2014.4.25)						차주계획 (2014.4.28 ~ 2014.5.02)
	계 획		진척율	실 적		진척율	내 용		진척율
사업관리	감리 및 시정조치 보완		74%	감리시정조치계획서 제출 계획서에 따른 보완작업 진행 모바일 요건정의협의 및 요건정의 작성		74%	중간보고자료 작성 산출물 작업 진행 추가 요청사항 일정수립 데이터 정비방안 수립		77%
UI/ UX 컨설팅 인프라구성			100%			100%			100%
시스템개발	1) 설계 -스토리보드(통합검색, 관리자) 2) 개발 퍼블리싱 - 전체 퍼브리싱 작업(100%) UX전환 -메인(100%)/게시판(100%)/개인화(100%)/검색(40%) 메인 페이지 개인화 관리기능 개발 - 마이포털(100%) *포틀릿 작업 미완료, 설정 팝업작업(100%) - 추가포틀릿 개발 작업(100%) - 해야할일 동적카운트 작업(100%) - layer 팝업 작업(100%) 게시판 - 게시판 종합 검색 기능(100%) 게시판 관리자 사용자 권한관리(80%) 공통 브라우저 호환성 오류 처리 관리자 기능 오류 처리(전환작업) 비밀번호 정지해제/초기화 작업(100%) 통합검색 수집서버: 수집진행 및 수집데이터 테스트 검색서버:권한 및 카테고리 개발/검색페이지개발		80%	1) 설계 -스토리보드(통합검색완료, 관리자작성중) 2) 개발 퍼블리싱(프런트) - 전체 퍼브리싱 작업(95%,금주 완료 예정) UX전환 -메인(95%,금주완료예정)/게시판(95%,금주완료 예정)/개인화(100%)/검색(40%) 메인 페이지 개인화 관리기능 개발 - 마이포털(100%) *포틀릿 작업 완료, 설정 팝업작업(100%) - 추가포틀릿 개발 작업(95%,금주완료 예정) -해야할일 동적카운트작업(90%,금주완료예정) - layer 팝업 작업(95%, 금주완료 예정) 게시판 - 게시판 종합 검색 기능(90%,금주완료예정) 게시판 관리자 사용자 권한관리(100%) 공통 사이트 맵 기능(80%,금주 완료 예정) 웹로그 적용 개발(80%, 금주 완료 예정) 브라우저 호환성 오류 처리 관리자 기능 오류 처리(전환작업) 비밀번호 정지해제/초기화 작업(90%,금주완료예정) 통합검색 수집서버 : 수집웹사이트 룰 등록 및 수집진행 검색서버 : 권한 및 카테고리 SQL개발진행 로컬테스트 및 검색페이지 개발 Open API코드개발 중		80%	1) 설계 -스토리보드(관리자) 2) 개발 단위테스트 후 수정 작업(오류, 부분변경) 퍼블링싱 관리자화면 디자인 및 퍼블리싱 진행 통합검색 수집서버:수집데이터 테스트/정제 검색서버:권한 및 카테고리 개발/테스트 진행 검색페이지 디자인 개발/테스트 Open API코드개발 모바일 요건정의에 따른 개발진행 인터페이스 API 개발 진행		83%
시험 및 운영안정화	테스트계획 협의 및 수정 보완		20%	테스트계획 수정 보완 단위테스트 체크리스트 작성 시스템전환 계획 협의 및 수정		20%	단위/통합 테스트 진행 성능 테스트 준비		35%
미결업무 대책	내 용				대책 및 조치사항
협의사항
산출물 / 별첨사항	일련번호	내 용