	주간 업무 현황 보고서
	단계	실행 및 통제	프로세스명	보고관리	문서번호	PJ3-5-1
	버전	v 1.0	사업명	2013행정포털개선사업	작성부서	가비아

▪ 사 업 명	: 2013년 행정포털 개선사업
▪ 사 업 부 서	: 정보시스템담당관
▪ 추 진 기 간	: 2013.12.06 ~ 2014.06.03

번호	작업구분명	사업기간	단계	진척율		비고
				계획	실적
총계	프로젝트 전체 진척율	2013.12.06 ~ 2014.06.03	전체	77%	77%
1	사업관리	2013.12.06 ~ 2014.06.03	실행	77%	77%
2	UI/UX 컨설팅	2013.12.06 ~ 2014.03.05	완료	100%	100%
3	인프라구성	2013.12.06 ~ 2014.02.15	완료	100%	100%
4	시스템개발	2013.12.06 ~ 2014.05.10	개발	83%	83%
5	시험 및 운영, 안정화	2014.04.07.~2014.06.03	준비	35%	35%

주간 업무 현황 보고서(21/26주차)

주간업무현황보고서

서울특별시                                                                 PJ3-5-1 /2                                                                           가비아

진행단계	보고						전체 진척율	77% / 77% (계획/실적)
단위과제	금주실적 (2014.4.28 ~ 2014.5.02)						차주계획 (2014.5.07 ~ 2014.5.09)
	계 획		진척율	실 적		진척율	내 용		진척율
사업관리	중간보고자료 작성 산출물 작업 진행 추가 요청사항 일정수립 데이터 정비방안 수립		77%	중간보고자료 작성(작성중) 산출물 작업 진행 추가 요청사항 일정수립(작성중, 리스트우선검토) 데이터 정비방안 수립(작성중) web/was 지원협의		77%	중간보고자료 작성(진행완료) 산출물 작업 진행 추가 요청사항 일정수립(진행완료) 데이터 정비방안 수립(진행완료)		77%
UI/UX컨설팅 인프라구성			100%			100%			100%
시스템개발	11) 설계 -스토리보드(관리자) 2) 개발 단위테스트 후 수정 작업(오류, 부분변경) 퍼블링싱 관리자화면 디자인 및 퍼블리싱 진행 통합검색 수집서버:수집데이터 테스트/정제 검색서버:권한 및 카테고리 개발/테스트진행 검색페이지 디자인 개발/테스트 Open API코드개발 모바일 인터페이스 API 개발 진행		83%	1) 설계 -스토리보드(관리자 작성중) 2) 개발 단위테스트 후 수정 작업(오류, 부분변경) 이노릭스 수정스크립 적용 및 확인 퍼블링싱 관리자화면 디자인 및 퍼블리싱 진행 통합검색 수집서버:수집데이터 테스트/정제 검색서버:권한 및 카테고리 개발/테스트진행 검색페이지 디자인 개발/테스트 Open API코드개발 모바일 인터페이스 API 개발 진행		83%	1) 설계 -스토리보드(관리자작성 완료) 2) 개발 단위테스트 후 수정 작업(오류, 부분변경) 퍼블링싱 관리자화면 디자인 및 퍼블리싱 진행 통합검색 Open API개발 모바일 인터페이스 API 개발 진행		86%
시험 및 운영안정화	단위/통합 테스트 진행 1차 성능 테스트 준비		35%	단위/통합 테스트 진행 1차 성능 테스트 준비 및 실행		35%	단위/통합 테스트 진행 1차 성능 테스트 실행 및 결과 보완 2차 성능 테스트 준비		43%
미결업무 대책	내 용				대책 및 조치사항
	도움말 형식협의, 이노릭스 수정,
협의사항	1. pdf 열람형태 변경(레이어팝업에서 기존형태로), 2. 공지 체크된 뉴스라도 공지영역 리스트에 존재하게 구성, 3.도움말: 사용하는 방법위주로 쉽게 알아볼 수 있도록 작성함. 4. 시범운영시 볼 수 있게 실데이터를 개발서버에 임포트하는 것 필요함. 5. 시범운영때 시행할 수 있는 활성화 방안 고려할 것.
산출물 / 별첨사항	일련번호	내 용