	주간 업무 현황 보고서
	단계	실행 및 통제	프로세스명	보고관리	문서번호	PJ3-5-1
	버전	v 1.0	사업명	2013행정포털개선사업	작성부서	가비아

▪ 사 업 명	: 2013년 행정포털 개선사업
▪ 사 업 부 서	: 정보시스템담당관
▪ 추 진 기 간	: 2013.12.06 ~ 2014.06.03

번호	작업구분명	사업기간	단계	진척율		비고
				계획	실적
총계	프로젝트 전체 진척율	2013.12.06 ~ 2014.06.03	전체	84%	83%
1	사업관리	2013.12.06 ~ 2014.06.03	실행	83%	83%
2	UI/UX 컨설팅	2013.12.06 ~ 2014.03.05	완료	100%	100%
3	인프라구성	2013.12.06 ~ 2014.02.15	완료	100%	100%
4	시스템개발	2013.12.06 ~ 2014.05.10	개발	88%	88%
5	시험 및 운영, 안정화	2014.04.07.~2014.06.03	준비	60%	55%

주간 업무 현황 보고서(23/26주차)

주간업무현황보고서

서울특별시                                                                 PJ3-5-1 /2                                                                           가비아

진행단계	보고						전체 진척율	84% / 83% (계획/실적)
단위과제	금주실적 (2014.5.12 ~ 2014.5.16)						차주계획 (2014.5.19 ~ 2014.5.23)
	계 획		진척율	실 적		진척율	내 용		진척율
사업관리	시범운영 계획 수립 가이드(매뉴얼) 작성		83%	중간보고자료 작성(작성중) 추가 요청사항 검토 가이드(매뉴얼) 작성중 종료감리 준비 모바일 요구사항 정의서 협의		83%	- 가이드(매뉴얼) 작성 종료감리 산출물 작성		86%
UI/UX컨설팅 인프라구성			100%			100%			100%
시스템개발	개발 테스트 후 수정 작업(오류, 부분변경) 퍼블링싱 관리자화면 디자인 및 퍼블리싱 진행 후 개발진행 통합검색 Open API개발 모바일 분석 및 요건정의/ 메인UI 디자인시안 도출		88%	개발 테스트 후 수정 작업(오류, 부분변경) 퍼블링싱 관리자화면 디자인 및 퍼블리싱 진행 통합검색 Open API설계서 작성/코드개발 성능/기능 테스트 오류사항 수정 행정포털UI 수정 모바일 업무요건 정의 및 AS-IS분석 메인디자인 시안작성 로컬환경구성		88%	개발 테스트 후 수정 작업(오류, 부분변경) 관리자화면 개발 통합검색 Open API코드개발 테스트후 오류사항 수정 산출물 작성 모바일 디자인 시안 확정 신규게시판 API 협의 및 확정 관련코딩진행 종료감리 산출물작성 통계관련 설계 및 사용자화면 작업진행		91%
시험 및 운영안정화	단위/통합 테스트 진행 2차 성능 테스트 실행 및 결과 보완 3차 성능 테스트 준비		60%	단위/통합 테스트 진행 2차 성능 테스트 실행 3차 테스트 준비 및 실행 (대행업체 섭외진행) - 3차 성능테스트 계획서 수립/테스트		55%	성능테스트 보완작업 진행 시스템 이관 작업 준비		85%
미결업무 대책	내 용				대책 및 조치사항
	태그프리(에디터)적용, 관리자화면 스토리보드 검토,
협의사항
산출물 / 별첨사항	일련번호	내 용