	주간 업무 현황 보고서
	단계	실행 및 통제	프로세스명	보고관리	문서번호	PJ3-5-1
	버전	v 1.0	사업명	2013행정포털개선사업	작성부서	가비아

▪ 사 업 명	: 2013년 행정포털 개선사업
▪ 사 업 부 서	: 정보시스템담당관
▪ 추 진 기 간	: 2013.12.06 ~ 2014.06.03

번호	작업구분명	사업기간	단계	진척율		비고
				계획	실적
총계	프로젝트 전체 진척율	2013.12.06 ~ 2014.06.03	전체	88%	87%
1	사업관리	2013.12.06 ~ 2014.06.03	실행	86%	85%
2	UI/UX 컨설팅	2013.12.06 ~ 2014.03.05	완료	100%	100%
3	인프라구성	2013.12.06 ~ 2014.02.15	완료	100%	100%
4	시스템개발	2013.12.06 ~ 2014.05.10	개발	91%	91%
5	시험 및 운영, 안정화	2014.04.07.~2014.06.03	준비	85%	85%

주간 업무 현황 보고서(24/26주차)

주간업무현황보고서

서울특별시                                                                 PJ3-5-1 /2                                                                           가비아

진행단계	보고						전체 진척율	84% / 83% (계획/실적)
단위과제	금주실적 (2014.5.19 ~ 2014.5.23)						차주계획 (2014.5.26 ~ 2014.5.30)
	계 획		진척율	실 적		진척율	내 용		진척율
사업관리	- 가이드(매뉴얼) 작성 종료감리 산출물 작성		86%	가이드(매뉴얼) 작성중 종료감리 준비 작성목록 맞추어 준비중 교육훈련 진행 이벤트 준비		85%	-종료감리 진행 및 보완		92%
UI/UX컨설팅 인프라구성			100%			100%			100%
시스템개발	개발 테스트 후 수정 작업(오류, 부분변경) 관리자화면 개발 통합검색 Open API코드개발 테스트후 오류사항 수정 산출물 작성 모바일 디자인 시안 확정 신규게시판 API 협의 및 확정 관련코딩진행 종료감리 산출물작성 통계관련 설계 및 사용자화면 작업진행		88%	개발 테스트 후 수정 작업(오류, 부분변경) 관리자화면 개발 통합검색 Open API 코드개발 및 테스트 성능/기능 테스트 오류사항 수정 산출물 모바일 - 신규게시판 API협의 및 관련코딩진행 - 종료감리 산출물 작성 - 확정시안에 따른 메인코딩 변경 - 기존 모바일오피스 형상관리 추가 및 전자정부 형태로 관리소스 구조변경 - 통계관련 설계 및 사용자화면 작업진행		88%	개발 테스트 후 수정 작업(오류, 부분변경) 관리자화면 개발 통합검색 Open API코드개발 테스트후 오류사항 수정 산출물 작성 모바일 게시판 통합 API작업 개발환경 구축 통계관련 설계 및 사용자화면 작업진행		91%
시험 및 운영안정화	성능테스트 보완작업 진행 시스템 이관 작업 준비		85%	성능테스트 보완작업 진행 시스템 이관 작업 준비 시범운영 개선사항 반영		85%	시범운영		85%
미결업무 대책	내 용				대책 및 조치사항
협의사항
산출물 / 별첨사항	일련번호	내 용