	주간 업무 현황 보고서
	단계	실행 및 통제	프로세스명	보고관리	문서번호	PJ3-5-1
	버전	v 1.0	사업명	2013행정포털개선사업	작성부서	가비아

▪ 사 업 명	: 2013년 행정포털 개선사업
▪ 사 업 부 서	: 정보시스템담당관
▪ 추 진 기 간	: 2013.12.06 ~ 2014.06.03

번호	작업구분명	사업기간	단계	진척율		비고
				계획	실적
총계	프로젝트 전체 진척율	2013.12.06 ~ 2014.06.03	전체	100%	100%
1	사업관리	2013.12.06 ~ 2014.06.03	실행	100%	100%
2	UI/UX 컨설팅	2013.12.06 ~ 2014.03.05	완료	100%	100%
3	인프라구성	2013.12.06 ~ 2014.02.15	완료	100%	100%
4	시스템개발	2013.12.06 ~ 2014.05.10	개발	100%	100%
5	시험 및 운영, 안정화	2014.04.07.~2014.06.03	준비	100%	100%

주간 업무 현황 보고서(26/26주차)

주간업무현황보고서

서울특별시                                                                 PJ3-5-1 /2                                                                           가비아

진행단계	보고						전체 진척율	100/ 100% (계획/실적)
단위과제	금주실적 (2014.6.2 ~ 2014.6.5)						차주계획 (2014.6.9 ~ 2014.6.13)
	계 획		진척율	실 적		진척율	내 용		진척율
사업관리	- 종료감리 시정조치 산출물 보완 - 준공		100%	준공신고 감리시정조치 진행 산출물보완		100%	- 종료감리 시정조치 진행 - 산출물 보완		100%
UI/UX컨설팅 인프라구성			100%			100%			100%
시스템개발	개발 오픈 후 수정 작업(오류, 부분변경) 추가 개발 사항 진행 통합검색 산출물 작성 모바일 모바일 프론트 부분 테스트 및 설치 통계관련 설계 및 사용자화면 작업진행		100%	개발 오픈 후 수정 작업(오류, 부분변경) 추가 개발 사항 진행 통합검색 산출물 작성/기능 안정화 모바일 WSDL 서비스 리펙토링 및 차후 유지관리 가능하게 환경구성. 관련 사항 확인		100%	모바일 통합게시판 관련사항 관리자 연계, 메인화면연계 개발서버 포팅(13일)		99%
시험 및 운영안정화	안정화, 디버깅 작업 지속		100%	안정화, 디버깅 작업 지속 DB튜닝 점검		100%	안정화, 디버깅 작업 지속 - DB 튜닝		100%
미결업무 대책	내 용				대책 및 조치사항
협의사항
산출물 / 별첨사항	일련번호	내 용