주간 공정 보고

○ 사 업 명 : 차세대 서울시 교통신호체계 시범운영

○ 용역기간 : 2017. 12. 28 ~ ‘18. 12. 27 (12개월)

○ 공 정 율

구분	금 회		누 계		대비
	계획	실적	계획	실적
공정율	1.9	1.9	5.7	5.7	100.0

○ 업무진행사항

구 분	금주 실적 (3 주 차) (2018. 01. 15 ~ 2018. 01. 21)	익주 계획 (4 주 차) (2018. 01. 22 ~ 2018. 01. 28)	비 고
사업일반보고	○ 주간공정보고 회의록 발송(교통개선기획실) ○ 용역진회의(2018.01.09., 한국교통대학교) ○ 착수보고회 보고자료 작성	○ 착수보고회 회의일시 2018년 1월 24일 수요일 14:00 예정
기술업무 추진사항	[시범사업 부문] ○ 서울시 신호운영관련 현황조사 항목도출 - 센터/현장 시스템 관련 - 신호운영 및 관리, 유지보수 체계 관련 [운영방법 부문] ○ 네트워크 신호운영 방법 검토 - 국내 사례 정보 수집 [조사방법 부문] ○ 교차로 검지기 자료 수집 및 정리 - 무선 지자기 검지체계 자료 수집 - 영상 및 레이더 검지체계 자료 수집 ○ 빅데이터 관련 연구 조사 [시스템 통합 설계 부문] ○ 자료수집 - 표준노드링크 자료수집 - TOPIS 노드링크 자료수집 ○ 교통운영관리시스템 통합방안 설계 - 현행시스템 분석을 위한 사전 계획수립 [중앙정부 연계 부문] ○ 스마트시그널 추진 현황 자료 수집	[시범사업 부문] ○ 서울시 신호운영관련 현황조사 항목도출 계속 - 센터/현장 시스템 관련 계속 - 신호운영 및 관리, 유지보수 체계 관련 계속 [운영방법 부문] ○ 네트워크 신호운영 방법 검토 - 국외 사례 정보 수집 계속 [조사방법 부문] ○ 교차로 검지기 자료 수집 및 정리 계속 - 무선 지자기 검지체계 자료 수집 계속 - 영상 및 레이더 검지체계 자료 수집 계속 ○ 딥러닝 또는 머신러닝 적용 연구 조사 [시스템 통합 설계 부문] ○ 자료수집 - 표준노드링크 자료수집 정리계속 - TOPIS 노드링크 자료수집 정리계속 ○ 교통운영관리시스템 통합방안 설계 - 현행시스템 분석을 위한 사전 계획수립 자료수집 (교통신호 운영센터시스템) 자료수집 (UTIS,TGIS) [중앙정부 연계 부문] ○ 스마트시그널 추진 현황 자료 수집 계속
특이사항
요청사항	○ 현행시스템 분석을 위한 자료 협조 요청 [교통신호 운영센터시스템, UTIS, TGIS, TOPIS] - 각 시스템 설계서 ( 기능목록 / DB설계서 / 화면정의서 / 프로그램설계서 / 매뉴얼 )