도로굴착복구 및 노후포장도로정비공사 건설사업관리용역(1권역-장기계속1차)

주간업무보고(2022.06.06.~06.12)

Ⅰ. 건설사업관리기술자 투입실적

구 분	분야별	지난주까지	금주투입	누계투입	비 고
고급	(책임기술자)	9.0인.일	4.0인,일	13.0인.일	정기철
품질관리자	초급	9.0인.일	4.0인,일	13.0인.일	이송주
분야별	중급	9.0인.일	4.0인,일	13.0인.일	오영주
안전관리자	초급	9.0인.일	4.0인,일	13.0인.일	정재풍
분야별	초급	9.0인.일	4.0인,일	13.0인.일	이상돈
분야별	초급	9.0인.일	4.0인,일	13.0인.일	전찬욱
분야별	초급	인.일	인.일	인.일	이동욱
계		54.0인.일	24.0인.일	78.0인.일

Ⅱ. 건설사업관리 추진 실적

구 분				지난주 까지			금주 실적			누계 실적
				건수	연장(m)	면적(a)	건수	연장(m)	면적(a)	건수	연장(m)	면적(a)
굴착 복구	소계			10	2199,7	26.38	5	115.2	1.77	15	2,314.9	28.17
	관리청	굴착복구		4	1,054.7	12.66	2	45.2	0.93	6	1,099.9	13.59
		차로복구		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	원인자	굴착복구		6	1,145.0	13.72	3	70.0	0.84	9	1,215.0	14.58
		차로복구		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	물고임			-	-	-	-	-	-	-	-	-
포장 정비	소계			292		132				292		132
	긴급 복구		소 파	292		132	-	-	-	292		132
			절삭 및 덧씌우기	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			공동보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	노후포장1구역			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	노후포장2구역			-	-	-	-	-	-	-	-	-
아스콘 공장점검				3	-	-	-	-	-	3	-	-
도로순찰				4	-	-	5	-	-	9	-	-

Ⅲ. 금주 공사현황

- 굴착복구 공사현황 및 포장정비 공사현황(붙임 참조)

Ⅳ. 주요업무 추진실적

- 시험, 검측, 순찰 및 기타 주요업무 추진 내용(붙임 참조)

2022. 06. 13.

책임기술인 정 기 철  (인)

동부도로사업소장 귀하

Ⅲ. 금주 공사현황

1. 굴착복구공사(관리청복구)

가. 공사현황

허가번호	굴착기관	허가현황			굴착현황			복구현황
		폭	연장(m)	면적(㎡)	폭	연장(m)	면적(㎡)	폭	연장(m)	면적(㎡)
강남21-전기-105	한전 남서울본부	1.2	991.0	1,189.2	1.2	30.0	36.0
송파22-상수-151	강동수도사업소	1.8	1,150.0	2,070.0	1.8	45.2	93.14
계			2,141.0	3,259.2		75.2	129.14

나. 특이사항 : .

2. 굴착복구공사(원인자복구)

가. 공사현황 :

허가번호	굴착기관	허가현황			굴착현황			복구현황
		폭	연장(m)	면적(m2)	폭	연장(m)	면적(m2)	폭	연장(m)	면적(m2)
강동구-2021-통신-00069	SK브로드밴드	1.2	2,840	3,408	1.2	70.0	84.0
송파구-2022-상수-00224	서울시 상수도 사업본부	11	7.3	80.3	11	7.3	80.3
송파구-2022-상수-00170	서울시 상수도 사업본부	4.3	11	47.3	4.3	11	47.3
계				3,535.6			211.6

나. 특이사항 :

3. 포장정비공사(노후포장도로정비공사)

가. 공사현황 :

도로명	위치(구간)	두께(cm)	폭(m)	연장(m)	면적(a)	비고
	1구역	-	-	-	-	(주)고황
	2구역	-	-	-	-	(주)세웅인포션
계				0	0

나. 특이사항 :

4. 포장정비공사(물고임정비공사)

가. 공사현황

도로명	위치(구간)	두께(cm)	폭(m)	연장(m)	면적(a)	비고
-	-	-	-	-	-	다이치종합건설(주)
-	-	-	-	-	-
계				0	0

나. 특이사항 :

5. 포장정비공사(불량맨홀정비공사)

가. 공사현황

도로명	위치(구간)	두께(cm)	폭(m)	연장(m)	면적(a)	비고
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
계				0	0

나. 특이사항 :

6. 포장정비공사(긴급복구공사)

가. 금주 공사현황

노 선 명	위치(구간)	폭(m)	연장(m)	면적([eqn: m ^{2}])	비고
헌릉로	세곡동 468-28, 헌릉IC접속부	-	-	-	장백이앤씨(주)
헌릉로	세곡동 272-4, 자곡로 분기점	-	-	-
구천면로	구천면로 427, 명일역 교차로	-	-	-
양재대로	가락동 913, 헬리오시티	-	-	-
압구정로	압구정로 425, 현대고등학교정문	-	-	-
올림픽로	올림픽로 130	-	-	-
계			0	0

나. 특이사항 :

7. 포장정비공사(PC콘크리트 포장공사)

가. 금주 공사현황

도로명	위치(구간)	두께(cm)	폭(m)	연장(m)	면적(a)	비고
-	-	-	-	-	-	다이치종합건설(주)
-	-	-	-	-	-
계

나. 특이사항 :

Ⅳ. 주요업무 추진실적

1. 시  험

○ 혼합물 선정시험 결과

업체명	자재(아스콘혼합물, 골재)							비고
	공장점검		대상(시료명)	공사종류	의뢰일자	통보일자	결과
	일자	결과
㈜산하인더스리	5/27	양호	WC-5(가열)PG64-22	긴급	5/30 접수일:6/7	6/15~6/17 예정	-
				굴착
				노후1
				노후2
			WC-5(가열)PG76-22	노후1
				노후2
			SMA(가열)PG76-22	노후1
				노후2
			WC-2(가열)PG64-22	긴급
				굴착
			BB-2(가열)PG64-22	긴급
				굴착
			BB-2(순환)PG64-22	노후1
㈜공영사	5/27	양호	WC-5(가열)PG64-22	굴착	5/30 접수일:5/31	6/10	합격
				노후1
				노후2
			WC-2(가열)PG64-22	굴착
			BB-2(가열)PG64-22	굴착
㈜방태산업	5/27	양호	WC-5(가열)PG64-22	긴급	5/30 접수일:6/2	6/13 예정	-
			WC-5(가열)PG76-22	노후1
				노후2
			WC-5(중온)PG64-22	노후1
				노후2
			WC-2(가열)PG64-22	긴급
			BB-2(가열)PG64-22	긴급

○ 특이사항 : -

○ 시공 관리시험 결과(해당없음)

- 총 시료

구분	허용범위(기준)	결과
두께	-5∼+10%	-
다짐도	96∼100%	-

□ 지적사항 조치 전후 사진(해당없음)

허가번호					굴착복구
노 선 명					위치
작업규모	구분	폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	공사기간
	관리청				관로규모

□ 아스콘공장 점검 : - 건

□ 도로순찰 : 5건

- 구천면로(천호초교 ~ 천호시장) : 통신 지중화 공사구간 현장점검 (3건) - 이상없음

- 올림픽로(잠실동 10-19) : 송배수관 공사구간 현장점검 (2건) - 이상없음