도로굴착복구 및 노후포장도로정비공사 건설사업관리용역(1권역-장기계속1차)

주간업무보고(2022.06.20.~06.26)

Ⅰ. 건설사업관리기술자 투입실적

구 분	등 급	지난주까지	금주투입	누계투입	비 고
책임기술인	고 급	18.0인.일	5.0인,일	23.0인.일	정기철
품질관리자	초 급	18.0인.일	5.0인,일	23.0인.일	이송주
분야별	중 급	18.0인.일	5.0인,일	23.0인.일	오영주
안전관리자	초 급	18.0인.일	5.0인,일	23.0인.일	정재풍
분야별	초 급	18.0인.일	5.0인,일	23.0인.일	이상돈
분야별	초 급	18.0인.일	5.0인,일	23.0인.일	전찬욱
분야별	초 급	3.0인.일	5.0인,일	8.0인.일	김웅규
계		111.0인.일	35.0인.일	146.0인.일

Ⅱ. 건설사업관리 추진 실적

구 분				지난주 까지			금주 실적			누계 실적
				건수	연장(m)	면적(a)	건수	연장(m)	면적(a)	건수	연장(m)	면적(a)
굴착 복구	소계			22	2,450.9	30.08	15	3,075.7	125.41	37	5,526.6	155.49
	관리청	굴착복구		9	1,165.9	14.58	5	340.7	4.46	14	1,506.6	19.04
		차로복구		-	-	-	7	758.0	47.15	7	758.0	47.15
	원인자	굴착복구		13	1,285.0	15.50	1	13.0	0.20	14	1,298.0	15.70
		차로복구		-	-	-	2	1,964	73.60	2	1,964	73.60
포장 정비	소계			297	1,381,4	142.08	7	1,061.0	37.81	304	2,442.4	179.89
	긴급 복구		소 파	289	-	129.54	-	-	-	289	-	129.54
			절삭 및 덧씌우기	8	1,381,4	12.54	2	247.7	33.56	10	1,629.1	46.10
			공동보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	노후포장1구역			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	노후포장2구역			-	-	-	1	363.0	2.54	1	363.0	2.54
	물고임			-	-	-	4	450.3	1.71	4	450.3	1.71
	불량맨홀			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PC콘크리트			-	-	-	-	-	-	-	-	-
아스콘 공장점검				3	-	-	-	-	-	3	-	-
도로순찰				24	-	-	24	-	-	48	-	-

Ⅲ. 금주 공사현황

- 굴착복구 공사현황 및 포장정비 공사현황(붙임 참조)

Ⅳ. 주요업무 추진실적

- 시험, 검측, 순찰 및 기타 주요업무 추진 내용(붙임 참조)

2022. 06. 27.

책임기술인 정 기 철  (인)

동부도로사업소장 귀하

Ⅲ. 금주 공사현황

1. 굴착복구공사(관리청복구) : 담당 오영주

가. 공사현황

허가번호	굴착기관	허가현황			굴착현황			복구현황
		폭	연장(m)	면적(㎡)	폭	연장(m)	면적(㎡)	폭	연장(m)	면적(㎡)
강남22-전기-86	한전 강남지사	1.2	50.0	60.0	1.4~ 1.8	14.1	21.7	1.4~ 1.8	14.1	21.7
송파22-하수-42	송파구청	2.0	84.0	168.0	2.0	20.0	40.0	2.0	20.0	40.0
강남22-통신-64	SK텔레콤	1.2	678.0	813.6	1.25	134	167.5	1.25	134	167.5
강남22-통신-64	SK텔레콤	1.2	678.0	813.6	1.2	160	192	1.2	160	192
송파22-하수-42	송파구청	2.0	84.0	168.0	2	12.6	25.2	2	12.6	25.2
계			1,574.0	2,023.2		340.7	446.4		340.7	446.4

나. 특이사항 :

1-1. 굴착복구 차로단위 복구공사(관리청복구) : 담당 오영주

가. 공사현황

허가번호	굴착기관	허가현황			금주현황			복구현황
		폭(m)	연장(m)	면적(a)	폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	폭(m)	연장(m)	면적(㎡)
송파22-난방-3	SM삼환기업	6.4	323.0	2,067.2	2.2 ~ 21.5	278	2,580	2.2 ~ 21.5	278	2,580
강동22-기타-9	도기본	3.2	137.0	438.4	3.8 ~ 3.9	96	370	3.8 ~ 3.9	96	370
송파22-가스-23	코원에너지	3.2	194.0	620.8	3.0 ~ 3.5	152	530	3.0 ~ 3.5	152	530
강남21-통신-149	KT서울남부마케팅 영동지사	3.2	79.0	252.8	3.6	210	795	3.6	210	795
강남21-통신-150		3.2	85.0	272.0
강남21-통신-151		3.2	80.0	256.0
송파22-난방-8	한국지역난방공사	2.3	29.3	67.4	20	22	440	20	22	440
계			927.3	3,974.6		758	4,715		758	4,715

나. 특이사항 :

2. 굴착복구공사(원인자복구) : 담당 오영주

가. 공사현황

허가번호	굴착기관	허가현황			굴착현황			복구현황
		폭	연장(m)	면적(m2)	폭	연장(m)	면적(m2)	폭	연장(m)	면적(m2)
개인-00156	서울시도시기반시설본부	1.5	13.0	19.5	1.5	13.0	19.5	1.5	13.0	19.5
계			13	19.5		13	19.5		13	19.5

나. 특이사항 :

2-1. 굴착복구 차로단위 복구공사(원인자복구) : 담당 오영주

가. 공사현황

허가번호	굴착기관	허가현황			금주현황			복구현황
		폭(m)	연장(m)	면적(a)	폭(m)	연장(m)	면적(a)	폭(m)	연장(m)	면적(a)
2021-전기-00105 2021-통신-00041	강동구청 도로과	3.2	982	31.4	3.2	982	31.4	3.2	982	31.4
2021-전기-00105 2021-통신-00041	강동구청 도로과	4.3	982	42.2	4.3	982	42.2	4.3	982	42.2
계			1,964	73.6		1,964	73.6		1,964	73.6

나. 특이사항 :

3. 포장정비공사(긴급복구공사, 3차) : 담당 전찬욱

가. 금주 공사현황 : 총 9노선 중 2노선 완료

노 선 명	위치(구간)	폭(m)	연장(m)	면적(a)	비고
구천면로	3-1.구천면로 427~명일역 교차로	6.6~12.8	161.7	19.40
백제고분로	3-4.백제고분로464(방이재래시장)	21.7~25.1	86	14.16
계 2개 노선			247.7	33.56

나. 특이사항 : 2022년 06월 21일 제1회 기성검사완료 (작업지시 1,2차)

작업지시(제3차) 변경 알림 (도로보수과-22823, 2022.06.23)

→ 작업일보와 차량계 건설기계 작업계획서 제출토록 시공사에 통보

4. 포장정비공사(노후포장 도로정비공사-1구역) : 담당 전찬욱

가. 공사현황

도로명	위치(구간)	두께(cm)	폭(m)	연장(m)	면적(a)	비고
	1구역	-	-	-	-	(주)고황
계

나. 특이사항 :

1) 2022년 06월 17일 5개구간(광평로, 논현로, 학동로, 도산대로, 언주로) 코아채취 완료.

2) 시공자로부터 코아채취 결과보고서 검토·보고 후 작업일정계획 수립 예정

5. 포장정비공사(노후포장 도로정비공사-2구역) : 담당 김웅규

가. 공사현황

도로명	위치(구간)	두께(cm)	폭(m)	연장(m)	면적(a)	비고
올림픽로	서울종합운동장교차로→ 종합운동장사거리	10	7.0	363.0	2.54	(주)세웅인포션
계				363	2.54

나. 특이사항 : 올림픽로는 3일 소요 예정

6. 포장정비공사(물고임정비공사) : 담당 김웅규

가. 공사현황

도로명	위치(구간)	두께(cm)	폭(m)	연장(m)	면적(a)	비고
고덕로	상일동역 8번출구 외1개소 고덕로 391 외 3개소		3~6	93.1	0.46	6개소
백제고분로	백제고분로 214 외 9개소		3.1~6.1	103.4	0.43	10개소
백제고분로	백제고분로 455 외 6개소		3.8	113.4	0.43	7개소
송파대로 양재대로	송파대로 466 외 8개소		3.8	140.4	0.39	9개소
계				450.3	1.71	32개소

나. 특이사항 : 총 85개소 중 32 개소 완료

7 포장정비공사(불량맨홀정비공사) : 담당 김웅규

가. 공사현황

도로명	위치(구간)	두께(cm)	폭(m)	연장(m)	면적(a)	비고
-	-	-	-	-	-
계

나. 특이사항 : 계약 진행 중, (계약 22.07. 예정)

8. 포장정비공사(PC콘크리트 포장공사) : 담당 이상돈

가. 금주 공사현황

도로명	위치(구간)	두께(cm)	폭(m)	연장(m)	면적(a)	비고
-	-	-	-	-	-
계

나. 특이사항 : 계약 진행 중, (계약 22.07. 예정)

Ⅳ. 주요업무 추진실적

1. 시  험

○ 혼합물 선정시험 결과

업체명	자재(아스콘혼합물, 골재)							비고
	공장점검		대상(시료명)	공사종류	의뢰일자	통보일자	결과
	일자	결과
㈜산하인더스리	5/27	양호	WC-5(가열)PG64-22	긴급	5/30 접수일:6/7	6/15~6/17	합격	업체승인통보완료
				굴착
				노후1
				노후2
			WC-5(가열)PG76-22	노후1			합격
				노후2
			SMA(가열)PG76-22	노후1			합격
				노후2
			WC-2(가열)PG64-22	긴급			불합격 재시험의뢰 (6/20)	시험중
				굴착
			BB-2(가열)PG64-22	긴급			합격	업체승인통보완료
				굴착
			BB-2(순환)PG64-22	노후1			합격
㈜공영사	5/27	양호	WC-5(가열)PG64-22	굴착	5/30 접수일:5/31	6/10	합격	업체승인통보완료
				노후1
				노후2
			WC-2(가열)PG64-22	굴착
			BB-2(가열)PG64-22	굴착
㈜방태산업	5/27	양호	WC-5(가열)PG64-22	긴급	5/30 접수일:6/2	6/13	합격	업체승인통보완료
			WC-5(가열)PG76-22	노후1
				노후2
			WC-5(중온)PG64-22	노후1
				노후2
			WC-2(가열)PG64-22	긴급
			BB-2(가열)PG64-22	긴급

○ 특이사항 : ㈜산하인더스트리 표층(가열WC-2) 재시험결과 7/1일예정

○ 시공 관리시험 결과 (해당 없음)

- 총 시료

구분	허용범위(기준)	결과
두께	-5∼+10%	-
다짐도	96∼100%	-

○ 특이사항 : 구천면로 노후보도 정비공사(1권역) - 강동구청발주 (원인자 )

위치 - 천호초교사거리~명일역 절삭 및 포설구간 시료채취 (WC-5, 6/20~6/21)

→ 서울시 품질시험소 시험의뢰 (6/22), 참여자 품질 이송주)

□ 아스콘공장 점검 : - 건 (해당없음)

□ 도로순찰 : 24건,  순찰자 : 오영주, 전찬욱, 김웅규, 정재풍 등

- 구천면로 노후보도정비공사(1권역) (천호초교사거리~명일역) 현장점검 (2건) - 이상없음

- 봉은사사거리 난방공사 증기기소손 관로케이블 교체공사 현장점검 (1건) - 이상없음

- 구천면로 통신 지중화 공사구간 (강동구 천호동 294-26 유진빌딩 앞) 현장점검 (1건) - 이상없음

- 논현로 지중화 관로공사 (도산대로 176~학동로 177) 현장점검 (2건) - 이상없음

- 위례성대로 하천유지용수공급개선공사 (방이동 452-6) 현장점검 (3건) - 이상없음

- 강남지사 열수송망 성능 보강공사 현장점검 (2건) - 이상없음

- 노후포장도로 정비공사(송파구 잠실동 50, 서울종합운동장사거리) 현장점검 (1건) - 이상없음

- 물고임 정비공사(상일로 143월편, 상일로 125, 오금로, 삼성로 343, 상일동역 외) 현장점검 (6건) - 이상없음

- 영동대로 영동대로 지하공간 복합개발공사 (삼성동 77-13) 현장점검 (1건) - 이상없음

- 논현로(1차) 지중화공사 (을지병원~학동역사거리) 현장점검 (3건) - 이상없음

- 긴급복구 공사구간 (논현로, 봉은사로, 역삼로, 영동대로) 현장점검 (2건) - 이상없음