도로굴착복구 및 노후포장도로정비공사 건설사업관리용역(1권역-장기계속3차)

주간업무보고(2021.09.23.~09.26)

Ⅰ. 건설사업관리기술자 투입실적

구 분	분야별	지난주까지	금주투입	누계투입	비 고
고급	(책임기술자)	141.0인.일	2.0인.일	143.0인.일	이상열
품질관리자	초급	143.0인.일	2.0인.일	145.0인.일	정승헌
성동도로사업소	중급	120.0인.일	2.0인.일	122.0인.일	신강범
	초급	123.0인.일	2.0인.일	125.0인.일	김용수
	초급	129.0인.일	4.0인.일	133.0인.일	윤기상
동부도로사업소	중급	117.0인.일	2.0인.일	119.0인.일	박노율
	초급	119.0인.일	2.0인.일	121.0인.일	성규섭
	초급	128.0인.일	3.0인.일	131.0인.일	박승학
계		1,020인.일	19.0인.일	1,039인.일

Ⅱ. 건설사업관리 추진 실적

구 분				지난주 까지			금주 실적			누계 실적
				건수	연장(m)	면적(a)	건수	연장(m)	면적(a)	건수	연장(m)	면적(a)
굴착 복구	소계			119	26,564.2	1,716.58	2	257.0	4.57	121	26,821.2	1,721.15
	관리청		굴착복구	66	908.31	125.03	-	-	-	66	908.31	125.03
			차로복구	38	13,051.1	904.25	-	-	-	38	13,051.1	904.25
	원인자		굴착복구	10	673.0	6.00	2	257.0	4.57	12	930.0	10.57
			차로복구	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	굴착복구 시행도로			5	4,918.0	681.30	-	-	-	5	4,918.0	681.30
포장 정비	소계			455	27,508.3	2,140.74	10	151.2	1.55	465	27,659.5	2,142.29
	긴급 복구	소 파		356	4,794.3	175.67	10	151.2	1.55	366	4,945.5	177.22
		절삭및덧씌우기		29	2,699.8	241.62	-	-	-	29	2,699.8	241.62
		공동보수		36	140.2	5.32	-	-	-	36	140.2	5.32
	노후포장1구역			18	11,295.0	894.00	-	-	-	18	11,295.0	894.00
	노후포장2구역			13	8,363.0	816.90	-	-	-	13	8,363.0	816.90
	버스정류장PC판넬설치			3	216.0	7.23	-	-	-	3	216.0	7.23
아스콘 공장점검				7	-	-
도로순찰				108	-	-	2			110

Ⅲ. 금주 공사현황

- 굴착복구 공사현황 및 포장정비 공사현황(붙임 참조)

Ⅳ. 주요업무 추진실적

- 시험, 검측, 순찰 및 기타 주요업무 추진 내용(붙임 참조)

2021. 09. 27.

책임기술인 박 건 옥  (인)

동부도로사업소장 귀하

Ⅲ. 금주 공사현황

1. 굴착복구공사(관리청복구)

가. 공사현황

허가번호	굴착기관	허가현황			굴착현황			복구현황
		폭	연장(m)	면적(㎡)	폭	연장(m)	면적(㎡)	폭	연장(m)	면적(㎡)
계			0.0			0.0	0.0		0.0	0.0

나. 특이사항 :

2. 굴착복구공사(원인자복구)

가. 공사현황 :

허가번호	굴착기관	허가현황			굴착현황			복구현황
		폭	연장(m)	면적(m2)	폭	연장(m)	면적(m2)	폭	연장(m)	면적(m2)
강동21-난방-008	나래에너지	1.7	1,197.0	2034.9	1.7	329.0	559.3	1.7	227.0	385.9
강남21-난방-19.20	지역난방공사	3.0	32.0	96.0	3.0	24.0	72.0	3.0	24.0	72.0
계						353	631.3		251.0	457.9

나. 특이사항 :

3. 지하철공사구간(관리청 관리구간)

가. 공사현황 :

노선명	위치	공사내용	시공회사	진행사항	점검결과	비고

나. 특이사항 :

4. 굴착복구 차로단위 복구공사(관리청복구)

가. 공사현황

허가번호	굴착기관	허가현황			굴착현황			복구현황
		폭(m)	연장(m)	면적(a)	폭(m)	연장(m)	면적(a)	폭(m)	연장(m)	면적(a)
계

나. 특이사항 :

4-1. 굴착복구 차로단위 복구공사(원인자복구)

가. 공사현황

허가번호	굴착기관	허가현황			굴착현황			복구현황
		폭(m)	연장(m)	면적(a)	폭(m)	연장(m)	면적(a)	폭(m)	연장(m)	면적(a)
계

나. 특이사항 :

5. 포장정비공사(노후포장도로정비공사)

가. 공사현황

도로명	위치(구간)	두께(cm)	폭(m)	연장(m)	면적(a)	비고
계

나. 특이사항 :

6. 포장정비공사(긴급복구공사)

가. 금주 공사현황

노 선 명	위치(구간)	폭(m)	연장(m)	면적([eqn: m ^{2}])	비고
천호대로	천호대로 1117	3.6	16.0	58.0	소파보수
양재대로	양재대로 1465 외 1개소	3.1~3.7	27.6	93.0
올림픽로	올림픽로 145 외 6개소	3.0~4.9	107.6	3.96
계			151.2	154.96

나. 특이사항 :

7. 포장정비공사(시행도로정비공사2차)

가. 금주 공사현황

도로명	위치(구간)	두께(cm)	폭(m)	연장(m)	면적(a)	비고
계

나. 특이사항 :

8. 버스정류장 PC판넬설치공사

가. 금주 공사현황

도로명	위치(구간)	두께(cm)	폭(m)	연장(m)	면적(a)	비고
계

Ⅳ. 주요업무 추진실적

1. 시  험

○ 혼합물 선정시험 결과

업체명	자재(아스콘혼합물, 골재)							비고
	공장점검		대상(시료명)	공사종류	의뢰일자	통보일자	결과
	일자	결과
㈜공영사	3/30	양호	WC-5(가열)PG76-22	시행도로	4/1	4/13	합격	총액
			WC-5(가열)	긴급	3/25	4/5	합격	서인
				굴착
				노후1
				노후2
			WC-3(가열)	굴착(소량)
			WC-2(가열)	긴급
				굴착
			BB-2(가열)	긴급		4/2	합격
				굴착
㈜산하 인더스트리	3/31	양호	WC-5(가열)	긴급	4/2	4/16	합격	서인
				굴착
				노후1
				노후2
			WC-5(가열)PG76-22	노후1		4/19	합격	총액
				노후2
				긴급
			SMA(가열)PG76-22	노후1		4/19	합격
				노후2
			WC-4(가열)	굴착(소량)				서인
			WC-3(가열)	굴착(소량)
			WC-2(가열)	긴급		4/8	합격	서인
			BB-2(가열)	긴급
				굴착
			BB-2(순환)	노후2		4/14	합격
				노후1
㈜삼일	4/1	양호	WC-5(가열)	긴급	4/2	4/27	합격	서인
				굴착
				노후1
				노후2
			WC-5(가열)PG76-22	노후1		4/15	합격	총액
				노후2
				긴급
			WC-5(중온)PG64-22	노후2		4/14	합격
			SMA(가열)PG76-22	노후1		4/12	합격
				노후2
			WC-2(가열)	긴급		4/14	합격	서인
				굴착
			WC-3(가열)	굴착(소량)
			BB-2(가열)	긴급		4/9	합격
				굴착
			BB-2(순환)	노후2
				노후1

업체명	자재(아스콘혼합물, 골재)							비고
	공장점검		대상(시료명)	공사종류	의뢰일자	통보일자	결과
	일자	결과
삼덕 아스콘(주)	3/30	양호	WC-5(가열)PG76-22	시행도로	4/2	4/13	합격	총액
			WC-5(가열)	노후2	4/2	4/13	합격	경서
				긴급
				노후1
				굴착
			BB-2(가열,순환)	노후2	4/2	4/9	합격
				굴착
			WC-4(가열)	굴착
			WC-3(가열)	굴착
			WC-2(가열)	긴급	4/6	4/20	합격
				굴착
				굴착(상차도)
			BB-2(가열)	긴급	4/2	4/9	합격
				굴착(상차도)
				굴착(하차도)
방태산업 (주)	3/30	양호	BB-2(순환)	노후2	3/25	4/2	합격	서인
				노후1

○ 특이사항 : -

○ 시공 관리시험 결과

- 총 시료

구분	허용범위(기준)
두께	-5∼+10%
다짐도	96∼100%

□ 지적사항 조치 전후 사진

허가번호					굴착복구
노 선 명					위치
작업규모	구분	폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	공사기간
	관리청				관로규모

□ 아스콘공장 점검 : -건

□ 도로순찰 : 2건

- 올림픽로(상수도 진행현장) : 이상사항 없음

- 천호대로(난방공사 진행현장) : 이상사항 없음