	주간 업무 현황 보고서
	단계	실행 및 통제	프로세스명	보고관리	문서번호
	버전	v 1.0	사업명	RFID기반 유물출납관리시스템 구축확대	작성부서

▪ 사 업 명	: RFID기반 유물출납관리시스템 구축확대 사업
▪ 사 업 부 서	: 시설과(유물관리과)
▪ 추 진 기 간	: 2014.11.20. ~ 2015.02.27.
▪ 진 행 단 계	: 2015.02.16. ~ 2015.02.17. (13주차/14주)

번호	작업구분명	사업기간	단계	진척율		비고
				실적	계획
1	사업관리	2014.11.20. ~ 2015.02.27	착수	100%	100%
2	현장조사	2014.11.20. ~ 2014.12.05	분석	100%	100%
3	요구사항분석	2014.11.20. ~ 2014.12.31	분석	100%	100%
4	공사설계/주문제작	2014.12.01. ~ 2015.01.02	설계	100%	100%
5	기능설계	2014.12.01. ~ 2015.01.02	설계	100%	100%
6	인프라 구축	2015.01.05. ~ 2015.01.30	구축	100%	100%
7	S/W개발	2014.12.15. ~ 2015.02.06	구축	100%	100%
8	시험	2015.02.02. ~ 2015.02.20	시험	100%	100%
9	운영 및 안정화	2015.02.16. ~ 2015.02.27	안정화	100%	100%
10	검수	2015.02.23. ~ 2015.02.27	종료	100%	100%

주간 업무 현황 보고서

주간(월간)업무현황보고서

서울특별시                                                               PP515-/1                                                              포스트미디어 컨소시엄

진행단계	착수 / 분석						전체 진척율	100%
단위과제	지난 주 실적(2015.02.16. ~ 2015.02.17.)						금주계획(2015.02.23. ~ 2015.02.27.)
	계 획		진척율	실 적		진척율	내 용		진척율
사업관리	주간보고, 사업관리, 품질관리		100%	주간보고, 사업관리, 품질관리		100%	주간보고, 사업관리, 품질관리 완료보고 (2/25)		100%
인프라 구축			100%			100%	안정화 지원		100%
S/W개발	프로그램 개발 완료 판넬PC 프로그램 개발 유물 반출입 알림 개발 슬라이딩 도어 API 연동 관제 솔루션 설치 완료 운영 환경 테스트 완료		100%	프로그램 개발 완료 판넬PC 프로그램 개발 유물 반출입 알림 개발 슬라이딩 도어 API 연동 관제 솔루션 설치 완료 운영 환경 테스트 완료		100%	안정화 지원		100%
기타							유물 이미지 관리용 스토리지 납품(2.24) - 32TB 2대 전산 물품 납품(2.24) - Mac 용 한컴오피스, 마우스, 키보드, 모니터후드 - 서버, 스토리지 연결용 부품		100%
미결업무 및 대책	내 용				대책 및 조치사항
협의사항
산출물 / 별첨사항	일련번호	내 용

프로젝트 인력 투입 현황

연번	성 명	사 업 참여율	투 입 일		지난 주 추진실적	금주 추진 계획
			금주	누적
1	정희근	65%	2	40	사업관리, 산출물 작성	사업관리, 산출물 작성, 완료보고(리뷰)
2	심기석	40%	2	27	사업관리 및 품질관리	사업관리 및 품질관리
3	임상민	30%	2	21	기술지원 및 안정화 지원	기술지원 및 안정화 지원
4	지강혁	50%	2	48	판넬PC 프로그램, 슬라이딩 도어, 알람 개발 및 테스트	프로그램 안정화 작업
5	서태양	65%	2	48	판넬PC 프로그램, 슬라이딩 도어, 알람 개발 및 테스트	프로그램 안정화 작업
6	추교승	50%	0	21
7	이다운	80%	1	34	구축 인프라 테스트	완료보고(리뷰)
8	곽승준	50%	0	16
9	서영민	80%	0	16
10	김정훈	80%	0	31