주간 진척보고서				시스템명		2013년 항공사진 통합관리 서비스
문서번호	R140103	작성자	박철희	작성일	2014/01/03	버 전	1.2

프로젝트명	2013년 항공사진 통합관리 서비스 PJT
프로젝트책임자	박철희	진척율	사업관리	개발	DB 구축	전체
		계획	8.5/10	41.0/50	40.0/40	89.5/100
		실적	8.5/10	35.8/50	27.8/40	72.1/100

업무구분	금 주 실 적 (2013.12.27 ~ 2014.01.02)	차 주 계 획 (2014.01.03 ~ 2014.01.09)
시스템개발	. 사용자 로그인 1-1. 로그인 및 사용자 관리화면 테스트 2. 원본파일 등록 2-1. 원본파일 등록 및 정보 수정 테스트	1. 테스트 1-1. 단위기능 테스트 1-2. 통합 테스트
항공 사진 DB 구축 및 영상 지도 제작	1. 서울시 데이터 센터 자료 이관 (2013년 12월 27일 완료 예정) - 망실 및 일부 손상 데이터 입수 및 변환처리 - 누락자료 DB구축 - 주점정보 DB 구축 2. 2013년도 항공영상 보안처리(국정원 보안) - 국정원 보안 심의 자료 입수 - 보안 규정에 의한 보안처리 - 낱장사진 보안지역 사진번호 추출 3. 과거사진 보안지역 조치작업 수행 (2014년 1월 6일 완료 예정) - 전체 : 148,996 - 금주 : 11,300 - 누계 : 123,611 (82.9%)	1. 서울시 데이터 센터 자료 이관 (2013년 12월 27일 완료 예정) - 망실 및 일부 손상 데이터 입수 및 변환처리 - 누락자료 DB구축 - 주점정보 DB구축 - 원본자료 파일명 변경 DB구축 2. 과거사진 보안조치 수행 3. 2013년도 항공영상 보안처리(국정원 보안) - 국정원 보안 심의 자료 입수 - 보안 규정에 의한 보안처리
기타		1. “EA관리, 정보화사업관리스템, 데이터관리시스템, 보안, 하도급절차” 등 교육 이수방안 문의 2. 원본파일 망실 및 손상 자료 입수
이슈사항