주간 진척보고서				시스템명		2013년 항공사진 통합관리 서비스
문서번호	R140103	작성자	박철희	작성일	2014/01/09	버 전	1.2

프로젝트명	2013년 항공사진 통합관리 서비스 PJT
프로젝트책임자	박철희	진척율	사업관리	개발	DB 구축	전체
		계획	8.85/10	43.0/50	40.0/40	91.8/100
		실적	8.85/10	36.2/50	33.0/40	78.15/100

업무구분	금 주 실 적 (2014.01.03 ~ 2014.01.09)	차 주 계 획 (2014.01.10 ~ 2014.01.17)
사업관리	1. 완료보고 1-1. 완료보고 자료 작성 2. 항공영상 원본자료 반납 일시 : 2014년 01월 03일 오전 10:30 ~ 13:30 장소 : 서울시 데이터 센터 -> 건축기획과 사진실	1. 완료보고 1-1. 완료보고서 작성 및 수행 2. 준공검사 2-1. 준공계 및 준공검사 자료 작성
시스템개발	1. 원본파일 등록 1-1. 등록 화면 수정(엑셀 자료 업로드) 1-2. 원본 파일 업로드 테스트 2. 통계정보 2-1. 내부(항공사진 웹 서비스) 시스템 통계 및 현황 추가 3. 단위 테스트 3-1. 단위 테스트 및 시스템 안정화 4. 로그인 연계 4-1. SSO 로그인 연계 분석	1. 테스트 1-1. 단위기능 테스트 1-2. 통합 테스트 2. 시스템 안정화 2-1. 버그 수정 및 시스템 안정화 3. 서울시 항공영상 시민 서비스용 시연을 위한 System 설정
항공 사진 DB 구축 및 영상 지도 제작	1. 서울시 데이터 센터 자료 이관 (2013년 12월 27일 완료 예정) - 망실 및 일부 손상 데이터 입수 및 변환처리 - 누락자료 DB구축 - 주점정보 DB구축 - 원본자료 파일명 변경 DB구축 2. 2013년도 항공영상 보안처리(국정원 보안) - 보안 규정에 의한 보안처리 - 낱장사진 보안지역 사진번호 추출 3. 과거사진 보안지역 조치작업 수행 (2014년 1월 6일 완료) - 전체 : 148,996 - 금주 : 25,385 - 누계 : 148,996 (100.%)	1. 2013년도 항공영상 보안처리(국정원 보안) - 보안 규정에 의한 보안처리 - 10cm, 25cm 급 항공영상 변환 처리 2. 2013년도 항공영상 보안처리(국정원 보안) - 국정원 보안 심의 자료 입수 - 보안 규정에 의한 보안처리 3. 2013년 항공영상 타일맵 생성 - 서울시 항공영상 시민 서비스용 25cm급 타일맵 4. 영상재단 및 저장 - 1/5,000 도곽영상 제작 - 구별 영상 제작
기타		1. 25cm급 서비스 파일 로딩을 위한 H/D 공간 확보 (JP2 약 : 1.3 TB, ECW 약 : 310 GB) 2. 완료보고 System 시연을 위한 인터넷연결
이슈사항