	예산서 P.
평창8교 교량폭 확장 공사(신규, 주민참여예산)

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간	□ 연례반복, ☑ 2017.01. ~ 2017.10.
사업위치	서울특별시 종로구 평창문화로 72-26(평창동)
총사업비	총 100,000천원	[시비] 100,000천원	[구비]	(보조율) 0%
사업내용	평창8교 교량폭 확장공사
사업형태	☑직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □출연출자 □민간위탁 □기타
사업시행주체	서울특별시(종로구, 주민참여예산)

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	민간보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산
☑	□	□	□	□	□	□	□	□
경상	투자
□	☑

□ 민간보조사업 형태 및 법령근거
지원형태	법령근거	보조금심의회 의견
사업보조
운영비보조

□ 재정사업 평가 결과
매우 우수	우수	보통	미흡	매우미흡	해당없음
□	□	□	□	□	☑

□ 사업 담당자
실․국	부서명	과 장	팀장	주무관
안전총괄본부	도로계획과	하종현	한정무	강연구
		2133-8060	8081	8084

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2015년 본예산	2016본예산 (A)		2017예산(안) (B)	증감 (B-A)
								(B-A)*100/A
계			-	-		100,000	-	-
시설비			-	-		100,000	-	-

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거 (신규사업)

과목구분	2017년 예산(안)
시설비	‧ 교량확장 : B=1.0m × 12.0m × 300천원=36,000,000원 ‧ 교면포장 : 12㎡ × 5,000천원=6,000,000원 ‧ 도로경계석설치 : 12m × 83천원=1,000,000원 ‧ 차량방홍울타리 : 12m × 500천원=6,000,000원 ‧ 아스콘 포장 : 12a × 3,000천원=36,000,000원 ‧ 기타이설비 등 1식 : × 5,000천원=50,000,000원 ‧ 설계비 : 10,000,000원	=	100,000천원

□ 연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계	100	-	-	100	-
설계비	10	-	-	10	-
보상비	0	-	-	0	-
공사비	90	-	-	90	-

3		사 업 설 명

□ 사업목적

○ 평창문화로 72-26 앞 평창8교는 교량 폭이 협소하여 보행 및 차량의 양방향 통행에 어려움이 있어 교량 확장을 통하여 도로환경을 개선하고 도로 이용자의 통행불편을 해소코자함

□ 사업근거

○  법령상 근거 :  국토의 계획 및 이용에 관한 법률

□ 사업내용

○  위    치 : 종로구 평창문화로 72-26(평창동)

○  규    모 : 교량폭 확장(B=1.0m, L=12m), 교면 및 도로 재포장(A=12a)

○  사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 10.

○  사업내용 : 교량 구조개선(폭원 확장), 교통안전시설 설치, 도로재포장 등

○  총사업비 : 100백만원(설계비 10,  공사비 90)

□ 2017년도 사업계획(투자사업의 경우)

○  위    치 : 종로구 평창문화로 72-26(평창동)

○  규    모 : 교량폭 확장(B=1.0m, L=12m), 교면 및 도로 재포장(A=12a)

○  사업내용 : 교량 구조개선(폭원 확장), 교통안전시설 설치, 도로재포장 등

○  총사업비 : 100백만원(설계비 10,  공사비 90)

□ 추진경위

○ ‘16. 08. : 서울시 주민참여예산사업 신청

□ 중점추진사항(사업추진의 필요성)

○ 평창8교는 교량폭이 협소하여(3m) 차량 통행이 매우 불편한 교량으로 교량폭 확장 민원이 지속적으로 제기되는 실정으로, 교량폭 확장 및 도로환경 개선으로 시민들의 도로이용 불편해소가 필요함

□ 사업추진절차

○  집행절차

- 예산편성 ⇒ 실시설계  ⇒ 공사계약 ⇒ 공사시행 ⇒ 공사준공

○  계약체결

- 계약심사 ⇒ 입찰공고 ⇒ 적격심사  ⇒  업체선정  ⇒ 계약체결

□  2017년도 추진일정

(단위: 백만원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		100
실시설계용역	2017.01~2017.04	10	실시설계 용역 시행
공사시행	2017.05~2017.10	90	교폭 확장, 도로재포장 등

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

○  해당없음

□   향후 기대효과

○ 교량 폭 확장 및 도로환경 개선으로 시민들의 안전하고 편리한 도로환경 제공

▢ 위치도 및 현장사진