주민참여 예산사업 세부실행계획

사 업 명	교통사고 다발지역 LED유도등 설치
사 업 책임자	소 속	강남구청 도로관리과	직 위	시설7급
	성 명	김성대
사업기간	2016. 3. 14 . ～ 2016. 4 . 30.		총사업비	104,400천원

1. 사업 필요성 및 목표

◦ 간선도로 중앙에 설치되어 있는 교통섬은 위치상 야간운전자의 식별에 어려움이 있어

잦은 접촉사고로 인한 인명피해 및 시설물 훼손이 빈번하게 발생하여 도시미관 저해되어

◦ 태양광 LED유도등을 설치하여 안전사고 방지 및 도로환경 개선

2. 사업개요

◦ 사업내용 : 간선도로 교통섬내 안전유도등 설치

◦ 사업위치 : 영동대로, 테헤란로

◦ 사업규모 : 교통섬 19개 지점 36개소

- 솔라표지병 100개, LED바(방호울타리) 150개

3. 세부사업계획

◦ 세부 시행계획 수립 : 2016. 2. 24

◦ 관급자재 구매 및 설치 : 2016. 3 ~ 4. 30

4. 기대효과

◦ 야간 시인성 증대로 교통사고 방지

5. 추진일정

사 업 내 용	추진일정(월별)														비고
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
◦ 관급자재 구매
◦ 공사시행
◦ 공사준공

6. 소요예산 – 104,400,000원

비 목	내 용	금 액	구성비	비 고
쏠라표지병설치 LED바 설치 기타부대공	솔라표지병 100개 × 80,000원 LED바 150개 × 630,000원 안전시설설치	8,000,000원 94,500,000원 1,900,000원	8% 90% 2%

작 성 자	도로관리과장 : 최창운☎3423-6550, 도로관리팀장 : 김종철☎3423-6561 담당 : 김성대 ☎ 3423-6562