주민참여 예산사업 세부실행계획

(양식)

사 업 명	비규격 볼라드 및 훼손된 볼라드 정비공사(주민참여)
사 업 책임자	소 속	강남구청 도로관리과	직 위
	성 명	김대영
사업기간	2018. 2. ～ 2018. 8.		총사업비	200,000천원

1. 사업 필요성 및 목표

◦ 現 설치된 볼라드 중 규격에 맞지 않아 도시미관을 저해하고 훼손 등으로 주민통행불편 및 안전사고의 위험이 있는 볼라드를 정비하여 쾌적하고 걷기편한 보행환경 조성

2. 사업개요

◦ 위    치 : 강남구 관내 간선보도(21개 노선)

◦ 사업내용 : 비규격(석재, 디자인 등) 볼라드 정비 620개, 훼손 볼라드 정비 48개

◦ 사업기간 : 2018. 2월 ~ 8월

◦ 총사업비 : 200,000천원

3. 세부사업계획

◦ 강남구 볼라드 현황

(‘17년말 기준, 단위:개)

합계	비규격 볼라드				규격 볼라드 (탄성)	비고
	소계	석재	디자인	기타
4,807	1,117	851	162	104	3,690	비규격율 23%

◦ 연도별 볼라드 설치현황 및 정비계획

(단위:개)

구분		합계	비규격	규격	비규격 비율	비고
설치 현황	‘15년	4,319	1,968	2,351	46%
	‘16년	4,627	1,483	3,144	32%
	‘17년	4,807	1,117	3,690	23%
정비 계획	‘18년	4,807	177	4,630	4%	940개 정비
	‘19년	4,807	0	4,807	0%	117개 정비

◦ 정비방안 검토

- ‘18년 비규격 볼라드 정비계획 : 940개(市 주민참여예산 : 620개, 區 자체예산 : 320개)

- ‘19년까지 區 자체예산을 활용하여 비규격 볼라드 전면교체(Zero화) 예정

- 보행량이 많은 주간선보도를 위주로 구간별,유형별로 우선순위를 선정하여 체계적인 정비

※ 유형별 우선순위 : 석재❮디자인❮기타

- 現 볼라드 설치기준에 맞게 복원력이 우수하고 市 디자인 가이드라인에 맞는 탄성볼라드 설치

※ 규격볼라드 제원 : 직경 10~20cm, 높이 80~100cm, 간격 1.5m, 탄성

- 향후 볼라드 실태점검(분기별, 수시 등) 및 이력 관리대장 작성 등을 통해 지속적·체계적인 유지관리

4. 기대효과

◦ 구민이 안전하고 걷기편한 보행환경 조성

5. 추진일정

사 업 내 용	추진일정(월별)												비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
◦사업계획수립 및 보조금신청 등
◦비규격 볼라드 현황 및 실태조사
◦비규격 볼라드 및 훼손볼라드 정비

6. 소요예산

비 목	내 용	금 액(천원)	구성비	비 고
◦ 자치단체 경상보조금	계	200,000	100.0%	(224) 절사
	비규격 볼라드 정비 303,000원*620개	187,860	94.8%
	훼손 볼라드 정비 303,000원* 48개	12,384	6.2%

작 성 자	도로관리과장 : 김근태 ☎3423-6650, 보도관리팀장 : 김영찬 ☎ 6671, 담당 : 김대영 ☎ 6672