당산119안전센터 체력단련실 및 방수공사

Ⅰ.  당초 사업개요

○  사업기간 : 2014. 03. ~ 09.30.

○  규    모 :

- 체력단련실 개선 (천장, 벽면 내장재 철거 등 개선)

- 우레탄 방수 (바닥 182㎡, 벽 72㎡)

○  추진방식 : 전자공개수의계약(조달청 G2B 전자시스템)

○  총사업비 : 금41,891천원

Ⅱ. 추진결과

○  예산집행 실적

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	원인행위액	집행액	집행잔액	집행율
계	41,891	23,636	23,636	18,255	56.4
사무관리비
공공운영비
시 설 비	41,891	23,636	23,636	18,255	56.4

○  사업추진 실적

- 사업추진율 : 계획 60% / 실적 56%

	0%		10%		20%		30%		40%		50%		60%		70%		80%		90%		100%
계 획
실 적

- 세부추진 사항

추진계획	추진실적
◦추진계획수립 : 3월 ◦추진계획변경수립 : 4월 ◦기술용역타당성심사 : 4월 ◦구조(내진) 안전진단 : 5월 ◦보수·보강 실시설계 : 5월 ◦보수·보강 추진 : 6월 ◦기술용역타당성심사 : 7월 ◦설계계약 및 입찰 : 7월 ◦설계준공 : 7월 ◦공사계약심사 : 8월 ◦일상감사 : 8월 ◦공사입찰 및 계약 : 8월 ◦착공 : 8월 ◦준공 : 9월 ◦공부정리 등 : 9월	◦추진계획수립 : 3월 ◦추진계획변경수립 : 4월 ◦기술용역타당성심사 완료 : 4월 ◦구조(내진) 안전진단 용역 실시 : 5월 ◦내진 보수·보강공사 실시 : 6월 ◦내진 보수·보강 추가공사 실시 : 7월

Ⅲ. 사업추진 애로 및 개선방향

○  애로사항

- 서울특별시 건축조례 17조에 의거 가설건축물은 옥상설치 불가

- 건축법 시행령 제32조 및 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 제56조,        제58조(2009년7월16일) 3층이상, 지진구역1내 소방청사는 내진설계        대상으로 구조(내진)안전진단 우선 실시하여 결과에 따른 내진성능        설계 및 보강공사 추진함

※ 부족한 예산 소방재난본부 조직경영팀 예산담당 부서와 협의 후 확보

○  개선방향

- 서울특별시 공고 제2014-252호 도시관리계획(지구단위계획)결정         (변경)(안) [성내지구 외177개소 민간부문시행지침 일부 변경]        (2월7일 시행)에 의거 50㎡ 미만 증축시 구 도시계획위원회 심의       없이 증축이 가능함

-  당초예산 41,891천원중 23,636천원을 안전진단 및 내진보강으로         기 집행하였고

-  2016년도 70,000천원 예산 편성하여 체력단련장 개선 및 방수공사 추진예정 예정. 끝.

작 성 자	소방행정과 장비회계팀장 : 송 재 수 담당자 : 이호경