□ 주요사업 월별추진실적(상수도 GIS DB 정확도개선)

월별	추진계획	추진실적
1월	․용역사업 발주설계 ․발주계획 수립	․용역사업 발주설계 : ’13.1.21 ․발주계획 수립 : ’13.1.24 ․정확도개선 16㎞(누계16㎞,공정38.35%)
2월	․계약심사 및 제안요청서 검토 ․발주 및 공고	․제안요청서 검토 : ’13.1.30 ․용역사업 발주 및 공고 :’13.2.6 ․정확도개선 16㎞(누계32㎞,공정38.50%)
3월	․제안서 평가위원회 개최 ․우선협상 및 계약 착수	․제안서 평가 : ’13.3.8 ․우선협상 및 계약체결 의뢰:’13.3.20 ․정확도개선 41㎞(누계73㎞,공정38.89%)
4월	․용역 착수보고 ․용역수급자 교육 및 현장점검	․착수보고회 개최 : ’13.4.16 ․교육 및 현장점검 실시 : ’13.4.23 ․정확도개선 27㎞(누계100㎞,공정39.16%)
5월	․기준점 선점 및 승인 ․하절기 대비 맨홀사고 예방교육실시	․기준점 선점 및 승인 : ’13.5.1~5.20 ․맨홀사고예방 안전교육실시 : ’13.5.31 ․정확도개선 79㎞(누계179㎞,공정39.91%)
6월	․공정보고회 개최 ․탐사작업 현장점검실시	․공정보고회 개최 : ’13.6.4 ․탐사작업현장 점검실시 :’13.6.17~6.28 ․정확도개선 159㎞(누계338㎞,공정41.43%)
7월	․공정보고회 개최 ․기존관로 조사탐사 측량 실시	․공정보고회 개최 : ’13.7.10 ․폭염대비 안전점검실시 :’13.7.20~7.26 ․정확도개선 31㎞(누계369㎞,공정41.72%)
8월	․대표자 간담회 실시최 ․탐사현장 안전교육 및 점검	․안전교육 및 점검실시 : ’13.8.7~8.9 ․대표자 간담회실시 :’13.8.29 ․정확도개선 39㎞(누계408㎞,공정42.09%)
9월	․공정보고회 개최 ․시설물 상이내역 현장확인 점검	․공정보고회 개최 : ’13.9.3 ․상이내역 현장점검 실시:’13.9.3~9.20 ․정확도개선 47㎞(누계455㎞,공정42.54%)
10월	․공정보고회 개최 ․조사탐사 및 측량작업 실시	․공정보고회 개최 : ’13.10.15 ․조사탐사/측량 : ’13.10.16~10.31 ․정확도개선 51㎞(누계506㎞,공정43.03%)
11월	․기존관로 성과심사 의뢰 ․용역 중간보고회 개최	․공공측량 성과심사 : ’13.11.6~12.18 ․용역 중간보고회 개최 :’13.11.20 ․정확도개선 48㎞(누계554㎞,공정43.49%)
12월	․불탐구간 점검 및 재탐사 결과보고 ․설계변경 및 준공검사	․불탐구간점검 재탐사결과 : ’13.12.13 ․설계변경 및 준공검사 :’13.12.24 ․정확도개선 26㎞(누계580㎞,공정43.74%)