‘13 성과 관리계획 주요사업명	상수도 GIS DB 정확도 개선 (BSC – 15)			담당			소속		시설관리부
							성명		이경희
							전화		3146-1554
시장 공약사항	❈
시정운영중장기계획	❈ 상수도사업의 전문성 강화
시장 지시사항	❈
1. 사업개요	□ 사업목적 ○ 기존 상수도 GIS DB에 대한 정확도 개선으로 안전하고 과학적인 시설관리기반을 구축하여 업무효율을 향상하고, 사업계획 수립 등 각종 의사결정 자료로 활용 □ 사업개요 ○ 기 간 : '05 ~ '20년 ○ 대 상 : 상수도관로 10,468㎞ ○ 사업내용 - 상수도시설물(관로 및 부속시설물)에 대한 제원조사 및 위치탐사 - 인공위성과 GPS 등 첨단 시설장비를 활용한 좌표측량 및 DB 수정편집
	사업종료년도의 최종목표치		100%(10,468km)
	실 시 근 거	상수도 GIS DB 정확도개선사업 추진계획 (본부장방침 제113호, 2011.4.20)
2. 사업비 (백만원)	연도별 사업비	총사업비	2011년		2012년			2013년		2014년
		18,311	4,804		3,980			4,817		4,710
	‘13년도 예산 집행실적 및 향후전망	‘12년도	1/4분기		2/4분기			3/4분기		4/4분기
		계 획	340		1,595			1,595		4,817
		집 행	340		1,595			1,595		4,817
		집행 실적 저조 사유	정상추진
		향후 전망	정상추진
3. 지표 및 세부사업 추진 실적
구 분		'13년도 목표치	4/4분기 목표치			추 진 실 적
❈ 상수도 GIS DB 구축률		43.74%	43.74%			43.74% (누계 4,579㎞)

4. 분기별 주요 추 진 사 항 (주요 방침)	1/4분기	○ 2013년 상수도 GIS DB 정확도개선사업 발주 - 발주계획 수립 : ’13. 1. 24 - 제안요청서 검토(본청 정보화기획단) : ’13. 1. 30 - 용역발주(본청 재무과) : ’13. 2. 06 - 제안서 평가 : ’13. 3. 08 - 협상 및 계약 : ’13. 3. 20 ○ 착공신고 및 과업수행계획 제출 : ’13. 3. 29 - 내용 : 계획공정, 과업수행인력, 장비, 수행계획, 등 ○ 2012년 상수도 GIS DB 정확도개선사업 준공 : ’13. 3. 31 - 추진기간 : ’13. 1. 1. ~ 3. 31 - 추진실적 : GIS DB 정확도개선, 총 73㎞(동남41㎞, 서남16㎞, 서북16㎞)
	2/4분기	○ 착수보고회 개최 : ’13. 4. 16 - 내용: 용역수행방안 보고(참석자 내외 전문가 17명) ○ 사업소 용역착수 설명회 개최 : ’13. 4. 17 ~4. 19 - 내용: 사업수행계획 설명 및 업무지침 교육(대상 8개사업소 310명) ○ 용역수급자 장비점검 및 교육실시 : ’13. 4. 23 - 내용: 참여기술인력에 대한 교육과 장비점검 실시 ○ 공정보고회 개최(4월간) : ’13. 5. 7 - 내용: 4월간 추진실적 및 향후추진계획 보고 ○ 기준점 선점 및 승인 : ’13. 5. 1 ~5. 20 - 내용: 기준점 조사, 도상선점 및 설치 승인 ○ 야간 조사측량현장 점검 실시 : ’13. 5. 22 ~5. 24 - 내용: 신설관로 조사 및 탐사 측량현장 점검(3개지역 14개소) ○ 맨홀 질식재해예방 안전교육 실시 : ’13. 5. 31 - 내용: 용역 작업자에 대한 맨홀 출입시 안전관리 교육(참석자 총 221명) ○ 공정보고회 개최(5월간) : ’13. 6. 4 - 내용: 5월간 추진실적 및 향후추진계획 보고 ○ 탐사작업 현장점검 실시 : ’13. 6. 17 ~6. 28 - 내용: 기존관로 측량 탐사현장에 대한 점검실시(3인1조 3개반 편성)

4. 분기별 주요 추 진 사 항 (주요 방침)	3/4분기	○ 공정보고회 개최 : ’13. 7. 10 - 내용: 월간 추진실적 및 향후추진계획 보고(참석자 사업 PM 등10명) ○ 폭염대비 밀폐공간 작업현장 안전점검 실시 : ’13. 7. 26 - 점검기간 : ’13. 7. 20 ~ 7. 26 - 내용 : 맨홀·공동구 출입시 산소농도측정 실시 및 안전수칙준수 여부 ○ 탐사작업현장 안전메뉴얼 재정비 통보 : ’13. 8. 6 - 내용 : 조사탐사 측량 작업현장 안전메뉴얼을 재정비하여 이행토록 통보 ○ 안전교육 및 현장점검 실시 : ’13. 8. 12 - 점검내용 : 여름철 장마로 중지되었던 작업재개전 안전교육 및 점검실시 - 점검기간 : ’13. 8. 7 ~ 8. 9(3일간) - 점검방법 : 2인 1조 점검반 편성하여 용역사 합동사무실 방문점검 ○ 용역사 대표자 간담회 : ’13. 8. 29 - 내용: 탐사측량작업현장 안전관리 및 품질관리, 청렴 등 현안사항 ○ 공정보고회 개최(8월간) : ’13. 9. 3 - 내용 : 월간 추진실적 및 향후추진계획 보고 - 참석자 : 시설관리부장 및 사업 PM 등 관계자 12명 ○ 시설물 상이내역 현장 점검 실시 : ’13. 9. 20 - 점검내용 : GIS 시설물 상이내역에 대한 사업소와 현장함동 점검 - 점검기간 : ’13. 9. 3 ~ 9. 20.(대상건수 총 366건) ○ 성과심사 대비 확인 사전검사 실시 : ’13. 9. 30 - 대상 : 총 580㎞(동남 202, 서북 194, 서남 184) - 방법 : 컨소시엄간 작업인력을 교차하여 야장대조및 편집도면 검사실시 - 기간 : ’13. 9. 21 ~ 9. 30
	4/4분기	○ 공정보고회 개최(9월간) : ’13. 10. 15 - 내용 : 월간 추진실적 및 향후추진계획 보고(참석자 사업PM 등 12명) ○ 중간보고회 개최 : ’13. 11. 20 - 내용: 과업 중간성과 및 향후추진계획 등 사업수행관련사항 보고 - 결과: 주요의견 및 보고회시 제시된 내용 반영(참석자 사업 PM 등24명) ○ 불탐구간 점검 및 재탐사 결과보고 : ’13. 12. 13 - 대상 : 불탐 및 준탐관로 495개소 총 38.06㎞ - 기간 : ’13. 11. 21 ~ 12. 2 - 결과 : 재탐사 결과 탐사율 2.1% 상승(92.7%→94.8%) ○ 공공측량 성과심사 실시 : ’13. 12. 18 - 결과 : 적합판정(일부 미흡한 사항은 수정보완 조치완료) - 기간 : ’13. 11. 6 ~ 12. 18(대한측량협회 통보일) ○ 설계변경 시행 : ’13. 12. 18 - 내용 : 계약금액 변경 없이 실제 시행량에 따른 물량변경 - 변경계약의뢰 : ’13. 12. 18(본청 재무과) ○ 정확도검사 실시 결과보고 : ’13. 12. 23 - 1단계검사 : ’13. 12. 6 ~ 12. 15(측량협회 성과심사 입회) - 2단계검사 : ’13. 12. 16 ~ 12. 20(용역수행사간 교차검사) - 결과보고 : ’13. 12. 23(검사결과 미진한 사항 보완조치) ○ 준공검사 실시 : ’13. 12. 24 - 내용: 1차분 준공성과 검사(준공금액 : 총 4,180백만원)

5. 검토 및 개선사항		○ 정상추진
6. 향 후 계 획		○ 공공측량 성과심사(수탁기관 대한측량협회)
7. 평가결과 전 분 기 지적사항 및 조치사항	구 분	지적사항	조치사항
	1/4 분기	없음	해당없음
	2/4 분기	없음	해당없음
	3/4 분기	없음	해당없음
	4/4 분기	없음	해당없음