붙임 3	장기사용 배급수관 정비

연번

사업명

사업개요

추진실적 및 향후계획

애로사항 및 대응방안

공정률

1

장기사용 배급수관 정비

(남부수도사업소)

□ 사업개요

○ 사업대상(규모) : 45㎞

○ 사업기간 : ’20~24’

○ 소요예산 : 470억원

○ 사업대상 :

- ’84~’85년 닥타일주철관

- 도장재 탈락 취약상수도관

○ 공사방법 : 단위공사 및 연간단가공사 시행

□ 2021년 추진계획

○ 사업대상(규모) : 2.7㎞

○ 소요예산 : 2,702백만원

□ 추진실적

○ 단위사업 발주 : 현재 공사착공 및 정상 추진 중

- 독산동 1071외 7개소 장기사용 배급수관 정비공사

- 사당동 1032외 9개소 장기사용 배급수관 정비공사

○ 연간단가 공사시행

- 누수복구 및 급수공사 시 발견되는 취약관로 정비

○ 사업소별 추진실적                                               (단위: ㎞ )

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
목표	28	4.4	4.7	7.1	1.9	1.7	2.7	3.8	1.7
실적							1.24
달성율(%)							46

○ 예산집행현황                                                 (단위: 백만원)

예산현액	집행액(지출액)	집행률(%)
2,260	1,644	72.7

□ 향후계획(추진일정)

○ 시민불편 최소화 및 안전사고 사전예방

-  부진사업에 대한 공정보고회 개최 및 안전교육 강화

○ 지장물 과다

- 시험굴착 시행 등 부설방법

검토

○ 주민반대 등 민원발생

- 개별 면담 및 공사추진 타당성 설명 등

(46%)

공정관리

철저