			서울기록원 건립공사

(행정자치위원회, 소관부서 : 행정국 정보공개정책과)

기록물 통합 관리체계 구축을 위한 서울기록원의 차질없는 건립 추진

시민의 공감과 참여를 이끌 수 있는 다양한 운영 프로그램 개발

Ⅰ		사업개요

추진개요

❍ 사업내용

- 위  치 : 은평구 통일로 684

- 규  모 : 연면적 15,004㎡(지상5층, 지하2층)

- 공정율 : 9%(지하터파기를 위한 흙막이 설치 중)

❍ 사업기간

- 2013. 6월 ~ 2018. 6월(공사기간 :  ’16.04월 ~ ’18.04월)

❍ ‘16년도 사업예산

(단위 : 백만원)

예산과목		2016예산	2015예산	증감	산출내역
계		18,140	3,734	증14,406
	시설비	16,638	3,598	증13,040	건축,토목,기계,전기공사 시행
	감리비	1,470	100	증1,370	건립공사에 따른 감리원 투입
	시설부대비	32	36	감4

※ 총사업비 : 49,895백만원

- ’14년이전 : 300백만원 ,  ’15년 : 3,734백만원 ,  ’16년 이후 : 45,861백만원

❍ 사전절차 이행여부

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	지역보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
□	☑	☑	☑	☑	□	□	☑	□	□
경상	투자
□	☑

❍ 추진방식

- 직접사업 수행

2016년 추진실적

❍ 세부추진실적

- ’13.06.14.              : 사업계획 수립(서울기록원 건립 계획)

- ’13.06.14.~‘13.08.21. : 투자심사(’15.04.06 2단계 투자심사)

- ’14.09. ~ 12.          : 현상설계공모

- ’15.01. ~ ’15.11.      : 설계용역

- ’15.10.28.              : 서울기록원 건립을 위한 지구단위계획 결정

- ’16.04.20               : 공사 착공

- ’16.05.20               : 기공식 개최

- 계약사업일 경우 계약현황을 반드시 기재요망

계약의뢰	체약체결	선금	기성금	완납금
2016.03.07	2016.04.06	2016.07.05

❍ 예산집행현황

- ‘16년도(9월 현재)

(단위:백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용․ 변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	지출액 (E)	차년이월 (F)	집행잔액 (D-E-F)	집행률 (E/D)×100
2016	18,140	2,377	-	20,517	2,934	-		14.3

※ ’16년 차년이월액은 기재하지 않아도 무방, ’16년 집행률은 9월 현재기준

- 최근 3년간 예산집행실적

(단위 : 백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이‧전용‧변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	지출액 (E)	차년이월 (F)	집행잔액 (D-E-F)	집행률 (E/D)×100
2013
2014	300			300	299		1	99.7
2015	3,734			3,734	1,357	2,377		36.3

※ 예비비 사용이 있을 경우에는 이․전용에 포함, 예비비 액수 별도표시 ex) (예비비0,000)

※  ’13년,  ’14년,  ’15년 예산집행 실적은 각각 결산서 참조하여 작성

향후 추진일정(향후계획)

❍ 공사추진에 따른 기성금 지급

❍ 암반 터파기에 따른 소음․진동 민원 적극적으로 대처하여 공정 추진

Ⅱ		성과분석(필수기재)

잘된 점

❍ 건립공사와 운영 시스템(ISP 등)과 서울시민 자료수집 용역 등을 병행 추진으로 개관 시 운영 리스크 최소화

❍ 지하 암반 터파기(발파 등)로 인근 주민의 소음․진동 민원수렴 및 경청하기 위하여 주민설명회 개최와 공사진행사항 견학(설명)을 통한 주민과의 소통

보완할 점

❍ 인근 주민 민원으로 공사 지연되어 예산집행이 저조하나, 철저한 공정관리로 사업기간내 완료되도록 사업부서와 긴밀히 협의 추진