[붙임 2] - ‘16년 주요시책사업분석‧평가사업 작성서식

			용답동 상가시장 일대 하수관로 경사 조정

(도시안전위원회, 소관부서 : 물순환안전국 물재생계획과)

집중호우 시 침수우려가 높은 용답동 상가시장 일대 하수관로 확대개량 및 경사 조정을 시행하여 저지대 배수체계 개선

Ⅰ		사업개요

추진개요

❍ 사업내용

-  위  치 : 용답동 85-5 ~ 24-37호

-  규  모 :  하수관거 경사조정 □ 2.0×1.5m ~ □ 3.0×2.0m, L=549m

· ‘15년(1차):  □ 3.0×1.5m ~ □ 3.0×2.0m, L=180m

· ‘16년(2차):  □ 2.0×1.5m ~ □ 3.0×1.5m, L=369m

❍ 사업기간

- 2015.6.15. ~ 2016.11.14.

❍ ‘16년도 사업예산

(단위 : 백만원)

예산과목		2016예산	2015예산	증감	산출내역
계		1,400	1,400	0
	통계목
	시설비	1,400	1,400	0	□2.0×1.5m~□3.0×1.5m, L=369m

※ 총사업비 : 2,950백만원

- ’14년이전 :  150백만원 ,  ’15년 : 1,400백만원 ,  ’16년 이후 : 1,400백만원

❍ 사전절차 이행여부 : 해당없음

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	지역보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
□	☑	□	□	□	□	□	□	☑	□
경상	투자
□	☑

❍ 추진방식

- 직접사업 수행

2016년 추진실적

❍ 세부추진실적(계속사업인 경우 그간 추진실적 포함)

- 2015.   6. 11. : 1차 공사 착공

- 2015. 12. 15. : 1차 공사 준공(사각형거 180m 부설)

- 2016.   2.  5. : 2차 공사 착공

- 2016.  4. 25. : 사각형거 369m 중 90m 부설 후 공사 일시중지

※ 강관(D1,500mm) 돌출로 계획된 노선으로 사각형거 부설 불가

- 2016.  5. 20. : 사업내용 변경 검토

※ 총 사업구간 549m 중 상류측 279m 구간 시설물 내부 보수 후 기존관로 활용(통수능 검토결과 수리적 안정)

- 2016.   6. 09. : 보수 구간 시설물 정밀점검 시행

- 2016.   9.      : 설계변경 검토(공정률 42%)

- 계약사업일 경우 계약현황을 반드시 기재요망

계약의뢰	체약체결	선금	기성금	완납금
2016.2.5.	2016.2.11.	109(3.11.)	593

❍ 예산집행현황

- ‘16년도(9월 현재)

(단위:백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용․ 변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	지출액 (E)	차년이월 (F)	집행잔액 (D-E-F)	집행률 (E/D)×100
2016	1,400			1,400	593	-	807	42.3

- 최근 3년간 예산집행실적

(단위 : 백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이‧전용‧변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	지출액 (E)	차년이월 (F)	집행잔액 (D-E-F)	집행률 (E/D)×100
2013
2014	150			150	118		32	78.6
2015	1,400			1,400	1,263		137	90.2

향후 추진일정(향후계획)

❍ 2016. 9. : 설계변경 시행

❍ 2016.11. : 2차 공사 완료

Ⅱ		성과분석

잘된 점

❍ 용답 빗물펌프장으로 유입하는 간선 관로를 확대 개량하여 답십리역 일대 저지대의 배수체계 개선

보완할 점

❍ 2016. 9월 기준 집행률 42%로 집행현황 저조, 조속한 집행 필요