공사 계약심사 제2018 – 53호

주 요 심 사 내 용

□ 공 사 명 : 모래내로 노후보도 정비공사

위 치	모래내로 380~408간
사업개요	◦ 공사내용 - 보도포장 A=9.7@ - 측구정비 L=317m - 보차도경계석 설치 L=365m ◦ 총공사비 : 239,454천원 - 도급비 : 187,044천원 - 관급비 : 46,264천원 - 이설비 : 6,146천원
공사기간	착공일로부터 ~ 150일

□ 심사결과 : 감 2,673 천원 ( 1.43 %)

(단위 :  천원)

구 분	심사요청 금액	심사평가 금액	조정 금액	조정률
도 급 비	187,044	184,371	2,673	1.43

□ 주요 심사내용

◦ 보행자 안전휀스 수량 조정

- 보행자 안전휀스 : 182경간 → 91경간

· 본 사업은 총 4개 구간에 대한 보도정비 사업으로 공사가 일괄 진행되지 않으므로 재활용이 가능한 안전휀스에 대해 구간별 공사 연장을 고려하여 안전휀스 구입 수량을 조정하였음.

◦ 자재단가 조정 : 프로판가스 등 2건

- 프로판 가스 : 1,639.40원 → 855원 (조달청 거래가격)

- 고철 : -300,000원 → -330,000원 (물가자료)

□ 기타사항

◦ 작업조건, 규격, 할증 등을 명시하여 향후 정산이 가능하도록 내역서 작성

◦ 심사금액 보다 원가를 더 절감할 수 있는 경제적인 공법 및 단가 등은 자체발주 후 조정내용 및 사유를 명기하여 결과 송부

◦ 「지방자치단체 세출예산 집행기준」에 의거 계약심사를 통하여 절감된 예산사용시 예산부서와 사전협의

◦ 관급비, 이설비 계약심사 제외