공사 계약심사 제2015 - 37호

주 요 심 사 내 용

□ 공 사 명 : 삼각소공원 정비공사

위 치	남가좌동210-16일대
사업개요	○ 공사개요 - 식재공사 : 느티나무 등 3종 식재 - 시설물공사 : 파고라1조, 등의자 6개소, 운동기구 4개소 - 철거공사 ○ 총공사비 : 50,000천원 - 도급비 : 28,127천원, 관급자재비 : 21,873천원
공사기간	착공일로부터 30일간

□ 심사결과 : 감 1,119천원(감 4.26%)

(단위 : 천원)

구 분	심사요청 금액	심사평가 금액	조정 금액	조정률
도 급 비	28,127	26,928	1,199	4.26 %

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 조달청 가격정보 및 시중물가정보지 등

- 합판(내수1급,12mm×1220×2440) : 7,935원 → 7,711원 [가격정보]

- 연마지(#180*240) : 220원 → 200원 [가격정보]

- 와이어매쉬(#8 150*150) : 2,090원 → 1,728원 [가격정보]

- 원형등의자(D2,000) : 2,050,000원 → 1,656,363원

- 경유 : 1,325.47원  →  1,284.74원  [서울시 4월기준]

◦ 내역서 및 일위대가 조정 : 건설공사 표준품셈 등

- 제29호표 고무매트걷기 [토목12-3-3, 보도포장대가 적용]

․ 특별인부 0.0035인 → 0.0033인, 보통인부 0.0065인→0.0066인

- 제36호표 보호판설치 [2015서울시조경공서설계대가기준 , 단위조정 ton→조]

․ 철공 3.51인 → 0인, 특별인부 0.066인 → 0.09인, 보통인부 0.06인 → 0.02인

- 제37호표 받침틀설치 [2015서울시조경공서설계대가기준, 단위조정 m→조]

․ 특별인부 0.0118인 → 0.05인,  보통인부 0.0059인 → 0.07인

□ 기타사항

◦ 계약심사에 따른 설계도서 수정 및 물량 재확인 후 사업발주

◦ 작업조건, 규격, 할증 등을 명시하여 향후 정산이 가능하도록 내역서 작성

◦ 심사금액 보다 원가를 더 절감할 수 있는 경제적인 공법 및 단가 등은 자체        발주후 조정내용 및 사유를 명기하여 결과 송부

◦ 「지방자치단체 세출예산 집행기준」에 의거 계약심사를 통하여 절감된 예산사용시

예산부서와 사전협의