『남산 회현자락 한양도성 보존.정비 및 공원조성공사』

주차장 포장공법 및 포장문양 변경 등에 따른 검토 결과

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[▸관련공문 : 남산회현 - 13, 14호(2015. 6.3, 6.5)]

Ⅰ		공사개요

○ 위    치 : 중구 회현동1가 100-177번지 일대

○ 규    모 : 한양도성 보존.정비 448m, 공원조성 45,000 ㎡

○ 기    간 : 2014. 12.19 ~ 2016.12.31

○ 사 업 비 : 5,159백만원 (조경 4,392, 문화재 767)

Ⅱ		실정보고

○ 책임감리 실정보고 내용

▸주차장 및 산책로 구간은 당초 원지반에 화강석 통석(T100)을       포장토록 계획 되었으나 본 주차이용 형태 (대형버스 등 상시이용)를

감안 지반구조 안정화 및 석재 길이 변경 필요

- 지반구조 : 원지반+통석 → 원지반+보조기층(T150)+콘크리트타설(T150)

+와이어메시+몰탈(T80)+통석으로 변경]

- 석재 길이 : 주차장 L=1000 → L 500, 산책로 L=1000 → L 650 변경

▸당초 계획된 포장재 중 문경석 생산 중단 및 주차구역 구분을       위한 석종 간 명시성 부족 등으로 석종 및 포장문양 변경 필요

- 주차장, 산책로 포장문양 : 포천석+문경석+거창석 → 익산석으로 변경

- 주차구획 구분 : 석종표시(문경석+거창석) → 쉬트지 도색 및 안내표시로 변경

▸안중근의사 동상 옆 화장실측 자투리 공간 포장면적 누락분 반영

- 화강석 통석 포장 106.6㎡

▸남산 소나무재선충병 발병으로 인한 소나무 이동 제한에 따라        소나무 수급 변경 불가피

- 주차장 주변 소나무 식재 (36주) → 이식목 대체 (36주)

○ 변경 금액 (계략 공사비)

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증 감
총공사비		4,392,644	4,399,103	증) 6,459
도급비	공급가액	2,727,257	2,908,087	증) 180,830
	부가가치세	272,726	290,809	증) 18,083
	소계	2,999,983	3,198,896	증) 198,913 (6.63%)
이전비		270,000	270,000	-
관급자재비		1,122,661	930,207	감) 192,454

Ⅲ		검토 결과

○ 포장공법 및 석재 길이 변경

▸안중근의사 기념관 및 교육연구정보원 등을 방문하는 관람객 및 교육생들의

대형 관광버스 상시 주차와 산책로 화장실 청소차량 통행을 감안 지반구조 보강을        위한 포장공법 및 석재 길이 변경 적정함

○ 포장재질 및 문양 변경

▸포장 재질, 문양은 석종 간 가격, 품질, 디자인 등 비교 결과 단일 석종(익산석)

으로 변경과 차선구획 표시 쉬트지 도색 및 안내표시 변경 적정함

○ 화강석 포장면적 변경

▸안중근의사 동상 옆 화장실측 자투리 공간 포장면적 반영 적정함

※ 관급자재 변경

- 화강석  : 거창석, 포천석, 문경석 4,593.2㎡  →  익산석 4,699.8㎡  변경 (추가 106.6㎡ 포함)

- 레미콘(25-18-12) 증) 712㎡,  보통시멘트  증) 189,851㎏

○ 재선충으로 인한 소나무 식재 변경

▸현장 내 이식목 식재밀도 조정에 따라 발생되는 소나무로 대체

배식함이 적정함 (36주)

Ⅳ		검토의견

○ 주차장 포장공법 및 포장문양 변경, 소나무 식재 변경 등에 대하여는 현 실정에        맞게 적정하게 검토된 사항으로 향후 설계변경 시행 및 시공에 철저를          기하기 바람