준공정산내용

1. 공 사 현 황

가. 공 사 명 : 이촌한강공원 생태놀이터 조성사업

나. 도 급 액 : 금395,240,000원

다. 공사기간 : 2017. 06. 14. ~ 2017. 9. 30

라. 발 주 처 : 한강사업본부 생태공원과

마. 도 급 자 : 신성종합조경㈜ 대표 최 호 영

㈜충림종합기술 대표 이 혜 경

2. 정 산 내 용

구 분	정 산 내 용	금액변동
순공사비	▶ 흙콘크리트-1포장물량(관급자재)정산으로 인한 정산 ․ 흙콘크리트-1 : 391㎡ → 358㎡ ▶ 잔디 실적율(80%) 반영으로 인한 정산 ․ 잔디-1 : 금2,066,500원 → 금1,652,577원 소 계	감 150,810원 감 413,923원 감 564,733원
설치검사 수수료	▶ 설치검사수수료 정산 ․ 설치검사수수료 : 금539,669원 → 금290,300원 소 계	감 249,369원 감 249,369원
사회보험료 등	▶ 순공사비 정산으로 인한 간접노무비, 사회보험료 등 정산 ․ 간접노무비 : 금5,196,225원 → 금5,176,184원 ․ 산재보험료 : 금2,061,852원 → 금2,053,900원 ․ 고용보험료 : 금459,951원 → 금458,177원 ․ 기 타 경 비 : 금16,390,885원 → 금16,359,276원	감 20,041원 감 7,592원 감 1,774원 감 31,609원 감 61,376원

구 분	정 산 내 용	금액변동
부대경비	▶ 미사용금액 정산으로 인한 제경비 정산 ․ 일반관리비 : 금19,628,117원 → 금19,590,550원 ․ 이 윤 : 금12,006,017원 → 금12,005,426원 ․ 부가가치세 : 금35,930,909원 → 금35,839,545원 소 계	감 37,567원 감 591원 감 91,364원 감 129,522원
계		감 1,005,000원

3. 준공정산금액                                               (단위 : 원)

구 분		공 사 금 액			비고
		당 초	정 산	증 감
도급금액	공 급 가 액	359,309,091	358,395,455	-913,636
	부가가치세	35,930,909	35,839,545	-91,364
	계	395,240,000	394,235,000	-1,005,000

붙 임 : 준공(정산) 내역서 1부.  끝.